11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 구에서 ‘14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척률(%)
범어천 생태하천 복원사업(의뢰)	22,700	13,493	3,459	5,748	2015	2009
지산·범물권 노인복지관 건립(자체)	4,303	2,223	2,080	0	2014	2011
고산권 공공도서관 건립(의뢰)	8,803	548	2,782	5,473	2015	2011
파동문화센터 건립(자체)	4,463	2,399	2,064	0	2014	2011
해피타운 프로젝트(자체)	4,000	2,565	1,435	0	2015	2011
진밭골 진입도로 확장공사(의뢰)	7,018	901	3,932	2,185	2015	2011
만촌1동 주민센터 건립(자체)	3,503	505	2,998	0	2014	2012
신매동 공영주차장 조성공사(자체)	2,593	2,343	250	0	2015	2013
한방 휴 사업(의뢰)	1,430	77	623	730	2015	2013
고산보건복지센터 신축(의뢰)	6,098	1,497	395	4,206	2015	2013
수성국민체육센터 건립(의뢰)	11,146	657	1,175	9,314	2016	2014

‣ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2014년에 추진한 사업

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업명

만촌1동 주민센터(문화센터) 건립(자체)

담당자

행정지원과 유신(☎666-2225)

사업목적 및 필요성

○ 만촌1동 주민들의 숙원사업인 주민센터(문화센터)를 신축하여 주민들의 다양한 행정수요에 대처하고 주민이 만족하는 양질의 민원 서비스 제공

사업개요

○ 기    간 : 2012 ~ 2014. 10월

○ 위    치 : 만촌동 1445-1번지 외 1필지

○ 사업규모 : 부지 1,322㎡, 연면적 1,720.22㎡(지하1층, 지상4층)

○ 사업내용 : 동주민센터, 문화센터 건립

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,503백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	3,503	505	2,998	0	0
국비	1,000	332	668	0	0
시비	500	22	478	0	0
구비	2,003	151	1,852	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 만촌1동 주민센터(문화센터) 건축계획 수립 : 2012. 1월

○ 기본 및 실시설계 용역 : 2013. 1월 ~ 6월

○ 공사착공 : 2013. 9월

○ 공사준공 : 2014. 10. 10

○ 청사이전 : 2014. 10. 13

○ 개 소 식 : 2014. 10. 21

향후계획

○ 해당없음

사업변경 내역

○ 투융자 심사 당초 사업비 3,900백만원 → 실제 예산편성액 3,700백만원

사업명

지산‧범물권 노인복지관 건립(자체)

담당자

복지과 최일석(☎666-2555)

사업목적 및 필요성

○ 급속화되고 있는 고령화사회에 복합적 노인복지서비스 수요 급증

○ 다양하고 특성화된 프로그램 운영으로 어르신들이 심리적, 육체적으로

건강을 유지하고 여가활동 참여 기회 확대 제공

사업개요

○ 기    간 : 2011. 9월 ~ 2014. 5월

○ 위    치 : 범안로 99(범물동 1288번지)

○ 시 공 사 : (주)서림종합건설

○ 사업규모 : 부지 1,200.3㎡, 연면적 1,791.51㎡(지하1층, 지상3층)

○ 사업내용 : 사무실, 식당, 교육실, 건강증진실, 강당, 물리치료실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,303백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	4,303	2,223	2,080	0	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	658	315	343	0	0
시군구비	3,645	1,908	1,737	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 지산․범물권 노인복지관 신설계획 수립 : 2011. 9월

○ 도시계획시설결정 심의․고시 : 2012. 4월

○ 설계시행 : 2012. 9월 ~ 2013. 3월

○ 공사시행 : 2013. 5월 ~ 2014. 5월

○ 시범운영 : 2014. 7월 ~ 2014. 8월

○ 개관행사 : 2014. 9. 5

사업명

수성국민체육센터 건립(의뢰)

담당자

문화체육과 송종섭(☎666-2182)

사업목적 및 필요성

○ 다목적 체육관을 건립하여 지역 주민들에게 쾌적한 운동환경을 제공

사업개요

○ 기    간 : 2011. 4 ~ 2016. 6월

○ 위    치 : 범어동 산 176-1번지 일원(범어공원내)

○ 사업규모 : 부지 10,851㎡, 건축연면적 3,394㎡(지하1층, 지상2층)

○ 사업내용 : 다목적체육관, 헬스장, 체력측정실, 다목적체육강좌실, 사무실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,146백만원(국비 3,100, 특교금 1,650, 구비 3,796, 지방채 2,600)

※ 투융자심사 당초 사업비 : 7,400백만원(국비 3,000, 구비 4,400)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	11,146	657	1,175	4,564	4,750
국비(기금)	3,100	366	0	2,734	0
특별교부금	1,650	0	0	1,650	0
구비	3,796	291	1,175	180	2,150
지 방 채	2,600	0	0	0	2,600

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 기본계획 수립 : 2011. 4월

○ 생활체육시설 지원사업 공모·선정 : 2012. 1월(체육진흥기금 31억원 확보)

○ 설계시행 : 2013. 6월 ~ 2013. 11월

○ 토지 수용재결(지토위,중토위) : 2013. 11월 ~ 2014. 8월

○ 일상감사 및 계약심사(市) : 2014. 8월

○ 공사 착공 : 2014. 10월

향후계획

○ 공사 준공 : 2016. 6월(예정)

사업변경 내역(해당 시)

○ 총사업비 : 당초 7,400백만원 → 변경 11,146백만원(건축단가 등 조정)

○ 지방채 발행 : 당초 0백만원 → 변경 2,600백만원

○ 사업기간 : 당초 2014. 12월 → 2016. 6월

사업명

고산권 공공도서관 건립(의뢰)

담당자

문화체육과 최재원(☎666-2162)

사업목적 및 필요성

○ 10만 이상의 주민이 거주하는 지역에 공공도서관이 없어 정보접근성 저해

○ 문화 향유권 제고와 지식정보 격차를 해소하여 주민 삶의 질 향상

사업개요

○ 기    간 : 2011 ~ 2015. 6월

○ 위    치 : 달구벌대로650길 6(신매동)

○ 사업규모 : 부지면적 2,080㎡, 연면적 2,991.98㎡(지하1층, 지상4층)

○ 사업내용 : 종합자료실, 어린이자료실, 디지털자료실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,803백만원 (국비3,440, 구비1,763, 특교세1,000, 특교금600, 지방채2,000)

※ 투융자심사 당초 사업비 : 12,000백만원(국비 4,000, 시비 3,000, 구비 5,000)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	8,803	548	2,782	5,473	0
국비	3,439	136	976	2,327	0
구비	1,764	412	206	1,146	0
특별교부세	1,000	0	1,000	0	0
특별교부금	600	0	600	0	0
지방채	2,000	0	0	2,000	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 부지 매입 : 2012. 7월

○ 설계 시행 : 2013. 2월 ~ 2013. 10월

○ 공사 착공 : 2014. 2월

○ 공사 준공 : 2015. 6월

향후계획

○ 도서관 개관 : 2015. 하반기

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 12,000백만원 → 변경 8,803백만원(사업규모 축소)

○ 사업규모(연면적) : 당초 3,600㎡ → 2,991.98㎡

○ 사업기간연장 : 당초 2015. 2월 준공 → 2015. 6월 준공

사업명

파동문화센터 건립(자체)

담당자

평생교육과 권순남(☎666-4232)

사업목적 및 필요성

○ 문화시설 및 도심기반시설이 취약한 파동지역에 문화기반시설 확충으로 지역주민 삶       의 질 향상 및 지역 문화 향유권 확대

사업개요

○ 기    간 : 2011년 ~ 2014년

○ 위    치 : 수성구 파동로3길 62

○ 사업규모 : 대지면적 1,476㎡, 연면적 1,314.6㎡(지하1층/지상3층)

○ 사업내용 : 문화센터 건립

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,600백만원(국비 1,350, 시비 3,250)

※ 투융자심사 당시 사업비 : 3,800백만원(국비 1,350, 시비 2,450)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	4,463	2,399	2,064	0	0
국비	1,306	516	790	0	0
시비	3,157	1,883	1,274	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 파동문화센터 조성계획 수립 : 2010. 1월

○ 건립 부지매입 : 2012. 12월 ~ 2013. 7월

○ 설계 완료 : 2013. 7월

○ 공사 착공 : 2013. 9. 24

○ 공사 준공 : 2014. 7. 25

○ 문화센터 개관 : 2014. 11. 3

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 3,800백만원 → 변경 4,600백만원(부지매입비 증가)

○ 사업규모(연면적) : 당초 1,600㎡ → 1,314.6㎡

사업명

해피타운 프로젝트(자체)

담당자

도시디자인과 손경락(☎666-3273)

사업목적 및 필요성

○ 노후화된 저층주택지에 주차․방범․소공원 등 편의시설이 잘 갖춰진 공동주택의

장점을 접목하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

사업개요

○ 사업기간 : 2010. 7. ~ 2015. 2

○ 사업대상 : 단독주택 밀집지역 4개소

- 2012년 : 2개소(만촌1·2동)

- 2013년 : 2개소(범어2동·상동)

○ 사업내용

- 하드웨어사업 -도시가스공급관 설치,CCTV 및 보안등 설치, 도로개보수,

공영주차장 및 소공원조성, 벽화거리조성, 담장허물기사업,

커뮤니티시설 설치사업 등

- 소프트웨어사업 - 지역주민 참여활성화 및 주민역량강화 프로그램사업

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 사 업 비 : 4,000백만원(국비 2,000,시비 1,000,구비 1,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	4,000	2,565	1,435	0	0
국 비	2,000	1,525	475	0	0
시 도 비	1,000	520	480	0	0
시군구비	1,000	520	480	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2010. 11월 : 해피타운 프로젝트 기본계획 수립

○ 2012.  1월 : 만촌1·2동 실시설계 용역 발주

○ 2013.  1월 : 범어2·상동 실시설계 용역 발주

○ 2014.  2월 : 만촌1·2동 해피타운 프로젝트 완료

○ 2015.  2월 : 범어2·상동 해피타운 프로젝트 완료

향후계획

○ 해피타운 프로젝트 사업의 성과를 바탕으로 향후 단독밀집지역에 대해 도시

재생사업의 지속적 추진

사업명

신매동 공영주차장 조성공사(자체)

담당자

교통과 홍재진(☎666-3041)

사업목적 및 필요성

○ 보건복지센터 건립에 맞추어 지역주민의 주차난 해소와 각종 공공시설 이용에 편의를 제공하기 위하여 신매동 170-1번지외 2필지 공영주차장 조성 추진

사업개요

○ 기 간 : 2014.10월 ∼2015.10월

○ 위 치 : 신매동 170-1번지외 2필지

○ 규 모 :  주차대수 49면

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,593백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년 (전년도이월액+연말까지 소요액)	2016년 이후 (계획액)
계	2,593	2,343	250	235
구 비	2,593	2,343	250	235

※ 2014년 명시이월 : 235백만원

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 신매동 공영주차장 조성계획 수립 : 2013. 2. 19

○ 신매동 부지 매입 : 2013. 6. 25

○ 실시설계용역 : 2014. 3. 5 ∼ 2014. 8. 11

○ 도시계획시설 결정 : 2014. 7. 10

○ 신매동 공영주차장 조성공사 : 2014. 10. 8 ∼ 2015. 7. 10

【시공중지 : 2015.6.17, 고산권 보건복지센터 마감공사 완료시까지 】

향후계획

○ 2015. 10월경 준공 예정

※ 고산권 보건복지센터 마감 시점에 포장 예정

사업변경 내역

○ 사업기간연장 : 당초 2015. 7월 준공 → 변경 2015. 10월 준공

사업명

범어천 생태하천 복원사업(의뢰)

담당자

건설과 이재성(☎666-2923)

사업목적 및 필요성

○ 도심지의 오염된 하천을 친환경적인 생태하천으로 복원하고 치수기능 강화

○ 도심지 하천주변 주민들의 편의와 도시미관 향상을 위한 자연경관적 하천 조성

사업개요

○ 기    간 : 2009. 4월 ~ 2015. 10월

○ 위    치 : 두산오거리~어린이회관삼거리(1단계), 대구중앙고 동북편~신천합류지점(2단계)

○ 시 공 사

- 1단계 (주)인산종합건설 외 2개사

- 2단계 상서종합건설(주) 외 2개사

○ 사업규모 : 생태하천 정비 L=2.3㎞

○ 사업내용 : 생태하천 복원 L=2.3㎞, 유지용수관로 설치, 친수공간 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,700백만원

※ 투융자심사 당초 사업비 : 28,250백만원(국비 19,775, 시비 5,932, 구비 2,543)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년 (전년도이월액+ 연말까지 소요액)
계	22,700	13,493	3,459	5,748
국비	11,350	7,172	2,664	1,514
시비	6,810	3,733	602	2,475
구비	4,540	2,588	193	1,759

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 범어천(1단계) 생태하천 복원사업 : 공사 준공

○ 범어천(2단계) 생태하천 복원사업 : 공정률 90%

향후계획

○ 범어천(2단계) 생태하천 복원사업 준공 : 2015. 10월

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 28,250백만원 → 변경 22,700백만원(사업내용 변경)

○ 사업기간연장 : 당초 2014. 12월 준공 → 변경 2015. 10월 준공

사업명

진밭골 진입도로 확장공사(의뢰)

담당자

공원녹지과 김종면(☎666-2832)

사업목적 및 필요성

○ 지역주민들의 도심휴양지로 이용이 많은 대덕지 및 진밭골 진입도로 확보

○ 차량정체 해소와 도로폭원 협소로 인한 차량의 접촉․추락사고 예방

사업개요

○ 기    간 : 2012 ~ 2015. 8월

○ 위    치 : 범물동 1193번지선(진밭1교~진밭골 취락지구)

○ 사업규모 : L(길이)=2,600m, B(폭)=3m ⇒ 8m

○ 사업내용 : 도로확장

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,018백만원

※ 투융자심사 당초 사업비 : 8,000백만원(국비 7,200, 구비 800)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년이후
계	7,018	901	3,932	2,185	0
국비	3,900	823	3,077	0	0
구비	1,818	78	355	1,385	0
특별교부세	1,300	0	500	800	0

추진상황

○ 도시계획시설결정 및 설계용역 : 2012. 6월 ~ 2013. 4월

○ 도시계획시설사업 실시계획 인가 협의 및 고시 : 2013. 7월

○ 보상협의 : 2013. 8월

○ 1차공사 착공 : 2013. 12월

○ 2차공사 착공 : 2014. 6월

○ 1차, 2차공사 준공 및 3차공사 착공 : 2014. 12월

향후계획

○ 공사 준공 : 2015. 8월

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 8,000백만원  → 변경 7,018백만원(사업규모 축소)

○ 사업규모(도로폭) : 당초 10m → 변경 8m

사업명

한방 휴 사업(의뢰)

담당자

보건행정과 유기원(☎666-3241)

사업목적 및 필요성

○ 대구광역시 수성구․달성군, 경상북도 청도군의 우수한 한방의료(Medical)-휴양(Recreation)-

문화체험(Culture experience) 등을 연계한 국내․외 관광객 유치를 통해 매출증대,

일자리 창출로 지역경제 활성화

사업개요

○ 기    간 : 2013. 7월 ~ 2015. 12월

○ 위    치 : 수성구, 달성군, 청도군 일원

○ 사업규모 :

○ 사업내용

- 한방 휴 프로그램 개발 및 운영(한방의료관광, 문화관광 자원 등 연계)

- 한방 휴 하우징 사업(인프라 개선을 통해 휴 환경 제공)

- 한방 휴 제품화 사업(한방의료, 뷰티케어 등 체험프로그램 상품개발 및 제품화)

- 한방 휴 마케팅 사업(프로그램 및 우수 개발 제품의 판매 홍보 및 마케팅) 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,430백만원(국비 1,189, 구비 133, 민자 108)

※ 수성구, 달성군, 청도군 총사업비 : 4,147백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	1,430	77	623	730	-
국비	1,189	77	518	594	-
구 비	133	0	65	68	-
민 자	108	0	40	68	-

추진상황

○ 기본계획 수립 : 2013. 1월

○ 수성구-달성군-청도군 MOU 체결, 연계사업 신청 : 2013. 2월

○ 사업시행 : 2013. 7월 ~

○ 사업내용에 따른 사업 추진중 : 2013. 7월 ~ 현재

향후계획

○ 사업 완료 : 2015. 12월

사업명

고산보건복지센터 신축(의뢰)

담당자

보건행정과 김명수(☎666-3118)

사업목적 및 필요성

○ 고산지역 주민의 보건․복지 수요충족을 위해 건강생활지원센터와 노인복지관이 함께 하는 복합건축물을 건립하고자 함

사업개요

○ 기    간 : 2013. 2월 ~ 2015. 10월

○ 위    치 : 신매동 170-2(고산1동 주민센터 동남편)

○ 사업규모 : 대지 1,000m2, 건축면적 2,081.58m2(지하1층, 지상4층)

○ 사업내용 : 건강생활지원센터(1~2층), 노인복지관(3~4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,099백만원

※ 국비 919, 시비 732, 구비 2,355, 발전소지원금 1,093, 특별교부세 1,000

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	6,098	1,497	395	4,206	-
국비	918	-	-	918	-
시비	732	-	-	732	-
구비	2,355	1,497	3	855	-
특별교부세	1,000	-	89	911	-
발전소지원금	1,093	-	303	790	-

추진상황

○ 부지 확보 : 2013. 6. 25

○ 2015 건강생활지원센터 사업 우선지원대상 선정 : 2013. 10. 22

○ 고산권 보건복지센터 설계용역 완료 : 2014. 7. 19

○ 공사 일상감사 및 계약심사 요청 : 2014. 8. 21

○ 착공 : 2014. 10. 24  ※진척도 - 공정율 34%

향후계획

○ 공사 준공 : 2015. 10월

11-2. 지방채 발행사업

우리 구에서 ‘14년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
		해	당	없	음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2014년에 추진한 사업

11-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황 : 해당없음

11-3. 민간투자사업

우리 구에서 ‘14년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’13년까지 부담액	’14년 부담액	’15년 이후 부담 예정액
BTL		해	당	없	음
BTO		해	당	없	음

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2014년까지는 집행액(결산기준), 2015년 이후는 추정액

11-3-1. 개별 민간투자사업 현황 : 해당없음