사업명

범어천 생태하천 복원사업

담당자

건설과 이철우(☎666-2926)

필요성 및 기대효과

○ 도심지의 오염된 하천을 친환경적인 생태하천으로 복원하고 치수기능 강화

○ 도심지 하천주변 주민들의 편의와 도시미관 향상을 위한 자연경관적 하천 조성

사업개요

○ 기    간 : 2009. 4월 ~ 2014. 6월

○ 위    치 : 두산오거리~어린이회관삼거리(1단계), 대구중앙고 동북편~신천합류지점(2단계)

○ 시 공 사

- 1단계 (주)인산종합건설 외 2개사

- 2단계 상서종합건설(주) 외 2개사

○ 사업규모 : 생태하천 정비 L=2.3㎞

○ 사업내용 : 생태하천 복원 L=2.3㎞, 유지용수관로 설치, 친수공간 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비(당초) : 28,250백만원(국비 19,775, 시비 5,932, 구비 2,543)

○ 2013. 7월말까지 집행액(누계) : 11,329백만원

○ 연도별 예산투입 계획(2013. 8월 현재 기준)

(단위 : 백만원)

구 분 재원별	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년이후
계 (집행누계)	21,200	3,028 (1,309)	6,449 (3,553)	6,389 (11,329)	5,334
국비	10,600	1,514	3,391	3,028	2,667
시비	6,360	908	1,702	2,150	1,600
구비	4,240	606	1,356	1,211	1,067

추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 범어천(1단계) 생태하천 복원사업 : 공정률 85%

○ 범어천(2단계) 생태하천 복원사업 : 공정률 7.5%(보상지급률 56%)

향후계획

○ 범어천(1단계) 생태하천 복원사업 준공 : 2013. 12월

○ 범어천(2단계) 생태하천 복원사업 준공 : 2014. 6월

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 28,250백만원 → 변경 21,200백만원(사업내용 변경)

사업명

수성생활체육공원 조성

담당자

문화체육과 손용택(☎666-2182)

필요성 및 기대효과

○ 생활체육의 활성화와 공공체육시설 인프라 확충

사업개요

○ 기    간 : 2010 ~ 2013. 8월

○ 위    치 : 지산동 산136번지 일원

○ 시 공 사 : 강남조경

○ 사업규모 : 부지 17,893㎡, 시설면적 3,991㎡

○ 사업내용 : 족구장, 주차장, 다목적광장, 산책로, 야외형 헬스기구, 정자 등 설치

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비(당초) : 6,000백만원(국비 1,200, 시비 1,400, 구비 3,400)

○ 2013. 7월말까지 집행액(누계) : 1,361백만원

○ 연도별 예산투입 계획(2013. 8월 현재 기준)

(단위 : 백만원)

구 분 재원별	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년이후
계 (집행누계)	1,500	703 (247)	797 (609)	0 (1,361)	0
국비	330	140	190	0	0
시비	385	0	385	0	0
구비	785	563	222	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 토목, 조경공사 준공 : 2013. 7월

○ 전기공사 준공 : 2013. 8월

향후계획

○ 산책로 주변 차폐수목 보식 : 2013. 10월 ~ 11월 경

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 6,000백만원 → 변경 1,500백만원(사업위치 변경 및 사업규모 축소)

○ 사업규모 : 당초 부지면적 38,498㎡, 시설면적 20,000㎡

→ 변경 부지면적 17,893㎡, 시설면적 3,991㎡

사업명

파동문화센터 건립

담당자

평생교육과 정해영(☎666-4232)

필요성 및 기대효과

○ 문화시설 및 도심기반시설이 취약한 파동지역에 문화기반시설 확충으로 지역주민 삶의 질 향상 및 지역 문화 향유권 확대

사업개요

○ 기    간 : 2010 ~ 2014. 6월

○ 위    치 : 파동 527-1번지 외 7필지

○ 사업규모 : 대지면적 1,476㎡, 연면적 1,314.6㎡(지하1층, 지상3층)

○ 사업내용 : 문화센터 건립

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비(당초) : 3,800백만원(국비 1,350, 시비 2,450)

○ 2013. 7월말까지 집행액(누계) : 1,576백만원

○ 연도별 예산투입 계획(2013. 8월 현재 기준)

(단위 : 백만원)

구 분 재원별	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년이후
계 (집행누계)	4,600	200 (0)	1,100 (490)	3,300 (1,576)	0 (0)
국비	1,350	100	446	804	0
시비	3.250	100	654	2,496	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 파동문화센터 조성계획 수립 : 2010. 1월

○ 설계 완료 : 2013. 7월

향후계획

○ 공사 착공 : 2013. 9월

○ 공사 준공 : 2014. 6월

○ 문화센터 개관 : 2014. 10월

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 3,800백만원 → 변경 4,600백만원(부지매입비 증가)

○ 사업규모(연면적) : 당초 1,600㎡ → 1,314.6㎡

사업명

고산권 공공도서관 건립

담당자

문화체육과 박정희(☎666-2162)

필요성 및 기대효과

○ 10만 이상의 주민이 거주하는 지역에 공공도서관이 없어 정보접근성 저해

○ 문화 향유권 제고와 지식정보 격차를 해소하여 주민 삶의 질 향상

사업개요

○ 기    간 : 2011 ~ 2015. 2월

○ 위    치 : 신매동 571-1

○ 사업규모 : 부지면적 2,080㎡, 연면적 3,100㎡(지하1층, 지상4층)

○ 사업내용 : 종합자료실, 어린이자료실, 디지털자료실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비(당초) : 12,000백만원(국비 4,000, 시비 3,000, 구비 5,000)

○ 2013. 7월말까지 집행액(누계) : 376백만원

○ 연도별 예산투입 계획(2013. 8월 현재 기준)

(단위 : 백만원)

구 분 재원별	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년이후
계 (집행누계)	9,003	0 (0)	353 (204)	2,025 (376)	6,625
국비	3,440	0	0	150	3,290
구비	5,563	0	353	1,875	3,335

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 공유재산관리계획 변경계획 승인 : 2012. 5월

○ 부지매입 : 2012. 7월

○ 국제현상설계 공모 및 선정  : 2012. 9월

○ 설계 시행 : 2013. 2월 ~ 2013. 10월

향후계획

○ 공사 착공 : 2013. 12월

○ 공사 준공 : 2015. 2월

○ 도서관 개관 : 2015. 하반기

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 12,000백만원 → 변경 9,003백만원(사업규모 축소)

○ 사업규모(연면적) : 당초 3,600㎡ → 3,100㎡

사업명

수성국민체육센터 건립

담당자

문화체육과 손용택(☎666-2182)

필요성 및 기대효과

○ 다목적 체육관을 건립하여 지역 주민들에게 쾌적한 운동환경을 제공

사업개요

○ 기    간 : 2012 ~ 2014. 12월

○ 위    치 : 범어동 산176번지 일원

○ 사업규모 : 부지 10,800㎡, 건축연면적 3,389㎡(지하1층, 지상2층)

○ 사업내용 : 다목적체육관, 헬스장, 체력측정실, 다목적체육강좌실, 사무실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비(당초) : 7,400백만원(국비 3,000, 구비 4,400)

○ 2013. 7월말까지 집행액(누계) : 33백만원

○ 연도별 예산투입 계획(2013. 8월 현재 기준)

(단위 : 백만원)

구 분 재원별	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년이후
계 (집행누계)	10,146	0 (0)	902 (0)	2,150 (33)	7,094
국비	3,100	0	200	1,350	1,550
구비	7,046	0	702	800	5,544

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 기본계획 수립 : 2011. 4월

○ 생활체육시설 지원사업 공모·선정 : 2012. 1월(체육진흥기금 31억원 확보)

○ 설계시행 : 2013. 6월 ~ 2013. 11월

향후계획

○ 부지매입 협의 : 2013. 8월 ~ 부지 매입시까지

○ 공사 착공 : 2013. 12월

○ 공사 준공 : 2014. 12월

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 7,400백만원  → 변경 10,146백만원(지상1층에서 2층으로 증가)

사업명

해피타운 프로젝트

담당자

도시디자인과 천혜진(☎666-3271)

필요성 및 기대효과

○ 노후화된 저층주택지에 주차․방범․소공원 등 편의시설이 잘 갖춰진 공동주택의 장점을 접목하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

사업개요

○ 기    간 : 2012 ~ 2014. 12월

○ 위    치

- 만촌동658번지 외 260필지(70,000㎡), 만촌동935번지 외 316필지(89,740㎡)

- 범어동 399-10번지 외 185필지(50,000㎡), 상동 149-26번지 외 127필지(22,627㎡)

○ 사업내용 : CCTV 및 보안등설치, 벽화거리조성, 담장허물기, 주민역량강화사업,

도시가스 공급관 설치, 도로개․보수, 주차장조성, 녹지조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원(국비 2,000, 시비 1,000, 구비 1,000)

○ 2013. 7월말까지 집행액(누계) : 1,092백만원

○ 연도별 예산투입 계획(2013. 8월 현재 기준)

(단위 : 백만원)

구 분 재원별	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년이후
계 (집행누계)	4,000	0 (0)	2,000 (589)	2,000 (1,092)	0
국비	2,000	0	1,000	1,000	0
시비	1,000	0	500	500	0
구비	1,000	0	500	500	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

○ 만촌1, 2동 설계 완료 : 2012. 6월

○ 만촌1, 2동 사업 시행 : 2012. 7월

향후계획

○ 범어2동, 상동 설계 완료 : 2013. 8월

○ 범어2동, 상동 사업 시행 : 2013. 9월

○ 만촌1, 2동 사업 완료 : 2013. 12월

○ 범어2동, 상동 사업 완료 : 2014. 12월

사업명

진밭골 진입도로 확장공사

담당자

공원녹지과 장승욱(☎666-2834)

필요성 및 기대효과

○ 지역주민들의 도심휴양지로 이용이 많은 대덕지 및 진밭골 진입도로 확보

○ 차량정체 해소와 도로폭원 협소로 인한 차량의 접촉․추락사고 예방

사업개요

○ 기    간 : 2012 ~ 2015. 6월

○ 위    치 : 범물동 1193번지선(진밭1교~진밭골 취락지구)

○ 사업규모 : L(길이)=2,600m, B(폭)=3m ⇒ 8m

○ 사업내용 : 도로확장

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비(당초) : 8,000백만원(국비 7,200, 구비 800)

○ 2013. 7월말까지 집행액(누계) : 268백만원

○ 연도별 예산투입 계획(2013. 8월 현재 기준)

(단위 : 백만원)

구 분 재원별	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년이후
계 (집행누계)	6,500	0 (0)	3,333 (119)	0 (268)	3,167
국비	3,000	0	3,000	0	0
구비	3,500	0	333	0	3,167

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 도시계획시설결정 및 설계용역 : 2012. 6월 ~ 2013. 4월

○ 일반교통안전진단 : 2013. 5월 ~ 2013. 6월

○ 도시계획시설사업 실시계획 인가 협의 및 고시 : 2013. 7월

향후계획

○ 보상협의 : 2013. 8월 ~ 2013. 9월

○ 도로 확장공사 : 2013. 10월 ~ 2015. 6월

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 8,000백만원  → 변경 6,500백만원(사업규모 축소)

○ 사업규모(도로폭) : 당초 10m → 변경 8m

사업명

지산․범물권 노인복지관 건립

담당자

복지과 이정순(☎666-2553)

필요성 및 기대효과

○ 급속화되고 있는 고령화 사회에 복합적 노인복지서비스 수요 급증

○ 어르신들이 심리적, 육체적으로 건강하고 이상적인 여가활동 참여 기회 확대 제공

사업개요

○ 기    간 : 2011. 9월 ~ 2014. 4월

○ 위    치 : 범물동 1288번지

○ 시 공 사 : (주)서림종합건설

○ 사업규모 : 부지 1,200.3㎡, 연면적 1,791.51㎡(지하1층, 지상3층)

○ 사업내용 : 상담실, 교육실, 건강증진실, 강당, 물리치료실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비(당초) : 3,990백만원(특별교부세 2,000, 시비 600, 구비 1,390)

○ 2013. 7월말까지 집행액(누계) : 1,219백만원

○ 연도별 예산투입 계획(2013. 8월 현재 기준)

(단위 : 백만원)

구 분 재원별	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년이후
계 (집행누계)	4,697	74 (0)	3,318 (74)	1,305 (1,219)	0
특별교부세	1,700	0	1,700	0	0
시비	658	0	658	0	0
구비	2,339	74	960	1,305	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 58%)

○ 설계 시행 : 2012. 9월 ~ 2013. 3월

○ 공사 착공 : 2013. 5월

향후계획

○ 공사 준공 : 2014. 4월

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 3,990백만원 → 4,697백만원(부지매입비 및 공사비 증가)

○ 사업규모(부지면적) : 당초 1,000㎡ → 변경 1,200.3㎡(건물의 효율적 배치)

사업명

지산한라공영주차장 조성공사

담당자

교통과 김천수(☎666-3041)

필요성 및 기대효과

○ 인근주택가 및 재래시장 주변의 주차난 해소

○ 지역주민 및 재래시장 이용객의 편의 증진

사업개요

○ 기    간 : 2011. 3월 ~ 2014. 4월

○ 위    치 : 지산동 1192-11번지

○ 시 공 사 : 모아종합건설(주)외 1개사

○ 사업규모 : 부지면척 1,640.6㎡, 연면적 A=1,779.97㎡(지하1층, 지상1층)

○ 사업내용 : 주차대수 51면, 옥상정원 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원(시비 1,100, 구비 1,000)

○ 2013. 7월말까지 집행액(누계) : 514백만원

○ 연도별 예산투입 계획(2013. 8월 현재 기준)

(단위 : 백만원)

구 분 재원별	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년이후
계 (집행누계)	2,100	100 (100)	2,000 (100)	0 (514)	0
시비	1,100	50	1,000	0	0
구비	1,000	50	1,000	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 지산한라공영주차장 조성 기본계획 수립 : 2011. 3월

○ 설계 시행 : 2011. 7월 ~ 2011. 12월

○ 공사 착공 : 2013. 5월

향후계획

○ 공사 준공 : 2014. 4월

사업명

만촌1동 주민(문화)센터 신축

담당자

행정지원과 채문수(☎666-2223)

필요성 및 기대효과

○ 다양한 행정수요에 대처하고 주민이 만족하는 양질의 민원서비스 제공

사업개요

○ 기    간 : 2012. 2월 ~ 2014. 7월

○ 위    치 : 만촌1동 1455-1번지 외 1필지

○ 사업규모 : 대지 1,322m2, 건축면적 1,732m2(지하1층, 지상4층)

○ 사업내용 : 주민센터(1~2층), 문화센터(3~4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비(당초) : 3,900백만원(구비 2,900, 지방채 1,000)

○ 2013. 7월말까지 집행액(누계) : 159백만원

○ 연도별 예산투입 계획(2013. 8월 현재 기준)

(단위 : 백만원)

구 분 재원별	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년이후
계 (집행누계)	3,900	0 (0)	1,151 (0)	2,749 (159)	0
특별교부세	1,000	0	1,000	0	0
구비	2,900	0	151	2,749	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 주민센터 신축 추진계획 수립 : 2012. 2월

○ 투융자심사 및 공유재산 변경계획 승인 : 2012. 3월

○ 건축설계공모 : 2012. 11월

○ 설계 시행 : 2013. 1월 ~ 2013. 6월

향후계획

○ 공사 착공 : 2013. 9월

○ 공사 준공 : 2014. 7월