109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 구에서 ‘16년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
범어3동 주민센터 이전	3,605	-	954	2,651	2018년	2016년	10%
범어2동 주민센터 이전	9,454	-	4,079	5,375	2018년	2016년	10%
수성구 국민체육센터 건립	11,146	4,332	6,814	0	2016년	2014년	100%
수경지역 전통문화, 건강체험 지원 연계 주민 HI-UP프로젝트	1,625	271	435.6	918.4	2017년	2015년	43.4%
수성구 생활자원 회수센터 건립	8,560	913	3,644	4,003	2018년	2014년	53.24%
수성명품 단독주택지 조성사업	4,140	216	812	3,112	2018년	2013년	54%
들안길 행복마을 프롬나드 조성사업	6,134	-	190	5,944	2019년	2015년	5%
고산2동 대흥마을 진입도로 건설	4,802	-	186	4,616	2018년	2016년	20%
두산동 수성못동편 도로건설	2,050	-	28	2,022	2018년	2015년	10%
만촌3동 수성대학교 서편 도로건설	2,600	-	15	2,585	2019년	2016년	20%
범어1동 범어성당 동편 도로건설	2,130	678	791	661	2018년	2016년	95%
개발제한구역 훼손지 복구사업	22,450	5,000	15,950	1,500	2018년	2015년	60%
수성못 관광명소화 사업	2,200	-	1,200	1,000	2018년	2015년	50%

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

범어2동 주민센터 이전

담당자

행정지원과 최재원(☎666-2225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 범어2동 주민들의 숙원사업인 주민센터를 신축․이전하여 늘어나는

행정수요에 대처하고 주민 참여공간을 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2018

○ 위 치 : 범어동 415-4 외 1필지

○ 규 모 : 지상4층 / 부지면적 1,087㎡, 연면적 825㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,605백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,605	-	954	2,651	-
구 비	3,605	-	954	2,651	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 부지매입 완료    : 2016. 10월

○ 설계공모작 선정  : 2017. 2월

○ 기본 및 실시설계 : 2017.  3 ~ 8월

□ 향후계획

○ 공사 착공 : 2017. 11.

○ 공사 준공 : 2018. 9.

사업명

범어3동 주민센터 이전

담당자

행정지원과 최재원(☎666-2225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 범어3동 주민들의 숙원사업인 주민센터를 복합청사로 신축하여

다양한 행정서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019

○ 위 치 : 범어동 26-11 외 2필지

○ 규 모 : 지하 1층, 지상 4층 / 부지면적 616.5㎡, 연면적2,074㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,454백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	9,454	-	4,079	5,375	-
국 비	500	-		500	-
구 비	8,954	-	4,079	4,875	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10 %)

○ 부지매입 완료    : 2016. 7월

○ 설계공모작 선정  : 2017. 4월

○ 기본 및 실시설계 : 2017.  5 ~ 11월

□ 향후계획

○ 공사 착공 : 2018. 2.

○ 공사 준공 : 2019. 2.

사업명

수경지역 전통문화, 건강체험 자원 연계 주민HI-UP프로젝트

담당자

관광과 김정미 (☎666-4193)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공동 생활권 지역인 수성구와 경산시의 강점 자원 간 연계로 국내외

관광객을 유치함으로써 예산 절감은 물론 일자리 창출 등 지역경제 활성화와

○ 생활권 주민 대상 전통문화·건강 체험프로그램 시혜 확대로 주민의

건강증진 및 문화수준 향상에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : ’15. 7. 1.~’17. 12. 31.

○ 주 체 : 주관 - 대구 수성구 / 참여 - 경북 경산시, 대구한의대

○ 내 용 :  주민행복사업단 운영, 전통문화·건강체험 기반조성

전통문화·건강체험프로그램 개발 및 운영,

전통문화·건강체험 프로그램 마케팅

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,625백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	1,625	271	435.6	918.4	-
국 비	1,300	216.8	348.5	734.7	-
시 비	97.6	16.3	26.1	55.2	-
구 비	227.4	37.9	61	128.5	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2차년도 43.4%)

○ 수경(壽慶)지역 공동 주민행복사업단 구성·운영, 국내외 혁신자원간

7건의 업무협약 등 네트워크 확대 구축

○ 전통문화체험장 4개소 지정 운영, 인력양성 교육 등 10건의 프로그램 운영

○ 체험장·공연장 및 지역축제 연계프로그램 등 30건의 프로그램 운영

○ 국내외 관광객 유치 박람회·설명회 개최 등 17건의 프로그램 운영

□ 향후계획

○ 생활권 전통문화체험 기반조성

- 전통문화·건강체험장 조성, 농산물직판장 개설, 트레킹 조성 등

○ 생활권 주민 활성화 연계사업 운영

- 수변공원 주변상권 활성화, 체험장 연계프로그램 운영 등

사업명

수성구 생활자원회수센터 설치

담당자

자원순환과 배주호(☎666-2721)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가정 등에서 분리 배출한 재활용가능자원의 효율적이고 원활한 선별을

통해 폐기물발생을 억제하고 자원을 순환적으로 이용하도록 함으로써

환경보전과 지역경제 발전에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 4월~ 2018. 1월

○ 위 치 : 대구광역시 수성구 범물동 105-7번지

○ 규 모 : 부지 5,776㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,560백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,560	913	3,644	3,885	118
국 비	2,100	210	735	1,155	-
시 비	2,450	245	850	1,355	-
구 비	4,010	458	2,059	1,375	118

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 53.24%)

○ 2014년까지 : 부지교환 매입 및 개발제한구역관리계획변경용역 - 213백만원

○ 2015년 : 선별장 건립을 위한 도시계획시설결정, 기본 및 실시설계, 위탁수수료 등 - 700백만원

○ 2016년 : 공사비 - 2,435백만원 및 개발제한구역보전부담금, 농지전용부담금 - 1,209백만원

□ 향후계획

○ 건설공사 및 시운전 (2017. 1월 ~ 12월)

○ 준공 및 인계인수 ( 2018. 1월)

사업명

수성명품 단독주택지 조성사업

담당자

도시디자인과 신미진 (☎666-3272)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 저층주택지에 주차·방범·소공원 등 편의시설이 잘 갖춰진

공동주택의 장점을 접목하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~2018년

○ 위 치 : 범어2동(3개소), 만촌2동(1개소)

○ 규 모 : 수성구 국채보상로186길 45외 412필지

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,140백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,140	216	812	690	2,422
국 비	2,070	108	406	345	1,211
시 비	1,035	54	203	172.5	605.5
구 비	1,035	54	203	172.5	605.5

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 54%)

○ 2015년도 대상 사업지 하드웨어사업 추진

○ 주민역량강화사업 실시

□ 향후계획

○ 2015년 사업지 사업완료 : 2017.12.

○ 2016년 사업지 실시설계 용역시행 : 2018.상반기

사업명

들안길 프롬나드 행복마을 조성사업

담당자

도시디자인과 김현(☎666-3271)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성유원지의 다양한 개발사업과 연계하여 들안로에 도심형 프롬나드를

조성, 들안로 상권 활성화 및 지역명소화 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019

○ 위 치 : 상화네거리(상동지구대) ~ 들안길삼거리

○ 규 모 : 들안길 중심으로 좌우측 400m 일대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,134백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,134	-	190	2732.5	3211.5
국 비	3,067	-	111	1,387	1,569
시 비	1,533.5	-	39	693.5	801
구 비	1,533.5	-	40	652	841.5

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 기본·실시설계 용역사업자 선정 및 용역시행

○ 주거환경개선사업 일부 실시(악취방지시설 설치)

□ 향후계획

○상권활성화를 위한 미슐랭 프로젝트 추진 : 2017. 7. ~

○주거환경개선사업 완료 : 2017. 7. ~ 2017. 12.

○기본 및 실시설계 용역 완료 및 공사시행 : 2018. .7 ~

○들안길 프롬나드 행복마을 조성완료 : 2019. 12.

□ 사업변경 내역

○ 차선축소 등 시 협의사항 지연으로 사업지연

사업명

고산2동 대흥마을 진입도로 건설

담당자

건설과 홍재진(☎666-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개발제한구역 해제지역의 마을 진입도로 건설로 집단취락지역의 교통 환견 개선에 따른 민원 해소 및 지역개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 3월 ~ 2018. 6월

○ 위 치 : 대흥동 575번지 일대

○ 규 모 : 도로건설 B=8m, L=555m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,802백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,802	-	186	4,116	500
구 비	4,802	-	186	4,116	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2016. 3월 : 실시설계 용역

○ 2016. 4월 : 도시계획시설(도로) 실시설계인가 고시

○ 2016. 6월 : 보상계획 열람공고

□ 향후계획

○ 2017 ~   : 보상협의

○ 2017. 6월 : 공사착공

○ 2018. 6월 : 공사준공

사업명

두산동 수성못 동편 도로건설

담당자

건설과 홍재진(☎666-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성호텔 증축 및 수성못 관광 활성화에 따른 이용객 및 교통량 증가가예측되어 도로개설을 통한 교통문제 해결 및 관광 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 9월 ~ 2018. 12월

○ 위 치 : 수성호텔 ~ 불교한방병원

○ 규 모 : 도로건설 B=15→20m, L=280m

○ 사업비 전액 ㈜호텔수성에서 부담

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,050백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,050	-	28	1,500	522
구비(민간자본)	2,050	-	28	1,500	522

※ 민자사업으로 ㈜호텔수성에서 사업비 불입시 사업추진

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2015. 8월 : 협약서 체결(구↔수성호텔)

○ 2016. 11월 : 토지분할 측량

□ 향후계획

○ 2017. 8월 : 보상 열람공고 및 실시계획 고시

○ 2017. 11월 : 보상협의 및 공사추진

사업명

만촌3동 수성대학교 서편 도로건설

담당자

건설과 김종면(☎666-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 만촌3동 수성대학교 및 오성중·고등학교 주변 도로개설을 통한 지역주민들의 교통불편 해소와 환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1월 ~ 2019. 12월

○ 위 치 : 만촌동 산377-1번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=6~7m, L=310m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,600	-	15	1,375	1,210
구비(민간자본)	2,600	-	15	1,375	1,210

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2016. 4월 : 협약서 체결(수성구청, 주식회사 삼정이앤시)

○ 2016. 6월 : 실시설계 시행

□ 향후계획

○ 2017. 4월 : 실시계획 인가 고시

○ 2017. 5월 ~ : 보상열람공고 및 협의

○ 2017. 9월 : 공사착공

○ 2019. 12월 : 공사준공

사업명

범어1동 범어성당 동편 도로건설

담당자

건설과 홍재진(☎666-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거밀집지역 내 도시계획시설(도로)를 개설하여 지역주민 교통불편 해소 및 지역개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 8월 ~ 2018. 12월

○ 위 치 : 수성구 범어1동 범어성당 동편

○ 규 모 : 도로건설 B=8m, L=150m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,130백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,080	678	791	361	300
국 비	50	-	50
구 비	2,080	678	741	361	300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2015. 9월 : 실시설계 용역

○ 2015. 10월 : 보상열람공고 및 감정평가

○ 2015. 11월 : 공사착공

○ 2016. 11월 : 공사준공

□ 향후계획

○ 2017. 2월 : 범어성당 및 재경부 보상

○ 2018. 2월 : 범어성당 보상(300백만원) 완료

사업명

개발제한구역 훼손지 복구사업

담당자

공원녹지과 김동현(☎666-2905)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성의료지구 개발제한구역 훼손지 복구사업을 도심 속 공원조성 사업

으로 추진하여, 도심의 휴양 및 다양한 여가․문화공간을 확충하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2017년

○ 위 치 : 황금동 산106번지 일원

○ 규 모 : 108,874㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	22,450	4,004	14,901	3,545	-
구 비	22,450	4,004	14,901	3,545	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○대구도시공사와 사업비 전반에 관한 협약 체결 : 2014. 11

○공원, 공원조성계획 결정 및 실시설계 용역 중 : 2015. 7 ~

○보상계획 공고 및 토지보상 중 : 2016. 2 ~   ※ 보상률 : 97%정도

○변경 사업계획안 국토교통부 협의 : 2016. 3 ~ 11

○도시관리계획(공원, 조성계획) 입안 및 행정절차 진행 중 : 2017. 3 ~

□ 향후계획

○ 2017.  9 : 공원결정 및 조성계획 결정 고시

○ 2017. 10 ~ 2018. 5 : 공사시행

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 16,500백만원 → 22,450백만원(보상비 증액)

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2017년 → 2015년 ~ 2018년

○ 사업규모 : 108,372㎡ → 108,874㎡(사업부지 정형화)

사업명

수성못 관광명소화 사업

담당자

공원녹지과 김동현(☎666-2905)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성유원지 기반시설 정비․확충 및 문화콘텐츠 개발로 증가하는 관광객의

다양한 수요에 대응하고 글로벌 도시에 걸맞은 고품격 호수공원 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2018년

○ 위 치 : 두산동 660-6번지 일원

○ 규 모 : 5,200㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,200	-	30	1,170	1,000
국 비	1,000	-	15	485	500
시 도 비	1,000	-	15	485	500
시군구비	200	-	-	200	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○실시설계, 설계자문회의 및 주민설명회 개최 : 2016. 3 ~ 11

○호주 블랙타운 시 실무진 방문, 기본설계 브리핑 : 2016. 4

○일상감사 및 계약심사 : 2016. 12 ~ 2017. 2

○글로벌문화광장 조성 공사착공 : 2017. 3

□ 향후계획

○ 2017. 9 : 글로벌문화광장 조성공사 준공

○ 2018. 2 ~ 5 : LED아트가든 조성공사 실시설계 용역

○ 2018. 7 ~ 10 : LED아트가든 조성공사 시행

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 2,000백만원 → 2,200백만원(보상비 등 증액)

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2017년 → 2016년 ~ 2018년

10-2. 지방채 발행사업

우리 구에서 ‘16년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
		해	당	없	음

10-3. 민간투자사업

우리 구에서 ‘16년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’15년까지 부담액	’16년 부담액	’17년 이후 부담 예정액
BTL		해	당	없	음
BTO		해	당	없	음