109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 구에서 ‘17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
수성명품단독주택지 조성사업	4,280	1,028	814	2,438	2019	2013	43
수성구 생활자원 회수센터 건립	8,294	4,329	3,865	100	2018	2014	100
개발제한구역 훼손지 복구사업	22,450	18,918	952	2,580	2018	2015	70
들안길 행복마을 프롬나드 조성사업	6,134	241	252	5,641	2019	2015	13.2
수경지역 전통문화, 건강체험 지원 연계 주민 HI-UP프로젝트	3,680	2,595	685	400	2018	2015	80
고산2동 대흥마을 진입도로 건설	5,301	186	3,780	1,335	2018	2015	75
두산동 수성못 동편 도로건설	5,063	28	15	5,020	2018	2015	75
수성못 관광명소화 사업	1,200	31	1,169	-	2017	2015	100
만촌3동 수성대학교 서편 도로건설	2,690	15	596	2,079	2019	2016	20
범어1동 범어성당 동편 도로건설	2,130	1,469	360	300	2018	2016	100
범어2동 주민센터 이전	3,605	954	140	2,511	2019	2016	28
고모마을, 명복공원간 도로건설	6,500	-	300	6,200	2022	2017	5
청소년 문화의집 건립	5,500	-	-	5,500	2020	2017	10
범어3동 주민센터 신축	9,454	4,079	16	5,359	2019	2017	21
들안길 한전지중화 사업	5,200	-	-	5,200	2019	2017	5
황금2동 복합청사 신축	8,637	-	-	8,637	2020	2017	2018년 본예산편성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

수성명품 단독주택지 조성사업

담당자

도시디자인과  차준호(☎666-3272)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 저층주택지에 주차·방범·소공원 등 편의시설이 잘 갖춰진

공동주택의 장점을 접목하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2019년

○ 위 치 : 범어2동(3개소), 만촌2동(1개소)

○ 규 모 : 수성구 국채보상로186길 45 외 412필지

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,280	1,028	814	300	2,138
국비	2,140	514	407	150	1,069
시비	1,070	257	203.5	75	534.5
구비	1,070	257	203.5	75	534.5

추진상황(추진단계 및 진도 : 43%)

○ 2015. 2월~ 12월 : 1차 사업구역 기본 및 실시설계용역

○ 2016. 3월 ~ 2017. 12월 : 1차 사업구역 사업시행

○ 2017. 8월 ~  : 만촌2동 주민커뮤니티센터 건립

향후계획

○ 2018. 상반기 : 2차 사업지 사업변경

○ 2018. 하반기 : 2차 사업지 실시설계 용역시행

사업명

수성구 생활자원회수센터 설치

담당자

자원순환과 이민호(☎666-2721)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가정 등에서 분리 배출한 재활용가능자원의 효율적이고 원활한 선별을 통해

폐기물발생을 억제하고 자원을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경보전과

지역경제 발전에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 4월 ~ 2018. 1월

○ 위 치 : 대구광역시 수성구 범물동 105-7번지

○ 규 모 : 부지 5,776㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,294백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	8,294	4,329	3,865	100	0
국비	2,100	945	1,155	0	0
시비	2,450	1,095	1,355	0	0
구비	3,744	2,289	1,355	100	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014년까지 : 부지교환 매입 및 개발제한구역관리계획변경용역

○ 2015년 : 선별장 건립을 위한 도시계획시설결정, 기본 및 실시설계

○ 2016년 11월 : 착공

○ 2018년  1월 : 준공

□ 향후계획

○ 2018. 3. 1.부터  생활자원회수센터 운영 중

사업명

개발제한구역 훼손지 복구사업

담당자

공원녹지과  고혜정(☎666-3271)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성의료지구 개발제한구역 훼손지 복구사업을 도심 속 공원조성 사업으로  추진하여, 도심의 휴양 및 다양한 여가․문화공간을 확충하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2018년

○ 위 치 : 황금동 산106번지 일원

○ 규 모 : 108,874㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	22,450	18,918	952	2,580	-
구비	22,450	18,918	952	2,580	-

※ 구비(전액 대구도시공사 재원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

❍ 2014. 11월 : 대구도시공사와 복구사업 전반에 관한 협약 체결

❍ 2015. 7월 ~ 2017. 12월 : 도시관리계획 및 실시설계 용역

❍ 2016. 3월 ~ 2016. 11월 : 사업계획 국토부 협의

❍ 2016. 7월 ~ 2017. 12월 : 토지 및 지장물 보상

❍ 2017. 3월 ~ 2017. 12월 : 관련기관․실과 협의

❍ 2017. 9월 ~ 2017. 12월 : 공원조성계획결정 및 실시계획 고시

□ 향후계획

❍ 2018. 2월 : 공사 착공

❍ 2018. 12월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

❍ 총사업비 : 16,500백만원 → 22,450백만원(보상비 증액)

사업명

들안길 프롬나드 행복마을 조성사업

담당자

도시디자인과  손현호(☎666-3271)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성유원지의 다양한 개발사업과 연계하여 들안로에 걷고싶은 산책로를 조성,

들안로 상권 활성화 및 지역 명소화 추진

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016 ~ 2019(4년)

○ 위    치 : 상화네거리(상동지구대) ~ 들안길 삼거리 좌우 400m 구간

○ 사업내용

∙ 도로다이어트를 통한 걷고 싶은 프롬나드 조성(폭 10m, 길이 620m)

∙ 미슐랭 프로젝트를 통한 들안길 음식점 특화 및 관광 명소화 추진

∙ 상생 파빌리온의 선순환 수익을 통한 지속가능한 마을공동체 형성

∙ 상동·두산동 주거환경개선 및 주민역량강화사업 추진 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,134백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,134	241	252	1,596	4,045
국비	3,067	111	145	798	2,013
시비	1,533.5	39	73	399	1,022.5
구비	1,533.5	91	34	399	1,009.5

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 13.2%)

○ 2015. 10월 : 2016년 도활 신규사업 확정(국토교통부)

○ 2015. 11월 ~ 2016. 4월 : 교통대책 개선대책 수립용역

○ 2016.  5월 :  기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2016. 11월 : 설계용역 중지(※ 대구시 도로과 협의중)

□ 향후계획

○ 2018. 하반기 : 설계용역 중지 해제 및 완료

○ 2019. 상반기 : 착공

○ 2019. 하반기 : 준공

사업명

수경(壽慶)지역 전통문화·건강체험

자원연계 주민HI-UP프로젝트

담당자

관광과 정성우(☎666-4914)

□ 사업목적 및 필요성

○ ‘주민행복지수 일등 도시 구현’의 비전과 『수성구 관광정보체험센터 관광거점화』의

성과 목표를 통해 지역주민의 삶의 질 개선과 주민의 실질적인 행복지수

(Happiness Index) 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 7월 ~ 2018. 12월

○ 위 치 : 수성구·경산시 지역 일원

○ 사업내용 : 사업단운영, 전통건강 체험기반 조성사업(체험장, 공연장)

체험프로그램 개발 및 운영, 체험프로그램 마케팅

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,680백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,680	2,595	685	400	-
국비	2,600	2,052	548	-	-
시비	455	359	96	-	-
구비	595	154	41	400	-
민간자본	30	30	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2015. 7월 : 주민행복사업단 민간위탁 협약 체결

○ 2016. 8월 : 대구MBC 수성못 하이-다이빙쇼 업무협약 체결

○ 2016. 9월 : 수경지역 의료관광 및 K-뷰티 다자간업무협약 체결

○ 2017. 11월 : 관광정보체험센터 개소

□ 향후계획

○ 2018. 3월 : 한국전통문화공연장 완공

○ 2018. 4월 : 학교 창의적체험활동 연계 체험 프로그램 운영

4개 농악단 업무 협약 체결 및 상설공연 개시

○ 2018. 9월 :　수성못 요트페스티벌, 정호승 인문학 투어　진행

○ 2018.10월~ : 사회적경제한마당, 국내외 홍보설명회 개최

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증가 : 당초 3,500백만원 → 변경 3,680백만원

※ 2015년 농림부 국비 220백만원 일괄삭감, 2018년 구비 400백만원 편성

○ 사업기간 변경 : 당초 2015 ~ 2017 → 변경 2015 ~ 2018

사업명

고산2동 대흥마을 진입도로 건설

담당자

건설과 곽용섭(☎666-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개발제한구역 해제지역의 마을 진입도로 건설로 집단취락지역의 교통 환경       개선에 따른 민원 해소 및 지역개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 3월 ~ 2018. 9월

○ 위 치 : 대흥동 575번지 일대

○ 규 모 : 도로건설 B=8m, L=555m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,301백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,301	186	3,780	1,335	-
구비	5,301	186	3,780	1,335	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2016. 3월 : 실시설계 용역

○ 2016. 4월 : 실시설계인가 고시

○ 2016. 6월 : 보상열람 공고

○ 2017. 7월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018. 9월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증가 : 당초 3,100백만원 → 변경 5,301백만원

사업명

두산동 수성못 동편 도로건설

담당자

건설과 곽용섭(☎666-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성호텔 증축 및 수성못 관광 활성화에 따른 이용객 및 교통량 증가

예측되어 도로개설을 통한 교통문제 해결 및 관광 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 9월 ~ 2018. 12월

○ 위 치 : 수성호텔 ~ 불교한방병원

○ 규 모 : 도로건설 B=15→20m, L=280m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,063백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,063	28	15	5,020	-
구비	5,063	28	15	5,020	-

※ 구비재원 전액 민간자본 불입분

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2015. 8월 : 협약체결(구청 ↔ ㈜호텔수성)

○ 2018. 1월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018. 12월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증가 : 당초 2,050백만원 → 변경 5,063백만원

- 보상금 증가에 따른 총사업비 증가

사업명

수성못 관광명소화 사업

담당자

공원녹지과 고혜정(☎666-2904)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성유원지 기반시설 정비․확충 및 문화콘텐츠 개발로 증가하는 관광객의         다양한 수요에 대응하고 글로벌 도시에 걸맞은 고품격 호수공원 조성

□ 사업개요

○ 공사명 : 글로벌문화광장 조성공사(울루루문화광장)

○ 기  간 : 2015년 ~ 2017년

○ 위  치 : 두산동 660-6번지 일원

○ 규  모 : 3,200㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,200	31	1,169	-	-
구비	1,200	31	1,169	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016. 3월 ~ 2016. 11월 : 실시설계, 설계자문회의 및 주민설명회 개최

○ 2016. 4월 : 호주 블랙타운 시 실무진 방문, 기본설계 브리핑

○ 2016. 12월 ~ 2017. 2월 : 일상감사 및 계약심사

○ 2017. 3월 ~ 2017. 10월 : 공사시행 및 준공

사업명

만촌3동 수성대학교 서편 도로건설

담당자

건설과 권석훈(☎666-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 만촌3동 수성대학교 및 오성중·고등학교 주변 도로개설을 통한 지역주민들의 교통불편 해소와 환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1월 ~ 2019. 12월

○ 위 치 : 만촌동 산377-1번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=6~7m, L=310m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,464백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,464	15	596	3,853	-
구비	2,690	15	596	2,079	-
민간	1,774	-	-	1,774	-

※ 구비재원 2,690백만원 중 180백만원 제외한 나머지 민간자본 불입분

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2016.  4월 : 협약서 체결(수성구청, 주식회사 삼정이앤시)

○ 2016.  6월 : 실시설계 시행

○ 2017.  4월 : 실시계획 인가 고시

○ 2017.  5월 : 보상열람공고 및 협의

○ 2017. 11월 : 공사착공

○ 2017. 12월 : 공사중지(보상지연)

○ 2018.  5월 : 실시계획변경 인가 고시

○ 2018.  6월 : 수용재결

□ 향후계획

○ 2018.  8월 : 공사중지 해제

○ 2019. 12월 : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증가 : 당초 1,390백만원 → 변경 2,690백만원

- 보상금 증가에 따른 총사업비 증가

사업명

범어1동 범어성당 동편 도로건설

담당자

건설과 김정근(☎666-2881)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일반거주 지역에 장기미집행 도시계획도로를 개설함으로써 교통 혼잡과

인근 주민의 우회 통행 불편을 개선하여 오랜 주민숙원사업을 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 8월 ~ 2018. 2월

○ 위 치 : 수성구 범어1동 범어성당 동편

○ 규 모 : 도로건설 B=8.0m, L=150m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,130백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,129	1,469	360	300	-
구비	2,129	1,469	360	300	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015.  9월 : 실시설계용역 시행

○ 2015. 10월 : 보상열람공고 및 감정평가

○ 2015. 11월 : 공사 착공

○ 2015. 12월 : 범어성당 편입부지 연도별 보상 협의

○ 2016. 11월 : 공사 준공

○ 2017.  2월 : 범어성당 보상

○ 2018.  1월 : 범어성당 보상 완료

사업명

범어2동 주민센터 이전

담당자

행정지원과 하지현(☎666-2223)

□ 사업목적 및 필요성

○ 범어2동 행정복지센터를 신축하여 늘어나는 행정수요에 대처하고 주민 참여

공간을 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019

○ 위 치 : 범어동 415-4 외 1필지

○ 규 모 : 지상4층 / 연면적 832㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,605백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,605	954	140	2,511	-
구비	3,605	954	140	2,511	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 28%)

○ 2016. 10월 : 부지매입 완료

○ 2017. 2월 : 설계공모작 선정

○ 2017.  3 ~ 11월 : 기본 및 실시설계

○ 2018. 2월 : 착공(3층 골조공사 중)

□ 향후계획

○ 2019. 2월 : 준공 예정

사업명

고모마을~명복공원간 도로건설

담당자

건설과 곽용섭(☎666-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주변에 농지가 많아 영농기계 통행은 많으나 노폭(B=2~4m)이 협소하여

차량교행이 어렵고, 안전사고 우려가 많으므로 도로를 건설하여 안전사고

예방 및 주민들의 통행불편을 해소코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017.1 ~2022.12

○ 위 치 : 고모동 562번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=8m, L=1,420m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,500 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,500	-	300	500	5,700
국비	5,850	-	270	450	5,130
구비	650	-	30	50	570

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 도시계획시설(도로)결정 및 실시설계 용역 중

□ 향후계획

○ 2018. 10월 : 도로개설공사 보상

○ 2022. 12월 : 공사 준공

사업명

청소년 문화의집 건립

담당자

평생교육과 김성열(☎666-4243)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화․예술․정보 등을 체험할 수 있는 시설과 프로그램을 제공하여

인성과 창의력을 갖춘 청소년 육성에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 6월 ~ 2020. 9월

○ 위 치 : 수성구 시지동 152-2번지

○ 규 모 : 부지 678㎡, 연면적 1,980㎡, 지하1층/지상5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,500	-	-	250	5,250
국비	4,840	-	-	200	4,640
구비	660	-	-	50	610

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 2016. 5월 : 기본계획 수립

○ 2017. 2월 : 시 투자심사 완료

○ 2018. 2월 : 세부추진계획 수립

□ 향후계획

○ 2018. 4월 : 건립심의위원회 개최

○ 2018. 6월 : 설계공모 공고

○ 2018. 9월 : 공모안 접수 및 심사결과 발표

○ 2018. 10월 ~ 2019. 4월 : 기본 및 실시설계 용역

○ 2019.  9월 ~ 2020. 9월 : 건립공사

사업명

범어3동 주민센터 이전

담당자

행정지원과 하지현(☎666-2223)

□ 사업목적 및 필요성

○ 범어3동주민센터를 신축하여 늘어나는 행정수요에 대처하고 주민참여공간을

확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019

○ 위 치 : 범어동 26-11 외 2필지

○ 규 모 : 지하1층, 지상5층 / 연면적 2,217㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,454백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,454	4,079	16	5,359	-
구비	9,454	4,079	16	5,359	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 21%)

○ 2016. 7월 : 부지매입 완료

○ 2017. 4월 : 설계공모작 선정

○ 2017.  5 ~ 2018. 1월 : 기본 및 실시설계

○ 2018. 2월 : 착공(1층 골조공사 중)

□ 향후계획

○ 2019. 2월 준공 예정

사업명

들안길 한전지중화 사업

담당자

건설과 권석훈(☎666-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 들안길 프롬나드사업 도로공사 시 한전지중화를 통한 도시미관 향상 및 보행환경개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1월 ~ 2019. 12월

○ 위 치 : 상화네거리(상동지구대) ~ 들안길삼거리

○ 규 모 : 한전지중화(B=10m, L=620m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,200	-	-	2,000	3,200
구비	2,600	-	-	1,000	1,600
기타	2,600	-	-	1,000	1,600

※ 기타 : 한전부담금

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2018. 1월 : 한국전력공사와 들안길 지중화사업 협약 체결

□ 향후계획

○ 2018. 12월 : 프롬나드사업 도로공사 착공 시 한전지중화사업 시행

○ 2019. 12월 : 사업완료

사업명

황금2동행정복지센터 이전

담당자

행정지원과 하지현(☎666-2223)

□ 사업목적 및 필요성

○ 황금2동 행정복지센터를 신축하여 늘어나는 행정수요에 대처하고 주민참여

공간을 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2020

○ 위 치 : 희망로36길 131(황금동)

○ 규 모 : 지하1층, 지상4층 / 연면적 1,700㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,637백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	8,637	-	-	3,900	4,737
구비	8,637	-	-	3,900	4,737

□ 추진상황

○ 부지매입비 2018년도 본예산 편성

□ 향후계획

○ 부지확보 및 착공

10-2. 지방채 발행사업

우리 구에서 ‘17년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 구에서 ‘17년에 추진한 민간투자사업 현황은 없습니다.