109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 구에서 ‘18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후
범어2동 행정복지센터 이전	3,362	1,094	1,425	843	0	2019	2016	75
범어3동 행정복지센터 신축	8,712	4,095	2,668	1,949	0	2019	2016	78
범어4동 행정복지센터 신축	6,365	-	-	2,610	3,755	2021	2018	5
황금2동 복합청사 신축	9,661	-	2,829	276	6,556	2021	2017	29
두산레포츠센터 조성	5,000	-	36	1,734	3,230	2021	2018	5
수성패밀리파크 남측 생활체육시설 조성	2,135	-	4	1,664	467	2020	2018	5
수경지역 전통문화, 건강체험 지원연계 주민HI-UP프로젝트	1,658	1154	504	-	-	2018	2019	100
청소년 문화의 집 건립	5,500	-	250	2,595	2,655	2020	2017	5
수성구 생활자원회수센터 건립	8,295	8,195	100	-	-	2018	2014	100
수성명품단독주택지 조성사업	4,280	1,799	344	2,137	-	2019	2013	50
들안길 행복마을 프롬나드 조성사업	6,238	241	2,227	1,506	2,063	2020	2015	40
범어1동 범어성당 동편 도로건설	2,130	1,830	300	-	-	2018	2016	100
만촌3동 수성대학교 서편 도로건설	2,413	610	1,803	-	-	2019	2016	100
두산동 수성못 동편 도로건설	4,785	44	3,838	903	-	2018	2015	81
고산2동 대흥마을 진입도로 건설	5,048	3,967	994	87	-	2019	2016	98
들안길 한전지중화 사업	5,200	-	-	5,200	-	2020	2017	5
개발제한구역 훼손지 복구사업	22,450	19,870	2,580	-	-	2018	2016	100
고모마을, 명복공원 간 도로건설	6,500	104	-	1,296	5,100	2022	2017	5
진밭골 야영장 조성	2,076	175	1,831	70	-	2018	2017	97

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2018년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

범어2동 행정복지센터 이전

담당자

행정지원과 류병창(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후되고 협소한 공간으로 인해 주민 이용이 불편한 행정복지센터를 이전,

다양한 행정서비스 제공으로 행복공동체 기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 5월 ~ 2019. 2월

○ 위 치 : 범어동 100-8 일원

○ 규 모 : 지하1층, 지상4층(연면적 1,300㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,362백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,362	1,094	1,425	843	0
구 비	3,362	1,094	1,425	843	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2016. 5월 : 주민센터 이전계획 수립

○ 2016. 10월 : 부지매입완료

○ 2016. 12월 : 설계공모

○ 2017. 3월 : 설계용역

○ 2018. 2월 : 착공

□ 향후계획

○ 2019. 2월 : 준공

○ 2019. 3월 : 신청사 이전

사업명

범어3동 행정복지센터 신축

담당자

행정지원과 류병창(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민 숙원사업인 복합청사로 신축하여 다양한 행정수요에 맞추어 서비스를 제공

○ 어르신 행복과 건강한 삶을 위한 양질의 건강관리 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 7월 ~ 2019. 2월

○ 위 치 : 상록로 42(범어동)

○ 규 모 : 지하 1층, 지상 5층 / 부지면적 616.5㎡, 연면적 2,217.76㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,712백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,712	4,095	2,668	1,949	0
구 비	8,712	4,095	2,668	1,949	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 78%)

○ 2016. 7월 : 부지매입 완료

○ 2017. 2월 : 기본설계 공모 공고

○ 2017. 5월 : 설계용역 착수

○ 2018. 2월 : 착공

□ 향후계획

○ 2019. 2월 : 준공

○ 2019. 3월 : 신청사 이전

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 1차 변경 : 연면적 1,800㎡ → 2,081㎡ (지하주차장 설치 등)

○ 건축비 증가 : 47.9억원 →  53.7억원 (1차 사업규모 변경)

○ 사업규모 2차 변경 : 연면적 2,081㎡ → 2,243㎡ (5층 주민자치센터 설치 등)

사업명

범어4동 행정복지센터 신축

담당자

행정지원과 류병창(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후되고 협소한 공간으로 주민 이용이 불편한 범어4동 동 청사 이전

○ 다양한 행정서비스 제공과 함께 문화 및 공간 공유가 가능한 행정복지센터 신축으로 행복공동체의 기반을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 8월 ~ 2021. 1월

○ 위 치 : 달구벌대로504길 24-3(범어동)

○ 규 모 : 지하1층, 지상4층 / 부지면적 474㎡, 연면적 1,300㎡

- 배치 : 지하주차장, 행정복지센터, 주민자치센터, 주민공유공간, 회의실, 예비군동대 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,365백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,365	0	0	2,615	3,750
구 비	6,365	0	0	2,615	3,750

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2018. 8월 : 기본계획 수립

○ 2018. 10월 : 공유재산 심의회 심의

○ 2018. 10월 : 공유재산 관리계획 의회 의결(226회 임시회)

□ 향후계획

○ 2019. 4월 : 부지매입

○ 2019. 6월 : 범어4동 1차 주민의견 수렴

○ 2019. 7 ~ 12월 : 실시설계

○ 2020. 1월 : 착    공

○ 2021. 1월 : 준    공

사업명

황금2동 복합청사 신축

담당자

행정지원과 류병창(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후되고 협소한 황금2동 행정복지센터를 주거지역이 밀집한 동 중심지역으로 이전

및 주민 복리증진을 위한 동청사 신축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 5월 ~ 2021. 1월

○ 위 치 : 청솔로2길 64(황금동)

○ 규 모 : 지하 1층, 지상 4층/ 부지면적 886.1㎡, 연면적2,375㎡

- 배치 : 지하주차장, 행정복지센터, 주민자치센터, 열린도서관, 회의실, 예비군동대 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,661백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,661	0	2,829	276	6,556
구 비	9,661	0	2,829	276	6,556

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 29%)

○ 2017. 5월 : 기본계획 수립

○ 2017. 8월 : 공유재산 심의회 의결

○ 2017. 9월 : 공유재산 관리계획 의회 의결(218회 임시회)

○ 2018. 8월 : 황금2동 행정복지센터 신축계획(부지변경)

○ 2018. 8월 : 공유재산 심의회 심의

○ 2018. 9월 : 공유재산 관리계획 변경안 의회 의결

○ 2018. 12월 : 부지매입 및 등기

□ 향후계획

○ 2019. 3월 : 황금2동 1차 주민의견 수렴

○ 2019. 7 ~ 12월 : 실시설계

○ 2020. 1월 : 착    공

○ 2021. 1월 : 준    공

□ 사업변경 내역

○ 부지변경 : 희망로36길 131 → 청솔로2길 64

사업명

두산레포츠센터 조성

담당자

문화체육과 곽민석(☎666-2182)

□ 사업목적 및 필요성

○ 레포츠센터를 조성하여 급증하고 있는 생활체육 동호인의 체육시설 수요를 충족하고, 특히 체육기반시설이 다소 부족한 두산동, 지산동, 범물동 지역주민들의 여가활동 및 체력증진에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2021년

○ 위 치 : 두산동 산 7-2 외 2필지

○ 규 모 : 6,140㎡

- 막구조(1,842㎡) : 농구장 및 족구장 겸용, 소공연장 등

- 야외 체육시설(4,298㎡) : 풋살장 2면 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,000	0	36	1,734	3,230
구 비	5,000	0	36	1,734	3,230

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 기본조사설계용역 완료 : 2018. 12월

□ 향후계획

○ 도시계획시설사업인가 신청 : 2019. 1월

○ 실시설계 용역 시행 : 2019. 5월

○ 토지보상 협의시행 : 2019. 10월

○ 공사시행 : 2020. 하반기

사업명

수성패밀리파크 남측 생활체육시설 조성

담당자

문화체육과 곽민석(☎666-2182)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최근 노년층을 중심으로 파크골프에 대한 수요 및 동호인이 급격하게 증가    하고 있어 부족한 파크골프장 추가 조성을 통해 주민 건강증진 및 생활     체육 활성화에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.10 ~ 2020년

○ 위 치 : 고모동 26-6

○ 규 모 : 13,513㎡(패밀리파크 8,000㎡/남측 5,513㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,135백만원(부지매입 1,624/시설비 300/기타 211)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,135	0	4	1,664	467
구 비	2,135	0	4	1,664	467

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 공유재산관리계획 수립 : 2018. 9월

○ 구 지방재정투융자심사 : 2018. 10월

□ 향후계획

○ 토지매입(협의매수) : 2019. 3월

○ 실시설계 용역 : 2019. 5월

○ 행위허가 신청 : 2019. 9월

○ 공사시행 : 2020. 5월

사업명

수경지역 전통문화, 건강체험

지원연계 주민HI-UP프로젝트

담당자

관광과 배소현(☎666-4914)

□ 사업목적 및 필요성

○ ‘주민행복지수 일등 도시 구현’의 비전과 『수성구 관광정보체험센터 관광거점화』의 성과 목표를 통해 지역주민의 삶의 질 개선과 주민의 실질적인 행복지수(Happiness Index) 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 7. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 수성구·경산시 지역

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,658백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1,658	1,154	504	-	-
국 비	1,294	923	371	-	-
시 도 비	97	69	28	-	-
구 비	267	162	105	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 전통문화·건강체험 기반 조성 (관광정보체험센터, 한국전통문화공연장)

○ 2015~2018년 계획에 따른 사업 추진완료

□ 향후계획

○ 관광정보체험센터, 한국전통문화공연장 지속 활용

○ 전통문화건강체험 프로그램 개발·운영 및 마케팅 사업 지속

□ 사업변경 내역

○ 2015년 농림부 국비 220백만원 일괄삭감

○ 2018년 구비 40백만원 편성

○ 사업기간 : 2015 ~ 2018 (당초 2015 ~ 2017)

사업명

청소년 문화의 집 건립

담당자

평생교육과 김성열(☎666-4243)

□ 사업목적 및 필요성

○ 17개 초·중·고 학교가 밀집되어 있는 고산지역에 청소년 정보·문화·예술     중심의 청소년 문화의 집을 건립하여 건전한 청소년 육성에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위 치 : 시지동 152-2번지

○ 규 모 : 연면적 1,911.31㎡(부지면적 678㎡), 지하1층/지상5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,500	-	11	2,834	2,655
국 비	4,840	-	9	2,486	2,345
구 비	660	-	2	348	310

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 시 투자심사 완료 : 2017. 2. 22.

○ 관내 청소년(초·중·고) 수요조사 실시 : 2018. 2. 28. ~ 3. 9.

○ 건립심의위원회 개최 : 2018. 4. 5.

○ 설계공모 및 입상작 선정 : 2018. 6. 19. ~ 9. 14.

○ 기본 및 실시설계 시행 : 2018. 10. 15. ~

○ BF예비인증, 일상감사, 계약심사 : 2019. 4. ~

□ 향후계획

○ 2019. 9. : 착공 예정

○ 2020. 9. : 준공 예정

사업명

수성구 생활자원회수센터 건립

담당자

자원순환과 문성현(☎666-2721)

□ 사업목적 및 필요성

○ 효율적인 분리작업 수행으로 재활용률 향상

○ 에너지 회수율 제고로 친환경도시 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 4월 ~ 2018. 1월

○ 위 치 : 수성구 청호로 10(범물동)

○ 규 모 : 대지 5,776㎡, 연면적 2,776㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,295백만원(국비 2,100, 시비 2,450, 구비 3,745)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,295	8,195	100	-	-
국 비	2,100	2,100	0	-	-
시 도 비	2,450	2,450	0	-	-
구 비	3,745	3,645	100	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공사기간 : 2016. 11월 ~ 2017. 12월

○ 공사준공 : 2018. 1월

□ 향후계획

○ 수성구 생활자원회수센터 운영 철저

사업명

수성명품단독주택지 조성사업

담당자

도시디자인과 손용택(☎666-3272)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 저층주택지에 주차·방범·소공원 등 편의시설이 잘 갖춰진 공동주택의 장점을 접목하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2019년

○ 위 치 : 범어2동(3개소), 만촌2동(1개소)

○ 규 모 : 수성구 국채보상로186길 45 외 412필지

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,280	1,799	344	2,137	-
국 비	2,140	899	172	1,069	-
시 도 비	1,070	450	86	534	-
구 비	1,070	450	86	534	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2015. 2. ~ 12. : 1차 사업구역 기본 및 실시설계용역

○ 2016. 3. ~ 2017. 12. : 1차 사업구역 사업시행

○ 2018. 6. : 만촌2동 주민커뮤니티센터 준공

□ 향후계획

○ 2019. 4. : 공영주차장 부지매입 완료

○ 2019. 5. : 범어2동 주민커뮤니티센터 실시설계 착수

○ 2019. 7. : 공원보수공사 실시설계 완료

○ 2019. 8. ~ 12. : 세부사업 추진 완료

○ 2020. 10. : 범어2동 주민커뮤니티센터 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 : 2015년 ~ 2017년(당초) ⇒ 2015년 ~ 2019년(변경)

사업명

들안길 행복마을 프롬나드 조성사업

담당자

도시디자인과  손현호(☎666-3271)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성유원지의 다양한 개발사업과 연계하여 들안로에 걷고싶은 산책로를 조성, 들안로 상권 활성화 및 지역 명소화 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 상화네거리(상동지구대) ~ 들안길 삼거리 좌우 400m 구간

○ 기    간 : 2016 ~ 2020(5년)

○ 사업내용

∙ 도로다이어트를 통한 걷고 싶은 프롬나드 조성(길이 620m)

∙ 미슐랭 프로젝트를 통한 들안길 음식점 특화 및 관광 명소화 추진

∙ 상동·두산동 주거환경개선 및 주민역량강화사업 추진 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,238백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,238	241	2,227	1,506	2,063
국 비	3,119	256	1,233	753	877
시 도 비	1,560	112	633	377	438
구 비	1,559	74	361	376	748

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 기본 및 실시설계 용역 착수                : 2016.  5. 4.

○ 설계용역 중지(1차)                         : 2016. 11. 3.

○ 주거환경개선사업 시행                      : 2017.  6. ~ 12.

○ 설계용역 중지(2차)                         : 2017.  7.

○ 프롬나드 조성에 따른 주민설문조사실시       : 2018.  8.

○ 도시재생 수미창조 포럼, 타운홀 미팅 개최   : 2018. 11.

○ 대구시 협의 및 사업계획 변경 승인(국토부)  : 2018. 12.

□ 향후계획

○ 2019. 하반기 : 설계용역 중지해제 및 완료, 착공

○ 2020. 하반기 : 준공

사업명

범어1동 범어성당 동편 도로건설

담당자

건설과 김종면(☎666-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일반거주 지역에 장기미집행 도시계획도로를 개설함으로써 교통 혼잡과

인근 주민의 우회 통행 불편을 개선하여 오랜 주민숙원사업을 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 8월 ~ 2018. 12월

○ 위 치 : 수성구 범어1동 범어성당 동편

○ 규 모 : 도로건설 B=8.0m, L=150m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,129백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,129	1,829	300	-	-
구 비	2,129	1,829	300	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015.  9월 : 실시설계용역 시행

○ 2015. 10월 : 보상열람공고 및 감정평가

○ 2015. 11월 : 공사 착공

○ 2015. 12월 : 범어성당 편입부지 연도별 보상 협의

○ 2016. 11월 : 공사 준공

○ 2017.  2월 : 범어성당 보상

○ 2018.  1월 : 범어성당 보상 완료

사업명

만촌3동 수성대학교 서편 도로건설

담당자

건설과 김종면(☎666-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 만촌3동 수성대학교 및 오성중·고등학교 주변 도로개설을 통한 지역주민들의 교통불편 해소와 환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1월 ~ 2019. 12월

○ 위 치 : 만촌동 산377-1번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=6~7m, L=310m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,413백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,413	610	1,803	-	-
구 비	2,413	610	1,803	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2016.  4월 : 협약서 체결(수성구청, 주식회사 삼정이앤시)

○ 2016.  6월 : 실시설계 시행

○ 2017.  4월 : 실시계획 인가 고시

○ 2017.  5월 : 보상열람공고 및 협의

○ 2017. 11월 : 공사착공

○ 2017. 12월 : 공사중지(보상지연)

○ 2018.  5월 : 실시계획변경 인가 고시

○ 2018.  6월 : 수용재결

○ 2018.  8월 : 공사중지 해제

□ 향후계획

○ 2019.  6월 : 실시계획변경 인가 신청

○ 2019. 12월 : 공사준공

사업명

두산동 수성못 동편 도로건설

담당자

건설과 김종면(☎666-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성호텔 증축 및 수성못 관광 활성화에 따른 이용객 및 교통량 증가

예측되어 도로개설을 통한 교통문제 해결 및 관광 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 9월 ~ 2019. 10월

○ 위 치 : 수성호텔 ~ 불교한방병원

○ 규 모 : 도로건설 B=15→20m, L=280m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,785백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,785	44	3.838	903	-
구 비	4,785	44	3.838	903	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2015. 8월 : 협약체결(구청 ↔ ㈜호텔수성)

○ 2018. 1월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2019. 10월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증가 : 당초 2,050백만원 → 변경 4,785백만원

- 보상금 증가에 따른 총사업비 증가

사업명

고산2동 대흥마을 진입도로 건설

담당자

건설과 김종면(☎666-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개발제한구역 해제지역의 마을 진입도로 건설로 집단취락지역의 교통 환경     개선에 따른 민원 해소 및 지역개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 3월 ~ 2019. 12월

○ 위 치 : 대흥동 575번지 일대

○ 규 모 : 도로건설 B=8m, L=555m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,048백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,048	3,967	994	87	-
구 비	5,048	3,967	994	87	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2016. 3월 : 실시설계 용역

○ 2016. 4월 : 실시설계인가 고시

○ 2016. 6월 : 보상열람 공고

○ 2017. 7월 : 공사 착공

○ 2018. 9월 : 공사 준공

□ 향후계획

○ 2019. 9월 : 보안등 설치

사업명

들안길 한전지중화 사업

담당자

건설과 권석훈(☎666-2996)

□ 사업목적 및 필요성

○ 들안길 프롬나드사업 도로공사 시 한전지중화를 통한 도시미관 향상 및 보행환경개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1월 ~ 2020. 9월

○ 위 치 : 상화네거리(상동지구대)~들안길삼거리

○ 규 모 : 한전지중화 L=620m(양쪽)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,200	-	-	5,200	-
구 비	2,600	-	-	2,600	-
기 타	2,600	-	-	2,600	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2017. 4월 : 2017년 한전지중화 대상사업지 선정(한전 → 수성구)

○ 2017. 8월 : 들안길 한전지중화사업 추진계획 수립

○ 2018. 1월 : 이행협약서(수성구 ↔ 한전) 체결

□ 향후계획

○ 2019. 6월 : 한전 지중화 설계완료

○ 2019. 7월 : 이행협약서(수성구 ↔ KT 및 통신사업자) 체결

○ 2019. 8월 : KT 및 통신사업자 지중화 설계완료

○ 2019. 9월 : 공사 착공(들안길 프롬나드 행복마을 조성사업과 병행 추진)

○ 2020. 9월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간

- 당초 : 2017. 1월 ~ 2019. 12월

- 현재 : 2017. 1월 ~ 2020.  9월

사업명

개발제한구역 훼손지 복구사업

담당자

공원녹지과  고혜정(☎666-2904)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성의료지구 개발에 따른 「개발제한구역 훼손지 복구사업」으로, 방치된 구 예비군훈련장 등에 공원을 조성하여 도심의 휴양 및 다양한 문화공간 확충으로 지역주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015년 ~ 2018년

○ 위    치 : 황금동 산106번지 일원

○ 규    모 : 108,874㎡

○ 주요시설 : 숲체험장, 숲속탐방길, 무학숲도서관, 진입도로, 주차장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	22,450	19,870	2,580	-	-
구 비	22,450	19,870	2,580	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 11월 : 대구도시공사와 업무협약 체결

○ 2015. 7월 ~ 2017. 12월 : 도시관리계획 및 실시설계 용역

○ 2016. 3월 ~ 2016. 11월 : 국토부 협의

○ 2016. 7월 ~ 2017. 12월 : 보상

○ 2017. 3월 ~ 2017. 12월 : 관련기관․실과 협의

○ 2017. 9월 ~ 2018.  1월 : 공원조성계획결정 및 실시계획 고시

○ 2018.  2월 : 공사 착공

○ 2018. 11월 : 공사 준공(사업완료)

사업명

고모마을~명복공원간 도로건설

담당자

공원녹지과  김문수(☎666-2832)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주변에 농지가 많아 영농기계 통행은 많으나 노폭이 협소하여 차량교행이 어렵고 안전사고 우려가 많으므로 도로를 건설하여 안전사고 예방 및 주민들의 통행불편을 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017년 ~ 2022년

○ 위    치 : 고모동 562번지 일원(고모마을~명복공원)

○ 규    모 : 도로건설공사(B=8m, L=1,518m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,500	104		1,296	5,100
국 비	5,850	93	-	1,107	4,650
구 비	650	11	-	189	450

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2017년 개발제한구역 주민지원사업 신청  : ’16. 3월

○ 2017년 개발제한구역 주민지원사업 선정  : ’16. 9월

○ 기본계획 및 도시계획시설결정 시행       : ’17. 3 ∼ ’18. 12

○ 실시설계용역 및 각종 인허가             : ’19. 1 ∼ ’19. 8

○ 보상 및 공사 시행                       : ’19. 8. ∼ ’22.

사업명

진밭골 야영장 조성

담당자

공원녹지과  김문수(☎666-2832)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최근 야영(캠핑)에 대한 시민들의 수요가 증가하고 있으며, 개발제한구역 내 접근성이 우수하고 산림휴양시설과 연계 가능한 진밭골 일원에 야영장을 조성하여 자연 속 휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016년 ~ 2018년

○ 위    치 : 범물동 1201-1번지 일원

○ 규    모 : 4,900㎡

○ 주요시설 : 캐러반 5개소, 오토캠핑장 11면, 야영장 6면, 관리실, 화장실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,006백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2.006	175	1,831	70	-
국 비	920	25	895	70	-
구 비	1,086	150	936	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016년 개발제한구역 주민지원사업 선정  : ’16. 9월

○ 2017년 구비 추경편성                  : ’17. 5월

○ 2018년 개발제한구역 주민지원사업 선정  : ’17. 9월

○ 공사 착공                              : ’18. 1월

○ 공사 준공(사업완료)                    : ’18. 12월

10-2. 지방채 발행사업

우리 구에서 2018에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 구에서 ‘18년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.