109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 수성구에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
문화적도시재생	24,068	-	3,161	4,533	16,374	2022	2019	30
드론택시(UAM) 서비스 실증	400	-	400	-	-	2020	2020	100
범어4동 행정복지센터 신축	7,258	4,637	26	2,595	-	2022	2018	80
황금2동 행정복지센터 신축	10,159	6,305	175	3,679	-	2022	2017	80
두산동 행정복지센터 신축	9,897	4,120	130	5,647	-	2022	2019	80
만촌2동 행정복지센터 신축	11,702	1,434	-	499	9,769	2023	2019	30
파동 행정복지센터 신축	11,282	2,371	14	392	8,505	2023	2019	30
(가칭)수성창업허브 건립	14,673	-	2,286	-	12,387	2024	2019년	20
신매시장 주차환경개선사업	16,200	-	528	657	15,015	2023	2019	15
고산서원 복원정비	697	656	41	-	-	2020	2016	100
수성못 페스티벌	1,042	-	337	340	365	연례반복	2019	연례반복
수성아트피아 리모델링	9,810	-	400	6,910	2,500	2022	2019	10
수성못 야외무대 상설공연	770	460	110	100	100	연례반복	2019	연례반복
수성못 뮤지컬 프린지	330	-	110	110	110	연례반복	2019	연례반복
수성빛예술제 개최	2,740	570	800	570	800	연례반복	2020	연례반복
청소년 문화의집 건립	5,900	499	2,857	2,544	-	2021	2,017	90
찾아가는 4차산업 체험교육	380	250	130	-	-	2020	2019	100
수성구 육아종합 지원센터 설치	4,637	3,269	342	326	700	2022	2020	22
국공립어린이집 확충 (고산어린이집대체신축)	4,299	4,042	112	145	-	2022	2020	22
제2구민운동장 건립	27,400	171	96	18,583	-	2022	2020	60%
수성패밀리파크 남측 체육시설 조성	2,107	1,606	501	-	-	2020	2018	100%
(가칭)수성행복드림센터 건립	26,131	-	3,933	3,926	18,272	2023	2019	20%
수성못 관광 안내소 확장 설치	350	-	6	344	-	2021	2020	70%
수성명품단독주택지 조성사업	4,280	3,045	906	329	-	2021	2013	92
들안길 프롬나드 행복마을 조성사업	6,518	3,205	3,070	243	-	2021	2015	100
금호강 사색있는 산책로 조성사업	7,500	3,330	103	-	4,170	2021	2019	30
삼덕동 820-7번지선 (소2-수85)도로건설	3,412	-	1,760	1,652	-	2023	2020	70
배신교 재가설 사업	3,120	-	120	-	3,000	2023	2020	10
고모마을~명복공원간 도로건설	7,800	1,400	-	1,000	5,400	2023	2017	18

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2020년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

문화적 도시재생

담당자

정책추진단 배주호(☎666-2512)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 대표명소인 수성못의 브랜드 파워를 들안길 너머 저층주택지까지

확장하기 위한 문화·교류공간을 조성하여 지역사회와 경제 활력화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2022.

○ 위 치 : 수성못 ~ 상동(들안길 프롬나드) ~ 중동 ~ 동성시장 일원

○ 규 모 : 공공예술창작촌 조성(총 10개소 계획)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,068백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	24,068	-	3,161	4,533	16,374
시군구비	24,068	-	3,161	4,533	16,374

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 공공예술창작촌 부지확보 (5개소) : ’19. 11. ~ ’20. 9.

○ 지역사회 의견수렴(원탁회의, 포럼, 위원회 등) : ’20. 7. ~

○ 스토리, 콘텐츠 개발 및 운영계획 수립 용역실시 : ’21. 3. ~ 6.

□ 향후계획

○ 지역사회 의견수렴 지속추진

○ 공공예술창작촌 조성 및 운영계획 수립 : ’21. 7.

○ 예술창작촌 조성(설계 및 공사) : ’21. 하반기

사업명

드론택시(UAM) 서비스 실증

담당자

정책추진단 김종원(☎666-2153)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미래 먹거리 산업으로 대두된 UAM 산업 서비스 실증으로 미래도시

이미지 선점 및 산업 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 8월 ~ 2020. 11월

○ 위 치 : 수성못 일원

○ 내 용 : 드론택시 서비스 실증(수성못 선회비행, 2km)

드론 및 군집비행 실증, 지역 드론기업 전시․홍보․체험 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	400	-	400	-	-
시군구비	400	-	400	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공모 우선협상대상자 선정 및 협약체결 : ’20. 8. ~ 10월

○ 기체인증, 감항증명, 안전대책 등 : ’20. 10. ~ 11월

○ 드론택시 서비스 실증 : ’20. 11월

□ 향후계획

○ 드론실증도시 공모 추진 및 드론산업 기반 조성

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초투자심사예산 : 600백만원 / 최종변경예산 : 400백만원

사업명

범어4동 행정복지센터 신축

담당자

행정지원과 손영민(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후되고 협소한 공간으로 주민 이용이 불편한 범어4동 동 청사 이전

○ 다양한 행정서비스 제공과 함께 문화 및 공간 공유가 가능한 행정복지센터 신축으로 행복공동체의 기반을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 8월 ~ 2022. 6월

○ 위 치 : 달구벌대로504길 24-3(범어동)

○ 규 모 : 지하1층, 지상5층 / 부지면적 474㎡, 연면적 1,201㎡

- 배치 : 지하주차장, 행정복지센터, 주민자치센터, 주민공유공간, 회의실, 예비군동대 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,258백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,258	4,637	26	2,595	-
국 비	1,000	1,000	-	-	-
시 비	1,000	1,000	-	-	-
구 비	5,258	2,637	26	2,595	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2018. 8월 : 기본계획 수립

○ 2018. 10월 : 공유재산 심의회 심의

○ 2018. 10월 : 공유재산 관리계획 의회 의결(226회 임시회)

○ 2019. 4월 : 부지매입

○ 2019. 5 ~ 6월 : 주민 협력단 구성 및 설명회 개최

○ 2020. 6월 ~ 2021. 6월 : 설계공모 및 실시설계

□ 향후계획

○ 2021. 7월 ~ 2022. 6월 : 공사시행

○ 2022. 7월 : 신청사 이전

사업명

황금2동 행정복지센터 신축

담당자

행정지원과 손영민(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후되고 협소한 황금2동 행정복지센터를 주거지역이 밀집한 동 중심지역으로 이전 및 주민 복리증진을 위한 동청사 신축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 5월 ~ 2022. 5월

○ 위 치 : 청솔로2길 64(황금동)

○ 규 모 : 지하 1층, 지상 4층/ 부지면적 886.1㎡, 연면적2,375㎡

- 배치 : 지하주차장, 행정복지센터, 주민자치센터, 열린도서관, 회의실, 예비군동대 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,159백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,159	6,305	175	3,679	-
국 비	1,592	1,346	-	246	-
시 비	1,368	1,184	-	184	-
구 비	7,199	3,775	175	3,249	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2017. 5월 : 기본계획 수립

○ 2017. 8월 : 공유재산 심의회 의결

○ 2017. 9월 : 공유재산 관리계획 의회 의결(218회 임시회)

○ 2018. 8월 : 황금2동 행정복지센터 신축계획

○ 2018. 8월 : 공유재산 심의회 심의

○ 2018. 9월 : 공유재산 관리계획 변경안 의회 의결

○ 2018. 12월 : 부지매입

○ 2019. 3월 : 주민협력단 구성 및 설명회 개최

○ 2020. 7월 : 주민설명회 개최

○ 2020. 1월 ~ 2021. 5월 : 설계공모 및 실시설계

□ 향후계획

○ 2021. 6월 ~ 2022. 5월 : 공사시행

○ 2022. 6월 : 신청사 이전

사업명

두산동 행정복지센터 신축

담당자

행정지원과 손영민(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 행정서비스 제공과 함께 문화 및 공간 공유가 가능한 행정복지센터 신축으로 행복공동체의 기반을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4월 ~ 2022. 5월

○ 위 치 : 두산동 71-6번지 일원

○ 규 모 : 지하 1층, 지상 4층/ 부지면적 798㎡, 연면적 2,110㎡

- 배치 : 지하주차장, 행정복지센터, 주민공유공간, 회의실, 예비군동대 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,897백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,897	4,120	130	5,647	-
시 비	8,597	2,820	130	5,647	-
구 비	1,300	1,300	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2019. 4월 : 기본계획 수립

○ 2019. 9월 : 부지매입

○ 2019. 10월 : 주민협력단 구성 및 설명회 개최

○ 2019. 12월 : 공공건축가 설계공모 기획ㆍ운영 지원 용역 시행

○ 2019. 10월 : 주민협력단 구성 및 설명회 개최

○ 2020. 1월 ~ 2021. 5월 : 설계공모 및 실시설계

○ 2021. 5월 : 계약심사 및 일상감사

□ 향후계획

○ 2021. 6월 ~ 2022. 5월 : 공사시행

○ 2022. 6월 : 신청사 이전

사업명

만촌2동 행정복지센터 신축

담당자

행정지원과 손영민(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 행정서비스 제공과 함께 문화 및 공간 공유가 가능한 행정복지센터 신축으로 행복공동체의 기반을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 9월 ~ 2023. 8월

○ 위 치 : 만촌동 962-16번지 일원

○ 규 모 : 지하 1층, 지상 4층/ 부지면적 1,064㎡, 연면적 2,116㎡

- 배치 : 지하주차장, 행정복지센터, 주민공유공간, 회의실, 예비군동대 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,702백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,702	1,434	-	499	9,769
구 비	11,702	1,434	-	499	9,769

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2019. 11월 : 수성구 중기지방재정계획 반영

○ 2020. 3월 : 공유재산 관리계획 의회 의결

○ 2020. 9월 : 만촌2동 행정복지센터 신축 기본계획 수립

○ 2020. 9월 : 제2차 대구시 재정투자심사 의뢰

○ 2020. 10월 : 제2차 대구시 재정투자심사

○ 2021. 2월 : 공공건축가 활용 설계 지침서 작성 용역

○ 2021. 3 ~ 4월 : 공공건축 사업계획 사전검토 제출 및 의견서 통지

○ 2021. 6월 : 공공건축심의

□ 향후계획

○ 2021. 8 ~ 9월 : 설계공모

○ 2021. 10월 ~ 2022. 7월 : 실시설계

○ 2022. 8월 : 일상감사 및 건축허가

○ 2022. 9월 ~ 2023. 8월 : 공사시행

○ 2023. 9월 : 신청사 이전

사업명

파동 행정복지센터 신축

담당자

행정지원과 손영민(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 행정서비스 제공과 함께 문화 및 공간 공유가 가능한 행정복지센터 신축으로 행복공동체의 기반을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4월 ~ 2023. 7월

○ 위 치 : 파동 191-25번지 일원

○ 규 모 : 지하 1층, 지상 4층/ 부지면적 961㎡, 연면적 1,600㎡

- 배치 : 지하주차장, 행정복지센터, 주민공유공간, 회의실, 예비군동대 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,282백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,282	2,371	14	392	8,505
구 비	11,282	2,371	14	392	8,505

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2018. 12월 : 수성구 중기지방재정계획 반영

○ 2019. 4월 : 파동 행정복지센터 신축 기본계획 수립

○ 2019. 4월 : 제2차 대구시재정투자심사 의뢰

○ 2019. 5월 : 제2차 대구시재정투자심사

○ 2019. 5월 : 공유재산 심의회 심의

○ 2019. 5월 : 공유재산 관리계획 의회 의결

○ 2020. 11월 : 공공건축가 활용 설계 지침서 작성 용역

○ 2021. 2 ~ 3월 : 공공건축 사업계획 사전검토 제출 및 의견서 통지

○ 2021. 6월 : 공공건축심의

□ 향후계획

○ 2021. 7~ 8월 : 설계공모

○ 2021. 9월 ~ 2022. 6월 : 실시설계

○ 2022. 7월 : 일상감사 및 건축허가

○ 2022. 8월 ~ 2023. 7월 : 공사시행

○ 2023. 8월 : 신청사 이전

사업명

(가칭)수성창업허브 건립

담당자

일자리경제과 김정미(☎666-4335)

□ 사업목적 및 필요성

○ 창업 초기 소규모 스타트업 기업을 위한 사업공간 확보 및 4차 산업혁명

시대 패러다임에 맞춘 ICT융합 등 미래 성장산업 수요를 반영할 수 있는       일자리 창출 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2024년

○ 위 치 : 대흥동 858-2(수성알파시티 내)

○ 규 모 : 지하1층/지상4층, 부지면적: 2,113㎡, 연면적 4,020㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,673백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	14,673	-	2,286	-	12,387
구비	14,673	-	2,286	-	12,387

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2019. 9월: (가칭)수성창업허브 건립계획 수립

○ 2019. 10월: 공유재산관리계획 의결

○ 2020. 5월: 지식산업단지 입주계약·분양계약 체결 및 소유권이전

○ 2020. 12월: 매입부지 임시공영주차장(60면) 준공(교통과)

□ 향후계획

○ 건축비 국비 확보 지속적 노력

□ 사업변경 내역

○ 기간 : 당초(2020년~2023년), 변경(2020년~2024년)

사업명

신매시장 주차환경개선사업

담당자

일자리경제과 이석철(☎666-4313)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주차환경 개선을 통해 전통시장 이용객에게 편리한 구매환경을 제공하고 인근 주민의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019년 ~ 2023년

○ 위  치 : 대구광역시 수성구 신매동 571번지

○ 규  모

- 지하2층(주차장)

- 주차면수 134면 정도

- 대지면적 3,705㎡, 연면적 5,780㎡ 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	16,200	-	528	657	15,015
국 비	6,000	-	214	657	5,129
시 비	5,100	-	157	-	4,943
구 비	5,100	-	157	-	4,943

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  15%)

○ 2019. 12월 : 사업 부지 사용 동의(시 의회)

○ 2020. 05월 : 도시계획시설(주차장) 변경 결정

○ 2020. 08월 : 건설사업관리 용역 착수

○ 2021. 02월 : 설계용역 착수(설계공모)

□ 향후계획

○ 2021. 09월 : 설계용역 완료

○ 2022. ~ 2023. : 공사시행(20개월 소요예정)

사업명

고산서원 복원정비

담당자

문화예술과 이대기(☎666-2175)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고산서원 복원을 통해 서원의 옛 기능을 회복하여 역사 및 선비교육의        장으로 활용하고 향후 주변 역사자원을 연계하여 관광자원으로 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2020

○ 위 치 : 성동 산22-3번지 일원(4,000㎡)

○ 규 모 : 사당, 계단 및 담장 복원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 697백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	697	656	41	-	-
시군구비	697	656	41	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 고산서원 복원·정비 공사 준공 : 2020. 5. 25.

○ 사당 위패 봉안식 : 2020. 7. 24.

□ 향후계획

○ 고산서원 활용 교육프로그램 개발 및 운영

사업명

수성못 페스티벌

담당자

문화예술과 서은영(☎666-2163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 문화예술 진흥 및 주민화합의 장 마련

○ 수려한 자연경관을 갖춘 시민의 쉼터인 수성못을 관광명소화

○ 국내 첫 우수 외식업지국 들안길을 연계하여 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 11. 4. ~ 11. 29.

○ 위 치 : 수성못, 들안길, 수성랜드, 울루루문화광장

○ 규 모 : 관람객 12만명 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,042백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,042	-	337	340	365
국 비	30	-	30	-	-
시 도 비	110	-	45	20	45
시군구비	902	-	262	320	320

□ 추진상황

○ 수성못 페스티벌 세부계획 수립 : 2020. 4월

○ 제7회 수성못 페스티벌 개최 : 2020. 11. 4. ~ 11. 29.

○ 축제평가보고회 개최 : 2020. 11월

□ 향후계획

○ 제8회 수성못페스티벌 개최 : 2021. 10. 1. ~ 10. 3.

□ 사업변경 내역

○ 당초투자심사예산 : 305백만원 / 최종변경예산 : 337백만원

사업명

수성아트피아 리모델링

담당자

문화예술과 안경임(☎666-2162)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후시설 교체를 통한 시설개선으로 명품공연장 조성

○ 공연장을 찾는 관람객에게 다양한 편의시설 제공으로 만족도 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2021 ~ 2022년

○ 위치 : 수성구 무학로 180 수성아트피아

○ 내용 : (시설) 무대기계, 조명, 음향, 영상, 공조시스템, 용지홀단열공사

(건축) 용지, 무학, 알토홀, 분장실 리모델링

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,810백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,810	-	400	6,910	2,500
국 비	400	-	0	400	-
시 도 비	3,500	-	400	3,100	-
시군구비	5,910	-	0	3,410	2,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계 : 2021. 5 ~ 9월

□ 향후계획

○ 일상감사 등 행정절차 : 2021. 10 ~ 11월

○ 리모델링 공사 착공 / 준공 : 2021. 12월 / 2022년 10월

□ 사업변경 내역

○ 당초투자심사예산 : 9,050백만원 / 최종변경예산 : 9,810백만원

사업명

수성못 야외무대 상설공연

담당자

문화예술과 송하나(☎666-2172)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성못 야외무대를 활용한 다양한 장르의 문화예술 상설공연 실시로

공연산업 인프라를 조성하고 주민에게 양질의 문화향유 기회 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 7. 17. ~ 2020. 10. 3.

○ 위 치 : 수성못 일원

○ 규 모 : 총 13회 공연 실시

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 770백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	770	460	110	100	100
시 도 비	470	350	80	20	20
시군구비	300	110	30	80	80

□ 추진상황

○ 2020 수성못 야간상설공연 추진계획 수립 : 2020. 4월

○ 공연 주관단체 공모 선정 및 사업진행 : 2020. 4월 ~ 10월

- 사업진행 협의 후 공연 실시 및 평가, 피드백

○ 사업 보조금 정산 : 2020. 12월

- 총 13회 공연 실시

□ 향후계획

○ 2021년 수성못 야간상설공연 실시 : 2021. 9월 ~ 11월(매주 금, 총 13회)

사업명

수성못 뮤지컬 프린지

담당자

문화예술과 송하나(☎666-2172)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대구국제뮤지컬페스티벌 기간 중 산발적으로 진행되는 프린지 공연을 수성못 무대와 주변 공간으로 집중하여 지역사회의 축제 참여와 지역 경제 발전 유도 및 수성못의 문화관광 중심지 역할 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 10. 22. ~ 2020. 10. 25.

○ 위 치 : 수성못 일원(수상무대 및 울루루무대)

○ 규 모 : 다양한 뮤지컬 공연 및 산책로 포토존 설치(4일간)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 330백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	330	-	110	110	110
시군구비	330	-	110	110	110

□ 추진상황

○ 2020 수성못 뮤지컬 프린지 지방보조금 지원신청 및 선정 : 2020. 1~2월

○ 2020 수성못 뮤지컬 프린지 지방보조금 교부결정 및 지출 : 2020. 7월

○ 공연 주관단체 사업진행 : 2020. 7월 ~ 10월

- 사업진행 협의 후 공연 실시 및 평가, 피드백

○ 사업 보조금 정산 : 2020. 12월

□ 향후계획

○ 2021년 수성못 뮤지컬 프린지 페스티벌 실시 : 2021. 10. 16.(예정)

□ 사업변경 내역

○ 코로나19에 따른 사업내용 변경(현장축제→현장행사 축소 및 온라인 병행)

사업명

수성빛예술제

담당자

문화예술과 안경임(☎666-2162)

□ 사업목적 및 필요성

○ 겨울철 관광 비수기에 조명을 이용한 볼거리 제공 및 참여형 빛콘텐츠를       활용한 즐길거리 제공을 통해 관광객 유치로 지역활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 12. 11. ~ 2020. 12. 29.

○ 위 치 : 수성못 일원

○ 규 모 : 5,000여명의 주민 참여, 6,000여 작품 전시 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,740백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,740	570	800	570	800
시군구비	2,740	570	800	570	800

□ 추진상황

○ 제1회 수성빛예술제 개최 및 평가, 피드백 : 2019. 12월 ~ 2020. 2월

○ 제2회 수성빛예술제 개최 및 평가, 피드백 : 2020. 12월 ~ 2021. 2월

□ 향후계획

○ 제3회 수성빛예술제 개최 : 2021. 12. 11. ~ 2022. 1. 3.

□ 사업변경 내역

○ 당초투자심사예산 : 537백만원 / 최종변경예산 : 570백만원

사업명

청소년 문화의 집 건립

담당자

교육지원과 손용택(☎666-4241)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소년 인구비중이 가장 높은 고산지역에 청소년을 위한 복합문화 공간을

조성하여 청소년들의 삶의 질 향상 도모

○ 정보, 문화, 교양, 공연 등 다양한 프로그램 운영과 지역사회 청소년 종합

체험 활동의 장으로 활용할 수 있도록 기능강화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 6월 ~ 2021. 1월

○ 사업위치 : 수성구 시지동 152-2번지(고산초등학교 옆)

○ 사업규모 : 부지면적 678㎡, 연면적 1911.31㎡(지하1층/지상5층)

○ 주요시설 : 강의실, 동아리실, 연습실, 체험실, 휴카페, 다목적실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,900	499	2,857	2,544	-
국 비	2,495	499	1,461	535	-
시 도 비	2,345	-	934	1,411	-
시군구비	1,060	-	462	598	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 설계 공모 접수 및 발표 : 2018. 9. 3. ~ 2018. 9. 14.

○ 기본 및 실시 설계 : 2018. 10. 26. ~ 2019. 9. 4.

○ 여가부 기본설계 자문위 심의 : 2019. 2. 21.

○ BF예비인증 : 2019. 4. 24.

○ 일상감사 및 계약심사 : 2019. 7. 10. ~ 2019. 8. 22.

○ 착공 : 2019. 10. 31.

□ 향후계획

○ 준공 : 2021. 1월

□ 사업비 변경내역

○ 당초투자심사예산 : 5,500백만원 / 최종변경예산 : 5,900백만원

사업명

찾아가는 4차산업 체험교육

담당자

교육지원과 안선경(☎666-4233)

□ 사업목적 및 필요성

○ 4차 산업시대를 맞아 차량을 이용한 미래기술을 체험 프로그램을 운영하여        문제해결능력 및 창의력 등 미래 핵심 역량을 갖춘 인재를 육성하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 수성구 전역

○ 규 모 : 매년 20,000명 체험

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 380백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	380	250	130	-	-
시군구비	380	250	130	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 9.5t 트럭을 이용한 찾아가는 4차 산업 체험 교육 운영: 2019 ~ 2020

□ 향후계획

○ 수성메이커교육센터 설치(2020. 6.), 자체 메이커 교육과정 개발 및 운영

□ 사업변경 내역

○ 체험교육 완료에 따른 총사업비 감소: 900백만원 → 380백만원

사업명

수성구 육아종합지원센터 설치

담당자

청년여성가족과

윤지은(☎666-2611)

□ 사업목적 및 필요성

○ 육아지원을 위한 거점기관으로서 어린이집 지원과 관리 및 교직원 상담

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 2월 ~ 2022. 1월

○ 위 치 : 대구광역시 수성구 시지동 462-31(現 고산어린이집 부지)

○ 규 모 : 연면적 1167㎡, 지상2층 일부～5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,637백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,637	3,269	342	326	700
국 비	1,000	1,000	-	-	-
시 도 비	500	500	-	-	-
시군구비	3,137	1,769	342	326	700

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)

○ 신축계획 수립 : 2019. 2. 22.

○ 설계공모 및 심사 : 2019. 10 ~ 2019. 12

○ 실시설계 : 2020.1.14.

○ 설계완료 : 2020.12.16. (공공건축물 도시유일성 확보로 설계지연)

○ 착  공 : 2020.12.31.

○ 직영운영 계획 수립 : 2021.4.21.

<지하 토공사 중 암반발생, 주요건설자재(철근,레미콘) 수급불안 공사 순연>

□ 향후계획

○ 암(巖)발생 추가 사업비 및 기자재비 예산 확보

○ 공 사 : 2020. 12.31. ~ 2022. 1.(준공시기 다소 지연예상)

□ 사업변경 내역

○ 암(巖)판정위원회 시행결과에 따른 공사기간 연장

○ 토공사, 흙막이 공사비 변경 : 101,500천원 → 260,300천원(증158,800천원)

○ 사업 기간 : 2019. 2. ~ 2021. 11. → 2019.2. ~ 2022.1.

사업명

국공립어린이집 확충

(고산어린이집 대체신축)

담당자

청년여성가족과

윤지은(☎666-2611)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후한 국공립 어린이집인 고산어린이집의 대체신축으로 수준 높은

보육서비스 제공 및 안전하고 쾌적한 보육한경 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 2월 ~ 2022. 1월

○ 위 치 : 대구광역시 수성구 시지동 462-31

○ 규 모 : 연면적 898㎡, 지하1층, 지상1층～지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,299백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,299	4,042	112	145	-
국 비	466	461	-	5	-
시 도 비	233	230	-	3	-
시군구비	2,167	1,918	112	137	-
민간자본	1,433	1,433	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)

○ 신축계획 수립 : 2019. 2. 22.

○ 설계공모 및 심사 : 2019. 10 ~ 2019. 12

○ 실시설계 : 2020.1.14.

○ 설계완료 : 2020.12.16. (공공건축물 도시유일성 확보로 설계지연)

○ 착 공 : 2020.12.31.

<지하 토공사 중 암반발생, 주요건설자재(철근,레미콘) 수급불안 공사 순연>

□ 향후계획

○ 암(巖)발생 추가 사업비 예산 확보

○ 공 사 : 2020. 12.31. ~ 2022. 1.(준공시기 다소 지연예상)

□ 사업변경 내역

○ 암(巖)판정위원회 시행결과에 따른 공사기간 연장

○ 사업 기간 : 2019. 2. ~ 2021. 11. → 2019.2. ~ 2022.1.

사업명

제2구민운동장 건립

담당자

체육진흥과 김진서(☎2186)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민의 생활체육활동 욕구 충족 및 주민요구를 반영한 다양한 체육시설 조성으로 주민의 건강증진을 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2022

○ 위 치 : 매호동 203번지 일원

○ 규 모 : 대지면적 48,237㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	27,400	171	96	18,583	8,550
국비(균특)	1,275	-	-	-	1,275
특별교부세	600	-	-	-	600
구비	25,525	171	96	18,583	6,675

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ ’20. 12. : 토지협의 매수 추진

□ 향후계획

○ ’21.  12. : 토지수용 완료 및 소유권 이전

○ ’22.   1. : 착공

사업명

수성패밀리파크 남측 생활체육시설 조성

담당자

체육진흥과 김진서(☎2186)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민의 생활체육활동 욕구 충족 및 주민요구를 반영한 다양한 체육시설 조성으로 주민의 건강증진을 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2020

○ 위 치 : 고모동 26-6

○ 규 모 : 대지면적 5,513㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,107백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,107	1,606	501	-	-
구비	2,107	1,606	501	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ’19.  3. : 토지보상(협의매수)

○ ’19. 11. : 실시설계용역 완료

○ ’20. 5 : 준공

사업명

(가칭)수성행복드림센터 건립

담당자

체육진흥과 이은지(☎2185)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민의 생활체육활동 욕구 충족 및 주민요구를 반영한 다양한 체육시설 조성으로 주민의 건강증진을 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2023

○ 위 치 : 만촌동 851-1번지 일원

○ 규 모 : 대지면적 3,585.3㎡, 연면적 6,491㎡정도(지하2/지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,131백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	26,131	-	3,933	3,926	18,272
국비(기금)	6,000	-	1,800	1,550	2,650
국비(균특)	4,808	-	1,602	1,603	1,603
시비	4,664	-	471	723	3,470
구비	10,659	-	60	50	10,549

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ ’20. 12. : 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

○ ’21. 10. : 기본 및 실시설계 용역 완료

○ ’21. 11. : 행정절차 추진

○ ’21. 12. : 건설사업관리용역 착수 및 공사 착공

사업명

수성못 관광안내소 확장 설치

담당자

관광과 박현정(☎666-4921)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성못은 국·내외 관광객이 즐겨 찾는 대구의 대표명소로 여행하기 편안한 최적의 관광서비스 기반 확충이 필요

○ 다양한 문화콘텐츠 및 스토리자원을 활용한 수성구만의 특별한 기념품을 전시·판매하여 관광 만족도 제고

○ 특색 있는 디자인의 관광안내소 설치로 수성못 관광 명소화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 8월 ~ 2021년 9월

○ 위 치 : 대구광역시 수성구 두산동 606-2번지

○ 규 모 : 건축면적 80.5㎡, 연면적 49㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	350	-	6	344	-
시 도 비	50	-	6	44	-
시군구비	300	-	-	300	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 터파기 및 토공사, 골조공사 완료

□ 향후계획

○ 단열재 및 설비공사, 마감공사 후 9월 준공 예정

사업명

수성명품 단독주택지 조성사업

담당자

도시디자인과 안경임(☎666-3272)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 저층주택지에 주차·방범·소공원 등 편의시설이 잘 갖춰진

공동주택의 장점을 접목하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2021년

○ 위 치 : 범어2동(3개소), 만촌2동(1개소)

○ 규 모 : 수성구 국채보상로186길 45 외 412필지

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,280	3,045	906	329	-
국 비	2,140	1,522	573	45	-
시 비	1,070	761.5	290	18.5	-
구 비	1,070	761.5	43	265.5	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 92%)

○ 2015. 2. ~ 12. : 1차 사업구역 기본 및 실시설계용역

○ 2016. 3. ~ 2017. 12. : 1차 사업구역 사업시행

○ 2018. 6. : 만촌2동 주민커뮤니티센터 준공

○ 2019. 5. : 범어2동 주민커뮤니티센터 실시설계 착수

○ 2019. 10. : 무열어린이공원 보수

○ 2019. 10. : 마을공용주차장 조성 완료

○ 2020.  1. : 범어2동 커뮤니티센터 착공

□ 향후계획

○ 2021.  4. : 범어2동 주민커뮤니티센터 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 : 2015년 ~ 2020년(당초) ⇒ 2015년 ~ 2021년(변경)

사업명

들안길 프롬나드 행복마을 조성사업

담당자

도시디자인과 구혜련(☎666-3271)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성유원지의 다양한 개발사업과 연계하여 들안로에 걷고싶은 산책로를

조성, 들안로 상권 활성화 및 지역 명소화 추진

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016. ~ 2021. 2 (5년 정도)

○ 위    치 : 상화네거리(상동지구대) ~ 들안길삼거리 좌우 400m 구간

○ 사업내용 :

- 차선 축소․인도폭 조정을 통한 보행중심의 프롬나드 조성

- 상동․두산동 주거환경개선사업(공영주차장 및 커뮤니티센터 조성 등)

- 주민역량강화사업, 들안길 상권활성화 및 지역창의문화플랫폼 조성사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,518백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2021년 이후
계	6,518	3,205	3,070	243	-
국 비	3,049	1,853	1,183	13	-
시 비	1,524.5	826	693	5.5	-
구 비	1944.5	526	1,194	224.5	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본 및 실시설계 용역 착수                        : 2016.  5. 4.

※ 기본 및 실시설계 용역 중지(2016. 11. 3.)

○ 주거환경개선사업 시행                             : 2017. 6. ~ 12.

○ 대구시 협의 및 사업계획 변경 승인(국토부)          : 2018. 12.

○ 최종 주민설명회 및 보고회 개최                    : 2019. 5. ~ 6.

○ 기본 및 실시설계, 일상감사, 계약심사 완료          : 2019. 9. ~ 10.

○ 프롬나드 조성공사 착공                            : 2019. 12.

○ 사업계획 변경 신청(국토교통부) 및 승인                : 2020. 4

○ 프롬나드 조성공사 준공                            : 2020. 12월

○ 마을 주차장(2개소)준공 및 프롬나드사업 전체 완료  : 2021. 2월

□ 향후계획

○ 들안길 프롬나드 행복마을 조성이 완료됨에 따라 지역주민 및 내방객의

소통과 교류의 장으로 및 상인주도 상권활성화 활동 지원

사업명

금호강 사색있는 산책로 조성사업

담당자

건설과 김재영(☎666-2996)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금호강변 통행로 단절구간에 자연경관과 어울리는 산책로를 조성하여 통행불편을 해소하고 주민에게 여유와 낭만을 만끽할 수 있는 새로운 휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 팔현마을 ~ 남천 합류지점

○ 규 모 : 산책로 조성 B=2.0m L=4.7km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,500	3,330	103	-	4,067
구비	7,500	3,330	103	-	4,067

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30 %)

○ 2019. 4.	: 기본구상 및 타당성조사 용역 완료

○ 2019. 8.	: 지방재정투자사업 심사 완료

○ 2019. 12. : 실시설계용역 착수

○ 2020. 5.  : 주민간담회 개최 (고산2동, 고산3동)

○ 2020. 7.  : 국가사업 추진 건의 (부산지방국토관리청)

○ 2020. 8.  : 국가사업 결정 (우리구 사업 전 구간 제방확장)

○ 2020. 11. : 소규모환경영향평가 관련 협의 완료 (대구지방환경청)

○ 2020. 12. : 부산지방국토관리청 하천점용허가 관련 협의 및 2,3구간

(둔치부분 산책로) 사업 시행관련 협의

○ 2021. 6.  : 둔치 구간 일상감사, 계약심사 신청

□ 향후계획

○ 2021. 8.  : 1단계 구간 공사착공

사업명

삼덕동 820-7번지선(소2-수85) 도로건설

담당자

건설과 정민석(☎666-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개발제한구역 해제 된 집단취락지구 내 주요 장기미집행 도로를 개설하여

지역주민 숙원사업해소 및 지역균형개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년

○ 위 치 : 삼덕동 820-7번지 인원

○ 규 모 : 도시계획시설(도로) 개설 B=8m, L=293m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,412백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,412	-	1,760	1,652	-
시 도 비	800	-	-	800	-
시군구비	2,612	-	1,760	852	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70 %)

○ 1999.  2. : 도시계획시설(도로) 결정 고시(대고제11호)

○ 2019. 11. : 투자심사 완료

○ 2020.  1. : 실시설계 용역 착수 및 하천기본계획 반영 요청

○ 2020.  5. : 실시계획 열람 및 사업인정 의견 청취

○ 2020.  6. : 실시계획 고시 및 사업인정 협의(중토위), 보상계획공고

○ 2021.  6. : 보상협의 완료

○ 2021.  7. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 실시설계용역 완료

○ 2022. ~ 2023. : 공사착공 및 준공

사업명

배신교 재가설 사업

담당자

건설과 손동국(☎666-2912)

□ 사업목적 및 필요성

○ 「지진·화산재해대책법」 및 「대구광역시 지진방재 5개년 종합대책」에 따른      내진성능 미확보된 배신교를 개축하여 내진성능을 확보하고 안전한 도로 환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년~2023년

○ 위 치 : 배신교(수성4가동 1144-1번지)일원

○ 규 모 : 교량교체 1식(B=19.5m, L=20.0m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
시군구비	3,120	-	120	-	3,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10 %)

○ 2018. 4. ~ 11. : 배신교 외 18개소 내진성능평가 용역

○ 2018. 11. : 배신교 내진성능평가에 따른 내진보강대책 수립

○ 2020. 8.  : 중기지방재정 투자심사(區) 승인

○ 2020. 11. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 실시설계용역 완료

○ 2022. ~ 2023. : 공사착공 및 준공

사업명

고모마을~명복공원간 도로건설

담당자

공원녹지과 김선영(☎666-2832)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 개발제한구역 내 지역주민들의 숙원사업으로 개발제한구역 내

주민들의 삶의 질 향상 및 안전한 통행권 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2023년

○ 위 치 : 고모동 562번지 일원(고모마을~명복공원)

○ 규 모 : 도로건설 및 확장, B=8m, L=1,518m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,800	1,400	-	1,000	5,400
국 비	6,320	1,200	-	800	4,320
시군구비	1,480	200	-	200	1,080

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 18%)

○ 2016년  3월 : 2017년도 개발제한구역 주민지원사업 신청

○ 2016년  9월 : 2017년도 개발제한구역 주민지원사업 결정

○ 2017년  2월 : 대구광역시 투자사업 심사 완료

○ 2017년 10월 ~ 2019년 12월 : 도시계획시설(도로) 결정 및 실시설계용역

○ 2018년 12월 : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시

○ 2019년  6월 : 주민설명회 개최

○ 2019년 10월 ~ 2020년 12월 : 보상완료(1구간)

○ 2021년  2월 ~ 6월 : 보상완료(2구간)

□ 향후계획

○ 2022년  1월 ~ 2023년 12월 : 보상협의(3구간) 및 공사시행

10-2. 지방채 발행사업

우리 수성구에서 ‘20년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 수성구에서 ‘20년에 추진한 민간투자사업 없습니다.