109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 수성구에서 2021년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
황금2동 행정복지센터 신축	10,159	6,480	1,200	2,479	-	2022	2017	90
범어4동 행정복지센터 신축	7,258	4,663	1,115	1,480	-	2022	2018	90
두산동 행정복지센터 신축	10,430	4,250	1,166	4,481	533	2023	2019	85
파동 행정복지센터 신축	11,292	2,385	178	236	8,493	2024	2019	40
만촌2동 행정복지센터 신축	11,704	1,434	277	222	9,771	2024	2020	40
신매시장 주차환경 개선사업	18,449	528	435	5,000	12,486	2024	2019	40
수성아트피아 리모델링	9,927	1,110	100	7,200	1,517	2023	2019	30
수성빛예술제 개최	3,510	800	870	920	920	연례반복	2021	연례반복
고산서당 전통문화교육관 건립	11,622	-	22	3,910	7,690	2024	2021	15
두산레포츠센터조성	8,014	4,164	3,450	400	-	2023	2020 (당초 2018)	70
생활SOC 복합화사업 수성행복 드림센터 건립	37,203	3,933	5,321	8,131	19,818	2024	2022 (당초 2018)	55
제2구민운동장 건립	27,400	538	18,915	6,851	1,096	2024	2020 (당초 2017)	60
진밭골 생활체육시설 조성	7,200	942	28	339	5,891	2023	2017	50
스마트 관광도시 조성	7,100	-	100	7,000	-	2022	2021	62
고산노인복지관 증축	6,787	-	5,824	963	-	2022	2021	95
두산대권 종합사회복지관 건립	13,316	323	1,204	2,150	9,639	2023	2019	60
성동들 간이빗물펌프장 확장공사	2,520	30	1,093	1,397	-	2022	2021	100
고모마을~명복 공원 간 도로건설	7,800	1,400	1,572	880	3,948	2024	2017	45

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여

2021년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

황금2동 행정복지센터 신축

담당자

행정지원과 노경민(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후되고 협소한 황금2동 행정복지센터를 주거지역이 밀집한 동 중심지역으로       이전 및 주민 복리증진을 위한 동청사 신축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 5. ~ 2022. 12월

○ 위 치 : 수성구 황금동 689-4번지 일원

○ 규 모 : 지하 1층, 지상 4층/ 부지면적 886.1㎡, 연면적 2,462.84㎡

- 배치 : 지하주차장, 행정복지센터, 주민자치센터, 공공도서관, 회의실, 예비군동대 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,159백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,159	6,480	1,200	2,479	-
특별교부세	1,100	1,100	-	-	-
특별교부금	1,000	1,000	-	-
국 비	492	246	-	246
시 비	369	184	-	185	-
구 비	7,198	3,950	1,200	2,048	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2017.  5월 : 기본계획 수립

○ 2017.  8월 : 공유재산 심의회 의결

○ 2017.  9월 : 공유재산 관리계획 의회 의결(218회 임시회)

○ 2018.  8월 : 황금2동 행정복지센터 신축계획

○ 2018.  8월 : 공유재산 심의회 심의

○ 2018.  9월 : 공유재산 관리계획 변경안 의회 의결

○ 2018. 12월 : 부지매입

○ 2019.  3월 : 주민협력단 구성 및 설명회 개최

○ 2020.  7월 : 주민설명회 개최

○ 2020.  1월 ~ 2021. 5월 : 설계공모 및 실시설계

○ 2021.  6월 ~ 2022. 12월 : 공사 시행

□ 향후계획

○ 2022. 12월 : 신청사 이전

사업명

범어4동 행정복지센터 신축

담당자

행정지원과 노경민(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후되고 협소한 공간으로 주민 이용이 불편한 범어4동 동 청사 이전

○ 다양한 행정서비스 제공과 함께 문화 및 공간 공유가 가능한 행정복지센터        신축으로 행복공동체의 기반을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 8. ~ 2022. 12월

○ 위 치 : 수성구 범어동 100-8번지 일원

○ 규 모 : 지하1층, 지상5층 / 부지면적 474㎡, 연면적 1,214.53㎡

- 배치 : 지하주차장, 행정복지센터, 주민자치센터, 주민공유공간, 회의실, 예비군동대 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,258백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,258	4,663	1,115	1,480	-
특별교부세	1,000	1,000	-	-	-
특별교부금	1,000	1,000	-	-	-
구 비	5,258	2,663	1,115	1,480	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2018.  8월 : 기본계획 수립

○ 2018. 10월 : 공유재산 심의회 심의

○ 2018. 10월 : 공유재산 관리계획 의회 의결(226회 임시회)

○ 2019.  4월 : 부지매입

○ 2019. 5. ~ 6월 : 주민 협력단 구성 및 설명회 개최

○ 2020. 6. ~ 2021. 9월 : 설계공모 및 실시설계

○ 2021. 9. ~ 2022. 12월 : 공사시행

□ 향후계획

○ 2023. 1월 : 신청사 이전

사업명

두산동 행정복지센터 신축

담당자

행정지원과 노경민(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 행정서비스 제공과 함께 문화 및 공간 공유가 가능한 행정복지센터        신축으로 행복공동체의 기반을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4. ~ 2023. 2월

○ 위 치 : 수성구 두산동 71-6번지 일원

○ 규 모 : 지하 1층, 지상 4층/ 부지면적 798㎡, 연면적 2,110.05㎡

- 배치 : 지하주차장, 행정복지센터, 주민자치센터, 주민공유공간, 회의실, 예비군동대 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,430백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,430	4,250	1,166	4,481	533
특별교부금	1,300	1,300	-	-	-
구 비	9,130	2,950	1,166	4,481	533

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 2019.  4월 : 기본계획 수립

○ 2019.  9월 : 부지매입

○ 2019. 10월 : 주민협력단 구성 및 설명회 개최

○ 2019. 12월 : 공공건축가 설계공모 기획ㆍ운영 지원 용역 시행

○ 2020. 1. ~ 2021. 5월 : 설계공모 및 실시설계

○ 2021. 6. ~ 2023. 2월 : 공사시행

□ 향후계획

○ 2023. 3월 : 신청사 이전

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초투자심사예산 10,070백만원 / 최종변경예산 10,430백만원

○ 사업기간 : 당초(2019년~2022년), 변경(2019년~2023년)

사업명

파동 행정복지센터 신축

담당자

행정지원과 노경민(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 행정서비스 제공과 함께 문화 및 공간 공유가 가능한 행정복지센터        신축으로 행복공동체의 기반을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4. ~ 2024. 4월

○ 위 치 : 수성구 파동 191-25번지 일원

○ 규 모 : 지하 1층, 지상 4층/ 부지면적 961㎡, 연면적 2,199.85㎡

- 배치 : 지하주차장, 행정복지센터, 주민자치센터, 주민공유공간, 회의실, 예비군동대 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,292백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	11,292	2,385	178	236	8,493
구 비	11,292	2,385	178	236	8,493

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2018. 12월 : 수성구 중기지방재정계획 반영

○ 2019.  4월 : 파동 행정복지센터 신축 기본계획 수립

○ 2019.  5월 : 제2차 대구시 재정투자심사

○ 2019.  5월 : 공유재산 심의회 심의 및 공유재산 관리계획 의회 의결

○ 2020. 11월 : 공공건축가 활용 설계 지침서 작성 용역

○ 2021.  2. ~ 3월 : 공공건축 사업계획 사전검토 제출 및 의견서 통지

○ 2021.  6월 : 공공건축심의

○ 2021.  7월 ~ 2022. 12월 : 설계공모 및 실시설계

□ 향후계획

○ 2023. 1. ~ 2024. 4월 : 공사시행

○ 2024. 5월 : 신청사 이전

사업명

만촌2동 행정복지센터 신축

담당자

행정지원과 노경민(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 행정서비스 제공과 함께 문화 및 공간 공유가 가능한 행정복지센터        신축으로 행복공동체의 기반을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 9. ~ 2024. 4월

○ 위 치 : 수성구 만촌동 962-16번지 일원

○ 규 모 : 지하 1층, 지상 4층/ 부지면적 1,064.1㎡, 연면적 2,499.03㎡

- 배치 : 지하주차장, 행정복지센터, 주민자치센터, 주민공유공간, 회의실, 예비군동대 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,704백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	11,704	1,434	277	222	9,771
구 비	11,704	1,434	277	222	9,771

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2018.  8월 : 수성구 중기지방재정계획 반영

○ 2020.  3월 : 공유재산 관리계획 의회 의결

○ 2020.  9월 : 만촌2동 행정복지센터 신축 기본계획 수립

○ 2020. 10월 : 제2차 대구시 재정투자심사

○ 2021.  2월 : 공공건축가 활용 설계 지침서 작성 용역

○ 2021.  3. ~ 4월 : 공공건축 사업계획 사전검토 제출 및 의견서 통지

○ 2021.  5월 : 공공건축심의

○ 2021.  8. ~ 2022. 12월 : 설계공모 및 실시설계

□ 향후계획

○ 2023. 1. ~ 2024. 4월 : 공사시행

○ 2024. 5월 : 신청사 이전

사업명

신매시장 주차환경개선사업

담당자

일자리경제과 김경희(☎666-4313)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주차환경 개선을 통해 전통시장 이용객에게 편리한 구매환경을 제공하고 인근 주민의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2024년

○ 위 치 : 수성구 신매동 571번지

○ 규 모 : 지하2층(주차장), 주차면수 132면, 대지면적 3,705㎡·연면적 5,298㎡ 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,449백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	18,449	528	435	5,000	12,486
국 비	6,000	214	435	1,850	3,501
시 비	5,100	157	-	1,575	3,368
구 비	7,349	157	-	1,575	5,617

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2019. 12월 : 사업 부지 사용 동의(시 의회)

○ 2020.  5월 : 도시계획시설(주차장) 변경 결정

○ 2020.  8월 : 건설사업관리 용역 착수

○ 2021.  2월 : 설계용역 착수(설계공모)

○ 2021.  6. ~ 2022. 6월 : 설계에 따른 행정절차 이행

※ BF 예비인증, 설계경제성(VE) 검토, 설계안전성 검토, 건설기술심의, 일상감사, 계약심사, 조달청 계약의뢰 등

□ 향후계획

○ 2022. 11월 : 설계용역 완료

○ 2022. 12월 : 공사발주

○ 2028.  8월 : 공사준공

사업명

수성아트피아 리모델링

담당자

문화예술과 안경임(☎666-2162)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후시설 교체를 통한 시설개선으로 명품공연장 조성

○ 공연장을 찾는 관람객에게 다양한 편의시설 제공으로 만족도 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2020 ~ 2023년

○ 위치 : 수성구 무학로 180 수성아트피아

○ 내용 : (시설) 무대기계, 조명, 음향, 영상, 공조시스템, 용지홀단열공사

(건축) 용지, 무학, 알토홀, 분장실 리모델링 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,927백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,927	1,110	100	7,200	1,517
시 비	3,500	1,110	-	2,390	-
구 비	6,427	-	100	4,810	1,517

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 실시설계 : 2021. 5. ~ 11월

○ 일상감사, 계약심사, 공사계약 : 2021. 11. ~ 12월

□ 향후계획

○ 공사 시행 : 2022. 1월 ~

○ 리모델링 변경계획(3차) 수립 : 2022. 6월

○ 공사 준공, 시운전 및 재개관 : ~ 2023. 5월

사업명

수성빛예술제

담당자

문화예술과 안경임(☎666-2162)

□ 사업목적 및 필요성

○ 겨울철 관광 비수기에 조명을 이용한 볼거리 제공 및 참여형 빛콘텐츠를

활용한 즐길거리 제공을 통해 관광객 유치로 지역활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 12. 10. ~ 2022. 1. 8.

○ 위 치 : 수성못 일원

○ 규 모 : 5,000여명의 주민 참여 작품 전시 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,510백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,510	800	870	920	920
구 비	3,510	800	870	920	920

□ 추진상황

○ 제1회 수성빛예술제 개최 및 평가, 피드백 : 2019. 12. ~ 2020. 2월

○ 제2회 수성빛예술제 개최 및 평가, 피드백 : 2020. 12. ~ 2021. 2월

○ 제3회 수성빛예술제 개최 : 2021. 12. 10. ~ 2022. 1. 8.

□ 향후계획

○ 제3회 수성빛예술제 평가보고회 개최 : 2022. 1. 25.

○ 제4회 수성빛예술제 개최(예정) : 2022. 12. 9. ~ 2023. 1. 2.

□ 사업변경 내역(市 투자심사결과 통보 : 21. 11월)

○ 당초투자심사예산 : 537백만원 / 최종변경예산 : 1,000백만원

사업명

고산서당 전통문화교육관 건립

담당자

문화예술과 설희정(☎666-2174)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대구시 문화재 고산서당과 연계한 전통문화교육관 건립을 통해 유학적 방법을 통한 자기 정체성 확립 및 교육·체험공간 조성으로 주민들의 정신적 안식처 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2024년

○ 위 치 : 수성구 성동 163번지 일원(고산서당 주변)

○ 규 모 : 한옥 숙박시설, 교육관, 체험 전시장 등(※사업면적 :3,788㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,622백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	11,622	-	22	3,910	7,690
국 비	2,100	-	-	100	2,000
시 비	2,450	-	-	500	1,950
구 비	7,072	-	22	3,310	3,740

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2021. 3. ~ 8월 : 전통문화교육관 건립 기본계획 수립

○ 2021. 12월 : 군위 사유원 벤치마킹 및 수미창조포럼 개최 및 부지매입(1필지)

○ 2022. 7. ~ 9월 : 건축기획 사전검토 및 공공건축심의위원회 통과

○ 2022. 10. : 일상감사 및 계약심사, 건축설계공모 및 기본실시설계

□ 향후계획

○ 2023년 : 대구시 문화재위원회 안건 상정 및 공사 착공

○ 2024년 : 공사 준공

사업명

두산레포츠센터 조성

담당자

체육진흥과 김정수(☎666-2165)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활체육 동호인들의 수요를 충족하고 주민들에게 쾌적한 여가활동 공간을 제공하기 위한 생활체육시설인 두산레포츠센터 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2022년

○ 위 치 : 수성구 두산동 산 7-25 일원

○ 규 모 : 대지면적 6,675㎡(체육시설 6,162㎡, 진입도로 513㎡),

연 면 적 1,856㎡(지상1/지하1)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,014백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,014	4,164	3,450	400	-
국비(균특)	960	-	960	-	-
구 비	7,054	4,164	2,490	400	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ 2019.  5월 : 실시설계용역 착수

○ 2021.  1. ~  6월 : BF 예비인증 및 건축협의

○ 2021.  7. ~ 10월 : 일상감사 및 계약심사 완료

○ 2021. 10월 : 실시설계용역 완료

○ 2021. 11월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 11월 : BF본인증 신청

○ 2022. 11월 : 공사 준공

○ 2023.  3월 : BF본인증 완료

□ 사업변경 내역

○ (당초) 총사업비 8,000백만원

(변경) 총사업비 8,014백만원

사업명

생활SOC복합화사업 수성행복드림센터 건립

담당자

체육진흥과 이은지(☎666-2185)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일(WORK), 삶(LIVE), 운동(SPORT) 기반의 생활SOC 복합공간 조성으로 주민들의 다양한 여가 활동 및 문화생활 환경 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1 ~ 2024. 10월

○ 위 치 : 수성구 만촌동 851-1번지 외 8필지

○ 규 모 : 대지면적 3,585.3㎡, 연면적 7,319㎡(지하2/ 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 37,203백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	37,203	3,933	5,321	8,131	19,818
국비(기금)	6,000	1,800	1,800	2,400	-
국비(균특)	4,808	1,602	1,416	1,790	-
시 비	4,665	471	879	815	2,500
구 비	21,730	60	1,226	3,126	17,318

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 2020. 12월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2022.  7월 : 기본 및 실시설계 용역 완료

○ 2022.  9월 : 일상감사 및 계약심사 완료

○ 2022. 10월 : 조달청 계약의뢰

□ 향후계획

○ 2022. 11월 : 조달청 계약의뢰 완료 및 착공(착공일로부터 24개월)

○ 2024. 10월 : 준공

□ 사업변경 내역

○ (당초) 총사업비 22,770백만원, 2020. 1. ~ 2022. 12월

(변경) 총사업비 37,203백만원, 2020. 1. ~ 2024. 10월

사업명

제2구민운동장 건립

담당자

체육진흥과 박동진(☎666-2186)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민의 생활체육활동 욕구 충족 및 주민요구를 반영한 다양한 체육시설 조성으로 주민의 건강증진을 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 6 ~ 2024. 1월

○ 위 치 : 매호동 203번지 일원

○ 규 모 : 대지면적 48,237㎡(야구장 1면, 축구장 1면, 족구장 6면 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	27,400	538	18,915	6,851	1,096
특별교부세	600	-	600	-	-
국비(균특)	1,475		1,275	200	-
구 비	25,325	538	17,040	6,651	1,096

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2017. 6월 : 부지선정 및 타당성 용역 완료

○ 2020. 1월 : 도시관리계획결정 및 지형도면 작성 고시

○ 2022. 7월 : 실시설계용역 완료 및 공사 착공

□ 향후계획

○ 2024. 1월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 2020. 10월 : 총사업비 변경(14,900백만원 → 27,400백만원)

사업명

진밭골 생활체육시설 조성

담당자

체육진흥과 박동진(☎666-2186)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상화동산 체육시설 이전을 통한 공간 활용도 증대와 생활체육시설 확충에 대한 주민의 높은 수요를 반영한 맞춤형 생활체육시설 조성으로 주민 건강증진 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2023년

○ 위 치 : 수성구 범물동 919번지 일원

○ 규 모 : 7,336㎡(건축 810.26㎡)

- 배드민턴장 4면, 테니스장 2면, 주차장 8면 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,200	942	28	339	5,891
국 비	1,000	-	-	300	700
구 비	6,200	942	28	39	5,191

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2016. 10월 : 기본설계용역 완료

○ 2019.  7월 : 도시계획시설 지형도면 고시

○ 2021.  1월 : 토지수용 및 소유권 이전 완료

○ 2022.  9월 : 실시설계용역 완료

○ 2022. 10월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 11월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 4,500백만원 → 5,844백만원 → 7,200백만원

- 배드민턴장 위치 변경에 따른 옹벽 시공 및 개발제한구역 보전부담금 추가

사업명

스마트 관광도시 조성

담당자

관광과 배태철(☎666-4914)

관광과 황준철(☎666-4924)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관광요소와 기술요소의 융·복합을 통해 스마트관광 생태계를 구축하여 지역

관광활성화를 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 3. ~ 2022. 12월

○ 위 치 : 수성못 및 들안길 먹거리 타운 일대

○ 내 용 : 사업대상지 일대를 중심으로 스마트 관광 5대 요소 구현

(스마트경험, 스마트편의, 스마트서비스, 스마트이동, 스마트플랫폼)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,100	-	100	7,000	-
국 비	3,600	-	100	3,500	-
시 비	0	-	-	-	-
구 비	3,500	-	-	3,500	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 62%)

○ 2021. 3월 : 스마트 관광도시 조성사업 수성구 컨소시엄 구성

○ 2021. 4월 : 스마트 관광도시 조성 세부사업계획 수립을 위한 업무협약 체결

(대구광역시–수성구–한국관광공사)

○ 2021. 4. ~ 11월 : 스마트 관광도시 조성사업 세부사업계획 수립

○ 2021. 11월 : 스마트 관광도시 조성사업 추진 업무협약 체결(대구광역시–수성구–한국관광공사)

○ 2021. 12. ~ 2022. 6월 : 행안부 사전협의 및 국정원 보안성검토

○ 2022. 2. ~ 3월 : 원가계산용역 시행

○ 2022. 6월 : 사업관리를 위한 PMO 및 감리용역 계약

○ 2022. 8월 : 수성못 미디어아트 음악분수 조성용역 계약

○ 2022. 8월 : 컨소시엄사(4개사)와 업무협약 체결 및 사업착수

□ 향후계획

○ 2022. 12월 : 스마트 관광도시 구축

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 당초(2022. 5월), 변경(2022. 12월)

사업명

고산노인복지관 증축

담당자

복지정책과 최은희(☎666-2553)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신매동 고산노인복지관 별관 신축((주)Kt estate 기부채납, 사업비 30억 정도)에 대하여 도시유일성 확립과 복지관 이용수요의 지속적인 증가 상황을 고려하여 1개층을 추가 증축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 12. ~ 2022. 3.월

○ 위 치 : 대구광역시 수성구 욱수천로 99(신매동)

○ 규 모 : 부지면적 1,528㎡, 건축연면적 2,806㎡, 지하1층~지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,787백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,787	-	5,824	963	-
구 비	3,105	-	2,142	963	-
기 타	3,682	-	3,682	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2019. 12월 : KT 고산지사 도시계획시설 변경(방송통신시설 해제)심의 조건부가결에 따라 KT에서 노인복지관 기부채납 제안

○ 2020. 3. ~ 10월 : 복지관 기본설계 및 실시설계

○ 2021.  2월 : 건축허가(신축) 및 주민설명회

⇒ 주민설명회에서 제시된 의견을 바탕으로 사업규모 변경 추진(3층→4층)

○ 2021. 10월 : 건축주 변경((주)Kt estate ⇒ 수성구청)

○ 2022.  3월 : 1차 준공 및 개관식

※ 2차 공사: 본관~별관 연결다리 및 카페(휴게실) 조성 등(진도율 95%)

□ 향후계획

○ 2022. 11월 : 2차 공사 준공

사업명

두산대권 종합사회복지관 건립

담당자

복지정책과 김길동(☎666-2513)

□ 사업목적 및 필요성

○ 두산대권(수성동, 중·상·파동, 두산동) 지역에 종합사회복지관을 건립하고 다양한 복지서비스를 제공하여 생활권별 복지수요를 충족시키고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 8. ~ 2023. 6월

○ 위 치 : 수성구 상동 44번지(상동 소공원)

○ 규 모 : 지하1층/지상3층, 연면적 4,238.2㎥

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,316백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	13,316	323	1,204	2,150	9,639
특별교부세	500	304	196	-	-
특별교부금	1,000	-	1,000	-	-
구 비	11,816	19	8	2,150	9,639

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2016. 8월: 두산대권 종합사회복지관 건립 기본계획 수립

○ 2019. 7월: 도시계획위원회 도시계획시설변경 가결

○ 2020. 5월: 공공건축심의위원회

○ 2020. 9월: 설계공모

○ 2021. 12월: 실시설계용역 완료

○ 2022. 1월: 두산대권 종합사회복지관 건립공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 6월: 종합사회복지관 및 소공원 재조성 공사 준공

○ 2023. 7월: 복지관 개관

□ 사업변경 내역

○ (당초) 지상4층, 연면적 2,340㎥, 6,411백만원, 2016년~2018년

○ (현재) 지하1층/지상3층, 연면적 4,238.2㎥, 13,695백만원, 2016년~2023년

사업명

성동들 간이빗물펌프장 확장공사

담당자

건설과 김대연(☎666-2924)

□ 사업목적 및 필요성

○ 집중호우 시 인근 하천수위 상승으로 인한 성동 일원의 농경지 침수 피해를 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 9. ~ 2022. 7월

○ 위 치 : 수성구 성동 153-5번지 일원

○ 규 모 : 펌프 30㎥/분×2대, 7㎥/분×2대 설치, 흡입수조 V=1,300㎥,

펌프실(전통한옥양식) 건립, 조경 1식 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,520백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,520	30	1,093	1,397	-
구 비	2,520	30	1,093	1,397	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020. 10월 : 실시설계용역 착수

○ 2021.  5월 : 문화재 현상변경심의, 설계안전성 검토용역 착수

○ 2021.  7월 : 실시설계용역 완료

○ 2021.  9월 : 공사 계약 및  착공

○ 2022.  7월 : 공사 준공

□ 향후계획

○ 강우 시 펌프장 운영 및 침수 모니터링 실시

사업명

고모마을~명복공원간 도로건설

담당자

공원녹지과 김선영(☎666-2832)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개발제한구역 내 노폭이 협소(B=2~4m)한 구간에 도로를 건설하여 주변경작지영농 활동 원활 및 통행불편 민원을 해소하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2024. 12월

○ 위 치 : 수성구 고모동 562번지선 일원(고모마을~명복공원)

○ 규 모 : 도로건설 B=8m, L=1,518m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,800	1,400	1,572	880	3,948
국 비	5,925	1,200	872	300	3,553
시 비	500	-	500	-	-
구 비	1,375	200	200	580	395

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2016.  9월 : 개발제한구역 주민지원사업 결정

○ 2017.  2월 : 대구광역시 투자사업 심사 완료

○ 2017. 10. ~ 2019. 12월 : 도시계획시설(도로) 결정 및 실시설계용역

○ 2018. 12월 : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시

○ 2019.  6월 : 주민설명회 개최

○ 2019. 10. ~ 2022. 12월 : 보상협의(1~4구간, 55/61필지)

○ 2022.  7월 : 개발제한구역 관리계획 사전협의(국토교통부)

□ 향후계획

○ 2022. 12월 : 개발제한구역 관리계획 협의(국토교통부)

○ 2023.  1월 : 보상협의(5구간, 6/61필지) 및 국공유지 무상귀속 협의

○ 2024. 1. ~ 12월: 공사시행

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 당초(2017년~2022년), 변경(2017년~2024년)

10-2. 지방채 발행사업

우리 수성구에서 2021년에 추진한 지방채 발행 사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 수성구에서 2021년에 추진한 민간투자 사업은 없습니다.