109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 수성구에서 2022년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후
수성빛예술제	920 (연례반복)	-	920	920	920	연례반복	2021년	연례반복
수성못페스티벌	370 (연례반복)	-	370	440	440	연례반복	2022년	연례반복
고모령 가요제	130 (연례반복)	-	130	130	130	연례반복	2022년	연례반복
수성못 야외무대 상설 공연	100 (연례반복)	-	100	100	100	연례반복	2022년	연례반복
수성못뮤지컬 프린지	110 (연례반복)	-	110	110	110	연례반복	2022년	연례반복
수성아트피아 리모델링	11,727	1,210	3,581	6,936	-	2023년	2022년	60%
스마트 관광도시조성	7,000	-	5,067	1,933	-	2023년	2021년	100%
고산서당 전통문화교육관 건립	11,844	667	4,777	2,975	3,425	2024년	2021년	30%
진밭골 생활체육시설조성	7,200	993	2,111	4,096	-	2023년	2017년	65%
파동 행정복지센터 신축	12,807	2,799	31	6,989	2,988	2024년	2019년	50%
만촌2동 행정복지센터 신축	14,331	1,724	-	8,468	4,139	2025년	2019년	40%
망월지 주변 부지매입	10,700	-	6,700	1,700	2,300	2025년	2022년	60%
수성미래교육관 건립	2,950	1,905	45	1,000	-	2023년	2022년	85%
지산종합사회 복지관 개축	6,400	-	4,200	-	2,200	2025년	2021년	10%
함장종합사회 복지관건립	13,725	9,623	3,186	916	-	2023년	2019년	96%
신매시장 주차환경개선사업	18,449	6,800	4,600	6,449	600	2024년	2019년	60%
고모마을~명복공원 도로건설	7,800	2,972	612	2,778	1,438	2024년	2017년	60%
성동들 간이빗물펌프장 확장공사	2,520	1,123	1,397	-	-	2022년	2021년	100%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2022년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘22년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

수성빛예술제

담당자

문화관광과 구혜련(☎666-2163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 겨울철 관광 비수기에 조명을 이용한 볼거리 제공 및 참여형 빛 콘텐츠를

활용한 즐길거리 제공을 통해 관광객 유치로 지역활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 12. 9. ~ 2023. 1. 2.

○ 위 치 : 수성못 일원

○ 규 모 : 4,000여명의 주민 참여 작품 전시 및 관람객 9만명 이상

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 920백만원(연례반복)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	920 (연례반복)	-	920	920	920
구 비	920	-	920	920	920

□ 추진상황

○ 제1회 수성빛예술제 개최 및 평가, 피드백 : 2019. 12. ~ 2020. 2월

○ 제2회 수성빛예술제 개최 및 평가, 피드백 : 2020. 12. ~ 2021. 2월

○ 제3회 수성빛예술제 개최 및 평가, 피드백 : 2021. 12. 10. ~ 2022. 1. 8.

○ 제4회 수성빛예술제 개최 및 평가, 피드백 : 2022. 12. 9. ~ 2023. 1. 2.

□ 향후계획

○ 제5회 수성빛예술제 개최(예정) : 2023. 12.

사업명

수성못페스티벌

담당자

문화관광과 구혜련(☎666-2163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 문화예술 진흥 및 주민화합의 장 마련

○ 수려한 자연경관을 갖춘 시민의 쉼터인 수성못을 관광명소화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 9. 23. ~ 9. 25.

○ 위 치 : 수성못 상화동산, 들안길, 울루루문화광장

○ 규 모 : 관람객 187,000명 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 370백만원(연례반복)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	370 (연례반복)	-	370	440	440
시 비	20	-	20	10	10
구 비	350	-	350	430	430

□ 추진상황

○ 수성못 페스티벌 세부계획 수립 : 2022. 4월

○ 2022 수성못 페스티벌 개최 : 2022. 9. 23. ~ 9. 25.

○ 축제평가보고회 개최 : 2022. 11월

□ 향후계획

○ 2023 수성못페스티벌 개최 : 2023. 9. 22. ~ 9. 24.

사업명

고모령 가요제

담당자

문화관광과 정효심(☎666-2173)

□ 사업목적 및 필요성

○ 『비 내리는 고모령』 콘텐츠의 특성에 맞추어 품격높은 전국 규모의 가요제로 발전        시키고자 하는 사업

○ 대중가요 신인 발굴 및 아마추어 예술인들의 참여 기회를 제공하여 우수한               음악인을 발굴하고 생활속 예술 축제의 정착

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 9. 3. 19:00 ~ 21:30

○ 위 치 : 대구스타디움 서편광장

○ 규 모 : 관람인원 1,500여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  130백만원(연례반복)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	130 (연례반복)	-	130	130	130
시 비	36	-	36	36	36
구 비	94	-	94	94	94

□ 추진상황

○ 2022. 1월 : 보조사업자 공모 실시 및 선정

○ 2022. 6월 : 사업보조금 교부

○ 2022. 6 ~ 7월 : 행사 관련 협의 및 준비

○ 2022. 9월 : 행사 개최

○ 2022. 11월 : 정산 보고

□ 향후계획

○ 공모 실시 및 사업자 선정 후 사업 시행(연례반복 사업)

사업명

수성못 야외무대 상설 공연

담당자

문화관광과 이주영(☎666-2172)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대구 대표 호수공원인 수성못에서 야간상설공연을 통해 구민과 관광객들에게       다양하고 수준 높은 공연문화 향유 기회 제공

○ 다양한 장르의 공연을 실행하여 지역예술인의 참여기회를 제공하고 상설공연화       함으로써 수성못을 지역 관광 랜드마크로 홍보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 7 ~ 10.

○ 위 치 : 수성못 야외무대(수상무대, 울루루문화광장)

○ 규 모 : 참석인원 1,500여 명(10회 공연)

○ 내 용 : 다양한 장르의 특화된 상설공연 10회 이상 실시

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  100백만원(연례반복)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	100 (연례반복)	-	100	100	100
시 비	20	-	20	20	20
구 비	80	-	80	80	80

□ 추진상황

○ 2022. 4 ~ 5월 : 보조사업자 공모 실시 및 선정

○ 2022. 6월 : 보조금 교부

○ 2022. 6월 : 행사 관련 협의 및 준비

○ 2022. 7 ~ 10월 : 행사 개최

○ 2022. 11월 : 정산 보고

□ 향후계획

○ 공모 실시 및 사업자 선정 후 사업 시행(연례반복 사업)

사업명

수성못뮤지컬프린지

담당자

문화관광과 박효근(☎666-2176)

□ 사업목적 및 필요성

○ 뮤지컬 프린지 페스티벌을 통해 지역 공연 문화를 더욱 활성화시키고 주민들에게 양질의 문화 향유 기회 제공

○ 수성못에 참여형, 소형 문화 공연들을 비롯한 타 지역과 차별화된 콘텐츠를 기획함으로써 수성구 문화산업 발전에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 5. 25.(수) ~ 5. 28.(토)

○ 위 치 : 수성못 야외무대(수상무대, 상화동산 등)

○ 규 모 : 수성못 일대 뮤지컬 공연 3일간(누적관람객 2만명 정도)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  110백만원(연례반복)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	110 (연례반복)	-	110	110	110
구 비	110	-	110	110	110

□ 추진상황

○ 2022. 2월 : 보조사업자 공모 실시 및 선정

○ 2022. 3월 : 사업보조금 교부

○ 2022. 4 ~ 5월 : 행사 관련 협의 및 준비

○ 2022. 5월 : 행사 개최

○ 2022. 8월 : 정산 보고

□ 향후계획

○ 공모 실시 및 사업자 선정 후 사업 시행(연례반복 사업)

사업명

수성아트피아 리모델링

담당자

문화관광과 박소정(☎666-2162)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후시설 교체를 통한 시설개선으로 명품공연장 조성

○ 공연장을 찾는 관람객에게 다양한 편의시설 제공으로 만족도 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2019 ~ 2023년

○ 위치 : 수성구 무학로 180 수성아트피아

○ 내용 : (시설) 무대기계, 조명, 음향, 영상, 공조시스템, 용지홀단열공사

(건축) 용지, 무학, 알토홀, 분장실 리모델링 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,727백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	11,727	1,210	3,581	6,936	-
시 비	3,500	1,110	1,105	1,285	-
구 비	6,827	100	1,322	5,405	-
특별교부세	400	-	160	240	-
특별교부금	1,000	-	994	6	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2019. 9월 : 수성아트피아 리모델링 기본계획 수립용역 시행

○ 2020. 3. ~ 5월 : 사업계획 사전검토(국가공공건축지원센터)

○ 2020. 7. ~ 11월 : 공공건축심의위원회 심의, 일상감사 및 계약심사

○ 2020. 12. ~ 2021. 12월 : 설계공모 및 실시설계, 공사계약

○ 2022. 1월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 3월 / 4. ~ 5월 : 공사 준공 / 시운전 및 재개관

사업명

스마트 관광도시 조성

담당자

문화관광과 황준철(☎666-4924)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관광요소와 ICT기술요소의 융복합을 통해 스마트관광 생태계 기반(스마트경험, 스마트편의, 스마트서비스, 스마트모빌리티, 스마트플랫폼) 마련으로 지역관광 활성화 및 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 3. ~ 2023. 5.

○ 위 치 : 수성못 및 들안길 일대

○ 규 모 : 스마트관광 서비스 및 데이터플랫폼 구축

스마트관광 인프라 및 콘텐츠 구축

- 공공와이파이, 도심순환형 관광버스, 미디어아트 음악분수, 가상미술관 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,000	0	5,067	1,933	0
국 비	3,500	0	3,122	378	0
구 비	3,500	0	1,945	1,555	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020. 12월 : 스마트관광도시 조성사업 공모

○ 2021. 11월 : 스마트관광도시 조성사업 추진 업무협약(대구시-수성구-한국관광공사)

○ 2023. 1월 ~ 6월 : 수성투어버스 구축 완료 및 시범운영

○ 2023. 3월 : 수성못 미디어아트 음악분수 조성완료

○ 2023. 4월 : 서비스/데이터 플랫폼 대시민 오픈

○ 2023. 3월 ~ 4월 :스마트관광도시 조성 홍보마케팅 및 선포식

□ 사업변경 내역

○ 전체 사업기한 변경 : (당초) 2022년 5월 ⇒ (변경) 2023년 5월

∵ 정보화사업 필수 행정절차(보안성검토) 지연 및 해외 부품·장비 수급 지연

사업명

고산서당 전통문화교육관 건립

담당자

문화관광과 설희정(☎666-2174)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대구시 문화재 고산서당과 연계한 전통문화교육관 건립을 통해 유학적 방법을            통한 자기 정체성 확립 및 교육·체험공간 조성으로 주민들의 정신적 안식처 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2024

○ 위 치 : 수성구 성동 163번지 일원(고산서당 주변)

○ 규 모 : 한옥시설, 교육관, 체험 전시장 등(※사업면적 :4,124㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,844백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	11,844	667	4,777	2,975	3,425
국 비	2,100	-	100	1,000	1,000
시 비	2,450	-	500	975	975
구 비	7,294	667	4,177	1,000	1,450

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2021. 3. ~ 8. : 전통문화교육관 건립 기본계획 수립

○ 2021. 12. : 군위 사유원 벤치마킹 및 수미창조포럼 개최 및 부지매입(1필지)

○ 2022. 7. ~ 9. : 건축기획 사전검토 및 공공건축심의위원회 통과

○ 2022. 10. : 일상감사 및 계약심사, 건축설계공모 및 기본실시설계

○ 2023. 1. : 실시설계 용역 착수

○ 2023. 6. : 대구시 문화재위원회 심의 조건부 통과

□ 향후계획

○ 2023. 12 : 실시설계 완료 및 착공

○ 2024. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 토지매입비 감정평가비(당초 46억 → 47.55억) 상향으로 매입비 증가

○ 전통문화교육관 콘텐츠 개발용역(67백만원) 시행

사업명

진밭골 생활체육시설 조성

담당자

체육진흥과 박종근(☎666-2186)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성못 상화동산 체육시설에 대한 이전 요구와 생활체육시설 확충에 대한 주민의 높은 수요를 반영한 생활체육시설 설치로 주민의 건강증진과 맞춤형 체육행정 구현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 8월~ 2023. 11월

○ 위 치 : 대구광역시 수성구 범물동 919번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 7,336㎡, 실내배드민턴장 4면, 실외테니스장 2면 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,200	993	2,111	4,096	-
국 비	1,000	-	1,000	-	-
구 비	5,500	993	411	4,096	-
특별교부세	700	-	700	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 2016. 10월: 기본설계 용역완료

○ 2017.  5월: 중기지방 재정계획 및 지방재정 투자심사

○ 2020. 11월: 제5차 지방토지수용위원회 심의위원회 개최 및 재결결정

○ 2021.  1월: 토지수용(보상금 공탁) 완료 (소유권 이전)

○ 2022.  6월: 소규모 환경영향평가 완료

○ 2022.  9월: 실시설계용역 완료

○ 2022. 10월: 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 11월: 공사 준공

사업명

파동 행정복지센터 신축

담당자

행정지원과 함순식(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 행정서비스 제공과 함께 문화 및 공간 공유가 가능한 행정복지센터  신축으로 행복공동체의 기반을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4월 ~ 2024. 8월

○ 위 치 : 파동 191-25번지 일원

○ 규 모 : 지하 1층, 지상 4층/ 부지면적 961㎡, 연면적 2,290.8㎡

- 배치 : 지하주차장, 행정복지센터, 주민자치센터, 주민공유공간, 회의실, 예비군동대 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  12,807백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,807	2,799	31	6,989	2,988
구 비	10,607	2,799	31	4,789	2,988
특별교부세	800	-	-	800	-
특별교부금	1,400	-	-	1,400	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2020. 3월 : 부지매입 완료

○ 2020. 11월 : 설계공모 기획·운영 지원 용역

○ 2021. 2월 : 국가공공건축지원센터 사업계획 사전검토

○ 2021. 5월 : 공공건축심의

○ 2021. 7월 ~ 2022. 12월 : 설계공모 및 실시설계

○ 2023. 6월 : 공사시행

□ 향후계획

○ 2024. 8월 : 신청사 이전

사업명

만촌2동 행정복지센터 신축

담당자

행정지원과 함순식(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 행정서비스 제공과 함께 문화 및 공간 공유가 가능한 행정복지센터  신축으로 행복공동체의 기반을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 9월 ~ 2025. 3월

○ 위 치 : 만촌동 962-16번지 일원

○ 규 모 : 지하 1층, 지상 4층/ 부지면적 1,064.1㎡, 연면적 2,919.27㎡

- 배치 : 지하주차장, 행정복지센터, 주민자치센터, 주민공유공간, 회의실, 예비군동대 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  14,331백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	14,331	1,724	-	8,468	4,139
구 비	11,431	1,724	-	5,568	4,139
특별교부세	1,400	-	-	1,400	-
특별교부금	1,500	-	-	1,500	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2020. 10월 : 부지확보 및 대구시 투자심사 승인

○ 2021. 1월 : 공공건축자문단 활용 설계 지침서 작성 용역

○ 2021. 3월 : 국가공공건축지원센터 사업계획 사전검토

○ 2021. 5월 : 공공건축 심의

○ 2021. 8월 ~ 2023. 5월 : 설계공모 및 실시설계

□ 향후계획

○ 2023. 10월 : 공사시행

○ 2025. 3월 : 신청사 이전

사업명

망월지 주변 부지매입

담당자

녹색환경과 안태은(☎666-2648)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대구광역시 수성구 욱수동 망월지 일대는 두꺼비 집단 산란·서식지로 생태적 가치가

매우 높은 지역이나, 대부분이 사유지인 특성상 토지소유자들의 개발요구 등으로

생태환경 보존을 이어가기 어려운 상황에 직면함

* 22. 4. 토지소유자들의 개발요구에 따른 망월지 수문개방으로 두꺼비 올챙이 집단폐사 발생

○ 망월지 일대 부지 확보를 통하여 망월지 생태환경 장기보존 대책을 마련하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 8월 ~ 2024. 12월

○ 위 치 : 대구광역시 수성구 욱수동 410번지 등

○ 규 모 : 총 17필지, 부지면적 9,519㎡ 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  10,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,700	-	6,700	1,700	2,300
구 비	10,700	-	6,700	1,700	2,300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 전체 필지 중 ’22년 매입예정부지 매입 완료

○ 잔여부지 매입을 위한 ’23년 예산 편성

□ 향후계획

○ 잔여부지 매입 및 망월지 생태환경 보존사업 추진

※ 생태환경 보전사업 국고보조사업 추진에 따른 투자심사 완료(시의뢰, 2023. 3.)

□ 사업변경 내역

○ (당초) 망월지 주변부지 매입 : 망월지 생태환경 보존을 위한 부지매입

- 총 17필지, 9,519㎡, 총 10,700백만원

○ (변경) 망월지 생태환경 보존사업 : 망월지 주변부지 매입 후 국고보조사업과 연계하여

생태환경 보존사업 추진 (도시생태축 복원사업, 생물자원보전시설 설치사업)

- (생태축 복원) 총 16필지, 7,134㎡, 총 10,500백만원 (국 2,100, 구 8,400)

- (생물자원보전시설) 총 10필지, 3,298㎡, 총 11,000백만원 (국 3,500, 구 7,500)

사업명

수성미래교육관 건립

담당자

정책추진단 차준영(☎666-2255)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대구스타디움을 방문하는 이용객에게 산책 및 휴식의 공간 뿐 아니라 다양한 볼거리, 즐길거리 제공으로 스타디움 방문객 증가 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년

○ 위 치 : 대구스타디움 서편광장(대흥동 504번지 일원)

○ 규 모 : 지상3층, 높이 19m, 건축면적 253㎡, 연면적 647㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,950백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,950	1,905	45	1,000	-
구 비	2,100	1,055	45	1,000	-
특별교부금	850	850	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 2020.  5월 : 대구스타디움 서편 광장 미래교육관 조성 협의(市-區)

○ 2021.  5월 ~ 8월 : 기본설계 및 건축협의

○ 2021. 11월 : 대구시 대구체육공원 조성계획 변경 방침

○ 2021. 11월 ~ 2022. 2월: 대구체육공원 조성계획 변경 및 고시

○ 2022.  2월 : 수성구청장-대구시장 영구시설물 축조 합의

○ 2022.  3월 ~ 4월: 市의회 영구시설 축조동의, 공유재산심의회 무상사용

○ 2022.  4월 ~ 12월: 실시설계

○ 2022. 12월 : 건축허가 완료

○ 2023.  1월 ~ 2023. 10월: 건립공사 시행

□ 향후계획

○ 2023. 하반기: 프로그램 운영(미래교육재단)

사업명

지산종합사회복지관 개축

담당자

복지정책과 김길동(☎666-2513)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지산종합사회복지관 철거 후 신축으로 시설 이용의 불편을 해소하고

이용만족도를 증진시켜 종합사회복지관 이용률 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 5. ~ 2025. 7.

○ 위 치 : 지산5단지 영구임대아파트 內【수성구 용학로 325(지산동)】

○ 규 모 : 지하1층/지상3층, 연면적 2,255㎡ 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,400	-	4,200	-	2,200
시 비	1,800	-	1,800	-	-
구 비	2,800	-	2,400	-	400
기 타	1,800	-	-	-	1,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 5.  대구시 복지정책과 회의(철거 후 신축안 의견수렴)

○ 2021. 5.  사업비 부담, 대구도시공사 건립주체 확정

○ 2022. 5.  수성구청 ~ 대구도시개발공사 종합계약협정 체결

○ 2022. 10. ~ 2023. 2. (대구도시개발공사) 발주계획 수립, 설계공모

○ 2023. 2.  (대구도시개발공사) 기본설계 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2023. 12.  (대구도시개발공사) 기본설계 및 실시설계용역 완료

○ 2024. 4. ~ 2025. 7. (대구도시개발공사) 공사 착공 및 준공

사업명

함장종합사회복지관 건립

담당자

복지정책과 김길동(☎666-2513)

□ 사업목적 및 필요성

○ 두산대권(수성동, 중동, 상동, 파동, 두산동) 지역에 종합사회복지관을 건립하고 다양한 복지서비스를 제공하여 생활권별 복지수요를 충족하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 8. ~ 2023. 8.

○ 위 치 : 수성구 들안로19길 48(상동)

○ 규 모 : 지하1층/지상3층, 대지 2,000㎡, 연면적 4,238.2㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,725백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	13,725	9,623	3,186	916	-
구 비	12,225	8,123	3,186	916	-
특별교부세	500	500	-	-	-
특별교부금	1,000	1,000	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 96%)

○ 2016. 8월 : 함장 종합사회복지관 건립 기본계획 수립

○ 2019. 7월 : 도시계획위원회 도시계획시설변경 가결

○ 2020. 5월 : 공공건축심의위원회

○ 2020. 9월 : 설계공모

○ 2021. 12월 : 실시설계용역 완료

○ 2022. 1월 ~ 2023. 7월 : 함장 종합사회복지관 건립공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 8월: 함장종합사회복지관 임시 개관

□ 사업변경 내역

○ (당초) 지상4층, 연면적 2,340㎥, 6,411백만원, 2016년~2018년

○ (현재) 지하1층/지상3층, 연면적 4,238.2㎥, 13,725백만원, 2016년~2023년

사업명

신매시장 주차환경개선사업

담당자

일자리경제과 박다솔(☎666-4313)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주차환경 개선을 통해 전통시장 이용객에게 편리한 구매환경을 제공하고 인근 주민의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2024년

○ 위 치 : 수성구 신매동 571번지

○ 규 모 : 지하2층(주차장), 주차면수 132면, 대지면적 3,705㎡·연면적 5,298㎡ 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,449백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	18,449	6,800	4,600	6,449	600
국 비	6,000	3,500	-	2,500	-
시 비	6,600	2,800	-	3,800	-
구 비	5,849	500	4,600	149	600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2019. 12월 : 사업 부지 사용 동의(시 의회)

○ 2020.  5월 : 도시계획시설(주차장) 변경 결정

○ 2020.  8월 : 건설사업관리 용역(CM) 착수

○ 2021.  2월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2021. 10월 : 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 심의

○ 2021. 11월 ~ 12월 : 市 설계경제성(VE) 검토

○ 2021. 12월 ~ 2022.  1월 : 국토안전관리원 설계안전성 검토

○ 2022.  2월 ~ 3월 : 市 건설기술심의

○ 2022.  5월 ~ 6월 : 區 일상감사

○ 2022.  7월 ~ 9월 : 市 계약심사

○ 2022.  9월 : 조달청 계약의뢰

○ 2022. 11월 : 조달청 공사발주

○ 2022. 12월 : 공사계약

○ 2023.  1월 : 공사착공

○ 2023.  2월 : 수목이식 및 방음펜스 설치

○ 2023.  3월 ~ 현재 : 토공사 진행

□ 향후계획

○ 2024.  8월 : 공사준공

사업명

고모마을~명복공원간 도로건설

담당자

공원녹지과 성민규(☎666-2832)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개발제한구역 내 노폭이 협소(B=2~4m)한 구간에 도로를 건설하여 주변경작지 영농 활동 원활 및 통행불편 민원을 해소하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2024. 12월

○ 위 치 : 수성구 고모동 562번지선 일원(고모마을~명복공원)

○ 규 모 : 도로건설 B=8m, L=1,518m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	7,800	2,972	612	2,778	1,438
국 비	6,198	2,072	332	2,500	1,294
구 비	1,102	400	280	278	144
특별교부금	500	500	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2016.  9월 : 개발제한구역 주민지원사업 결정

○ 2017.  2월 : 대구광역시 투자사업 심사 완료

○ 2017. 10. ~ 2019. 12월 : 도시계획시설(도로) 결정 및 실시설계용역

○ 2018. 12월 : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시

○ 2019.  6월 : 주민설명회 개최

○ 2019. 10. ~ 2022. 12월 : 보상협의(1~4구간, 55/61필지)

○ 2022.  7월 : 개발제한구역 관리계획 사전협의(국토교통부)

○ 2023.  1월 : 보상협의(5구간, 6/61필지, 사유지) 및 국공유지 무상귀속 협의

○ 2023.  6월 : GB관리계획(국토교통부), 교통심의(경찰청) 협의, 소규모재해

영향평가 착수

□ 향후계획

○ 2023. 7월 : 소규모재해영향평가, 일상감사 및 계약심사

○ 2023. 8. ~ 2024. 8월 : 1차공사 시행

□ 사업변경 내역

○ 보상․지적문제에 따라 차수별 발주

사업명

성동들 간이빗물펌프장 확장공사

담당자

건설과 신정민(☎666-2924)

□ 사업목적 및 필요성

○ 집중호우 시 인근 하천수위 상승으로 인한 성동·매호동 일원의 농경지 침수 피해 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 10월 ~ 2022. 7월

○ 위 치 : 수성구 성동 153-5번지 일원

○ 규 모 : 펌프 30㎥/분×2대, 7㎥/분×2대 설치, 흡입수조 V=1,300㎥,

펌프실(전통한옥양식) 건립, 조경 1식 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,520백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,520	1,123	1,397	-	-
구 비	2,520	1,123	1,397	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020. 10월 : 실시설계용역 착수

○ 2021.  5월 : 문화재 현상변경심의, 설계안전성 검토용역 착수

○ 2021.  7월 : 실시설계용역 완료

○ 2021.  9월 : 공사 계약 및 착공

○ 2022.  7월 : 공사 준공

□ 향후계획

○강우 시 펌프장 운영 및 침수 모니터링 실시

10-2. 지방채 발행사업

우리 수성구에서 2022년에 추진한 지방채 발행 사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 수성구에서 2022년에 추진한 민간투자 사업은 없습니다.