9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 구에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
수성구 국민체육센터 건립	11,146	1,832	7,623	1,691	2016년	2014년	51
한방 휴 사업	1,322	582	695	-	2015년	2013년	100
수경지역 전통문화, 건강체험 지원 연계 주민	1,625	-	271	1,354	2017년	2015년	17
생활자원 회수센터 건립	8,560	222	700	7,638	2017년	2014년	10.77
수성명품 단독주택지 조성사업	4,140	-	216	3,924	2017년	2013년	51
신매동 공영주차장 조성사업	2,517	2,358	159	-	2015년	2013년	100
두산동 수성못동편 도로건설	2,050	-	-	2,050	2018년	2015년	10
고산2동 대흥마을 진입도로 건설	3,100	-	1,520	1,580	2017년	2015년	15
개발제한구역 훼손지 복구사업	16,500	-	5,000	11,500	2017년	2015년	35
고산 보건복지센터 신축	6,099	3,593	2,506	-	2015년	2016년	100

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

수성국민체육센터 건립

담당자

문화체육과 송종섭(☎666-2182)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다목적 체육관을 건립하여 지역 주민들에게 쾌적한 운동 환경을 제공

□ 사업개요

○ 기    간 : 2011. 4 ~ 2016. 6월

○ 위    치 : 범어동 산 176-1번지 일원(범어공원내)

○ 사업규모 : 부지 10,851㎡, 건축연면적 3,394㎡(지하1층, 지상2층)

○ 사업내용 : 다목적체육관, 헬스장, 체력측정실, 다목적체육강좌실, 사무실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,146백만원(국비 3,100, 특교세 500, 특교금 2,500, 구비 5,046)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	11,146	657	1,175	2,497	6,817
국비(기금)	3,100	366		2,422	312
구 비	5,046	291	1,175	2	3,578
특별교부세	500				500
특별교부금	2,500			73	2,427

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  51%)

○ 기본계획 수립 : 2011. 4월

○ 생활체육시설 지원사업 공모·선정 : 2012. 1월(체육진흥기금 31억원 확보)

○ 실시설계완료 : 2013. 12월

○ 토지 수용재결(지토위,중토위) : 2013. 11월 ~ 2014. 8월

○ 일상감사 및 계약심사(市) : 2014. 8월

○ 공사 착공 : 2014. 10월

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2016. 6월(예정)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 지방채 발행 : 당초 2,600백만원 → 변경 0백만원

사업명

한방 휴 사업

담당자

관광과 정종훈(☎666-3241)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대구광역시 수성구, 달성군과 경상북도 청도군의 우수한 한방의료-휴양-문화체험       등을 연계한 국내외 관광객 유치를 통해 매출증대, 일자리 창출로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013.7.1.~2015.12.31.

○ 내 용 : 구ㆍ군내 국축된 연계협력을 통해 도-농 연계 특화된 MRC

(Medical - Recreation - Culture)산업 육성

○ MRC 자원 간 특화된 프로그램 개발 및 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,322백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	1,277	582	695
국 비	1,148	518	630
시 도 비
시군구비	129	64	65
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ MRC자원 연계를 통한 공동 프로그램 운영으로 국내외 관광객 유치

○ 한방 휴 하우징 사업을 통해 환경개선 공사 시행

○ 한방 스프레이 등 체험 프로그램 운영에 필요한 상품개발

○ MRC 연계 프로그램 국내ㆍ외 홍보 추진

사업명

수경지역 전통문화, 건강체험 자원 연계 주민HI-UP프로젝트

담당자

관광과 임보건(☎666-4193)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공동 생활권 지역인 수성구와 경산시의 강점 자원 간 연계로 국내외 관광객을

유치함으로써 예산 절감은 물론 일자리 창출 등 지역경제 활성화와

○ 생활권 주민 대상 전통문화·건강 체험프로그램 시혜 확대로 주민의

건강증진 및 문화수준 향상에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : ’15. 7. 1.~’17. 12. 31.

○ 주 체 : 주관 - 대구 수성구 / 참여 - 경북 경산시, 대구한의대

○ 내 용 : 주민행복사업단 운영, 전통문화·건강체험 기반조성

전통문화·건강체험프로그램 개발 및 운영,

전통문화·건강체험 프로그램 마케팅

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,625백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	1,625	-	271	1,013	341
국 비	1,300	-	216.8	810.4	272.8
시 도 비	97.6	-	16.3	60.8	20.5
시군구비	227.4	-	37.9	141.8	47.7
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1차년도 16% 진행)

○ 수경(壽慶)지역 공동 주민행복사업단 구성 및 사무국 운영

○ 전통문화체험장 1개소 지정 운영, 인력양성 교육 등 5건의 프로그램 운영

○ 체험장·공연장 및 지역축제 연계프로그램 등 7건의 프로그램 운영

○ 국내외 관광객 유치 박람회·설명회 개최 등 7건의 프로그램 운영

□ 향후계획

○ 주니어 글로벌 홍보단 양성, 수성못 다이빙쇼 개최

○ 전통문화건강체험장 조성, 트레킹 코스 개발·보수 등

사업명

수성구 생활자원회수센터 설치

담당자

자원순환과 배주호(☎666-2721)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가정 등에서 분리 배출한 재활용가능자원의 효율적이고 원활한 선별을 통해

폐기물발생을 억제하고 자원을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경보전과

지역경제 발전에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 4월~ 2017.12월

○ 위 치 : 대구광역시 수성구 범물동 105-7번지

○ 규 모 : 부지 5,776㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,560백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	8,560	222	700	2,435	5,203
국 비	2,100	-	210	735	1,155
시 도 비	2,450	-	245	850	1,355
시군구비	4,010	222	245	850	2,693
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10.77%)

○ 2014년 까지 : 부지교환 매입 - 200백만원, 개발제한구역관리계획변경용역 - 22백만원

○ 2015년 : 선별장 건립을 위한 도시계획시설결정, 기본 및 실시설계, 위탁수수료 등 - 700백만원

□ 향후계획

○ 실시계획 인가 고시 (2016. 7월)

○ 건설공사 발주 및 계약 체결(2016. 8월 ~ 9월)

○ 건설공사 준공 및 인계인수 ( 2017. 12월)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

수성명품 단독주택지 조성사업

담당자

도시디자인과 신미진(☎666-3272)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 저층주택지에 주차·방범·소공원 등 편의시설이 잘 갖춰진

공동주택의 장점을 접목하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~2017년

○ 위 치 : 범어2동(3개소), 만촌2동(1개소)

○ 규 모 : 수성구 국채보상로186길 45외 412필지

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,140백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,140	-	216	1,548	2,376
국 비	2,070	-	108	774	1,188
시 도 비	1,035	-	54	387	594
시군구비	1,035	-	54	387	594
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  51 %)

○ 2015년도 대상 사업지 기본 및 실시설계 완료

○ 2015년도 대상 사업지 하드웨어사업 추진

○ 주민역량강화사업 실시

□ 향후계획

○ 2016년도 대상사업지 기본 및 실시설계 시행

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

- 당 초 : 4,000백만원

- 변 경 : 4,140백만원

※ 국비 인센티브(70백만원) 따른 사업비 변경

사업명

신매동 공영주차장 조성

담당자

교통과 홍재진(☎666-3041)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고산권 주차난 해소 및 이면도로 교통소통 원활

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 5. ~ 2015. 11.

○ 위 치 : 대구광역시 수성구 신매동 170-1 외 2필지

○ 규 모 : 1,576㎡, 49면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,517백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,517	2,358	159
국 비
시 도 비	252	236	16
시군구비	2,265	2,122	143
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 감정평가 및 부지매입 : 2013. 6.

○ 실시설계 용역 : 2014. 2. ~ 2014. 8.

○ 공사시행 : 2014. 10. ~ 2015. 11.

사업명

두산동 수성못 동편 도로건설

담당자

건설과 김건식(☎666-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ ㈜호텔수성 증축으로 향후 교통량 증가에 따라 기존도로를 확장하여

교통불편 해소

○ 수성못을 찾는 관광객과 산책로를 이용하는 시민들에게 쾌적한

도로환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1월 ~ 2018. 12월

○ 위 치 : 용학로(호텔수성네거리~불교한방병원네거리)

○ 규 모 : 도로확장 B= 15 → 20m, L= 280m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,050백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,050			50	2,000
국 비
시 도 비
시군구비
지 방 채
민간자본	2,050			50	2,000
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10 %)

○ 2015. 8월 : 협약체결(수성구청↔(주)수성호텔)

○ 2016. 6월 : 사업비 1차 납부(50백만원)

○ 2016. 7월 : 도시계획선 분할측량

□ 향후계획

○ 2016. 10월 : 토지조서 및 지장물조서 작성

○ 2017.  1월 : 사업비 2차납부(10억원)

○ 2017.  3월 : 실시계획 사전열람 및 보상사전열람

○ 2017.  6월 : 보상협의

○ 2018.  1월 : 공사착공

○ 2018. 12월 : 공사착공

사업명

고산2동 대흥마을 진입도로 건설

담당자

건설과 김건식(☎666-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개발제한구역 해제지역의 마을 진입도로 건설

○ 집단취락지역의 교통환경 개선으로 민원해소 및 지역개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1월 ~ 2018. 12월

○ 위 치 : 대흥동 137번지선 일원

○ 규 모 : 도로건설 B= 8.0m, L= 555m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,100			1,520	1,580
국 비
시 도 비
시군구비	3,100			1,520	1,580
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15 %)

○ 2016. 1월 : 실시설계용역 착수

○ 2016. 3월 : 실시설계용역 완료

○ 2016. 5월 : 실시계획 사전열람 공고 및 실시계획 고시

○ 2016. 6월 : 보상사전열람공고

□ 향후계획

○ 2016.  8월 : 감정평가

○ 2016. 12월 : 보상협의

○ 2017.  1월 : 공사착공

○ 2017. 12월 : 공사준공

사업명

개발제한구역 훼손지 복구사업

담당자

공원녹지과 김동현(☎666-2903)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성의료지구 개발제한구역 훼손지 복구사업을 도심 속 공원조성 사업으로 추진하여

도심의 휴양 및 다양한 여가·문화공간을 확충하고자 함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2015년 ~ 2017년

○ 위  치 : 황금동 산106번지 일원

○ 규  모 : 108,372㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	16,500	-	4,004	10,996	1,500
국 비
시 도 비
시군구비	16,500	-	4,004	10,996	1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  35%)

○ 대구도시공사와 사업비 등 사업전반에 관한 협약 체결 : 2014. 11

○ 공원, 공원조성계획 결정 및 실시설계 용역 착수 : 2015. 7

○ 문화재 지표조사 완료 : 2015. 9

○ 전략 및 소규모환경영향평가 용역 착수 : 2015. 10

○ 분할측량 및 지장물건 조사 : 2015. 11 ~ 12

○ 주민설명회 개최 : 2015. 12

□ 향후계획

○ 2016.  2 ~ 5 : 보상계획 공고, 보상설명회 개최, 감정평가

○ 2016.  7 ~ 2017. 5 : 토지보상

○ 2016. 12 : 공원 및 조성계획 결정 고시

○ 2017.  5 : 공사착수

○ 2017. 12 : 공사준공

사업명

고산 보건복지센터 신축

담당자

보건행정과 김범수 (☎666-3118)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고산지역 주민의 보건․복지 수요충족을 위해 건강생활지원센터와 노인복지관이

함께 하는 복합건축물을 건립하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 2월 ~ 2015. 10월

○ 위  치 : 신매동 170-2(고산1동 주민센터 동남편)

○ 규  모 : 대지 1,000m2, 건축면적 2,081.58m2(지하1층/지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,099백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,099	3,593	2,506
국 비			919
시 도 비			732
시군구비		1,500	855
지 방 채
민간자본
기 타		2,093

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 부지 매입 : 2013. 6. 25

○ 2015 건강생활지원센터 사업 우선지원대상 선정 : 2013. 10. 22

○ 고산권 보건복지센터 설계용역 완료 : 2014. 7. 19

○ 공사 일상감사 및 계약심사 요청 : 2014. 8. 21

○ 착공 : 2014. 10. 24

○ 준공 : 2015. 10. 23

□ 향후계획

○ 고산건강생활지원센터로 정상운영 중

9-2. 지방채 발행사업

우리 구에서 ‘15년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
고산권 도서관 건립	8,103	1,300	3,439		1,764	1,600	2,000	100%

9-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

고산권 도서관 건립

담당자

문화체육과 김종원(☎666-2162)

□ 사업목적 및 필요성

○ 10만 이상의 주민이 거주하는 고산지역에 공공도서관이 없어 지역주민의

정보접근성과 문화향유권 제고를 위한 공공도서관 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2015

○ 위 치 : 대구광역시 수성구 달구벌대로650길 6(신매동)

○ 규 모 : 부지 2,080.1㎡, 연면적 2,991.98㎡(지하 1층, 지상 4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,493백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,493	3,329	4,164
지 방 채	1,274		1,274
국 비	2,916	1,112	1,804
시 도 비
시군구비	1,703	617	1,086
기 타	1,600	1,600

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2011. 5 : 도서관건립 기본계획수립

○ 2012. 7 : 부지확보

○ 2013. 9 : 설계용역 완료

○ 2014. 2 : 공사착공

○ 2015. 6 : 공사준공

□ 향후계획

○ 풍부한 장서구입과 다양한 프로그램 운영으로 주민 만족도 제고

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 12,000백만원 → 변경 8,803백만원(사업규모 축소)

○ 사업규모(연면적) : 당초 3,600㎡ → 2,991.98㎡

○ 사업기간연장 : 당초 2015. 2월 준공 → 2015. 6월 준공

9-3. 민간투자사업

우리 구에서 ‘15년에 추진한 민간투자사업 현황은 없습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’14년까지 부담액	’15년 부담액	’16년 이후 부담 예정액
		해 당	없 음