11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 구에서 2013년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
범어천 생태하천 복원사업 (의뢰)	22,700	3,583	9,755	9,362	2015	2009
수성생활체육공원 조성 (의뢰)	1,382	609	773	0	2013	2009
파동문화센터 건립 (자체)	4,600	490	1,909	2,201	2014	2011
고산권 공공도서관 건립 (의뢰)	8,803	204	344	8,255	2015	2011
수성국민체육센터 건립 (의뢰)	11,146	0	658	10,488	2016	2011
해피타운 프로젝트 (자체)	4,000	590	1,975	1,435	2014	2011
진밭골 진입도로 확장공사 (의뢰)	6,500	119	782	5,599	2015	2011
지산․범물권 노인복지관 건립 (자체)	4,375	74	2,223	2,078	2014	2011
고산보건복지센터 신축 (의뢰)	6,700	0	1,497	5,203	2015	2013
한방 휴 사업 (의뢰)	1,430	0	78	1,352	2015	2014

▸투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2013년에 추진한 사업으로서 2013년까지는 집행액, 2014년부터는 계획액(이월액+향후 소요액)을 기준으로 작성하였습니다.

▸사업별 세부내역은 “11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황”을 참조하시기 바랍니다.

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황 : 붙임 참조

사업명

범어천 생태하천 복원사업(의뢰)

담당자

건설과 이철우(☎666-2926)

사업목적 및 필요성

○ 도심지의 오염된 하천을 친환경적인 생태하천으로 복원하고 치수기능 강화

○ 도심지 하천주변 주민들의 편의와 도시미관 향상을 위한 자연경관적 하천 조성

사업개요

○ 기    간 : 2009. 4월 ~ 2015. 6월

○ 위    치 : 두산오거리~어린이회관삼거리(1단계), 대구중앙고 동북편~신천합류지점(2단계)

○ 시 공 사

- 1단계 (주)인산종합건설 외 2개사

- 2단계 상서종합건설(주) 외 2개사

○ 사업규모 : 생태하천 정비 L=2.3㎞

○ 사업내용 : 생태하천 복원 L=2.3㎞, 유지용수관로 설치, 친수공간 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,700백만원

※ 투융자심사 당초 사업비 : 28,250백만원(국비 19,775, 시비 5,932, 구비 2,543)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2013년	2014년 (전년도이월액+연말까지 소요액)	2015년 이후 (계획액)
계	22,700	3,583	9,755	7,862	1,500
국비	11,350	2,983	4,100	3,517	750
시비	6,810	362	3,313	2,685	450
구비	4,540	238	2,342	1,660	300

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 범어천(1단계) 생태하천 복원사업 : 공사 준공

○ 범어천(2단계) 생태하천 복원사업 : 공정률 33%

향후계획

○ 범어천(2단계) 생태하천 복원사업 준공 : 2015. 6월

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 28,250백만원 → 변경 22,700백만원(사업내용 변경)

○ 사업기간연장 : 당초 2014. 12월 준공 → 변경 2015. 6월 준공

사업명

수성생활체육공원 조성(의뢰)

담당자

문화체육과 류병창(☎666-2182)

사업목적 및 필요성

○ 생활체육의 활성화와 공공체육시설 인프라 확충

사업개요

○ 기    간 : 2010 ~ 2013. 8월

○ 위    치 : 지산동 산136번지 일원

○ 시 공 사 : 강남조경

○ 사업규모 : 부지 17,893㎡, 시설면적 3,991㎡

○ 사업내용 : 족구장, 주차장, 다목적광장, 산책로, 야외형 헬스기구, 정자 등 설치

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,382백만원

※ 투융자심사 당초 사업비 : 6,000백만원(국비 1,200, 시비 1,400, 구비 3,400)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액		향후 소요액
		기투자	2013년	2014년 (전년도이월액+연말까지 소요액)	2015년 이후 (계획액)
계	1,382	609	773	0	0
국비	330	205	125	0	0
시비	385	0	385	0	0
구비	304	41	263	0	0
특별교부세	363	363	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 완료)

○ 토목, 조경공사 준공 : 2013. 7월

○ 전기공사 준공 : 2013. 8월

○ 산책로 주변 차폐수목 보식 : 2013. 10월 ~ 11월 경

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 6,000백만원 → 변경 1,382백만원(사업위치 변경 및 사업규모 축소)

○ 사업규모 : 당초 부지면적 38,498㎡, 시설면적 20,000㎡

→ 변경 부지면적 17,893㎡, 시설면적 3,991㎡

사업명

파동문화센터 건립(자체)

담당자

평생교육과 권순남(☎666-4232)

사업목적 및 필요성

○ 문화시설 및 도심기반시설이 취약한 파동지역에 문화기반시설 확충으로 지역주민 삶의 질 향상 및 지역 문화 향유권 확대

사업개요

○ 기    간 : 2010 ~ 2014. 8월

○ 위    치 : 파동 527-1번지 외 7필지

○ 사업규모 : 대지면적 1,476㎡, 연면적 1,314.6㎡(지하1층, 지상3층)

○ 사업내용 : 문화센터 건립

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,600백만원

※ 투융자심사 당초 사업비 : 3,800백만원(국비 1,350, 시비 2,450)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액		향후 소요액
		기투자	2013년	2014년 (전년도이월액+연말까지 소요액)	2015년 이후 (계획액)
계	4,600	490	1,909	2,201	0
국비	1,350	0	516	834	0
시비	3.250	490	1,393	1,367	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

○ 파동문화센터 조성계획 수립 : 2010. 1월

○ 설계 완료 : 2013. 7월

○ 공사 착공 : 2013. 9월

향후계획

○ 공사 준공 : 2014. 7월

○ 문화센터 개관 : 2014. 11월

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 3,800백만원 → 변경 4,600백만원(부지매입비 증가)

○ 사업규모(연면적) : 당초 1,600㎡ → 1,314.6㎡

사업명

고산권 공공도서관 건립(의뢰)

담당자

문화체육과 박정희(☎666-2162)

사업목적 및 필요성

○ 10만 이상의 주민이 거주하는 지역에 공공도서관이 없어 정보접근성 저해

○ 문화 향유권 제고와 지식정보 격차를 해소하여 주민 삶의 질 향상

사업개요

○ 기    간 : 2011 ~ 2015. 5월

○ 위    치 : 신매동 571-1

○ 사업규모 : 부지면적 2,080㎡, 연면적 2,991.98㎡(지하1층, 지상4층)

○ 사업내용 : 종합자료실, 어린이자료실, 디지털자료실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,803백만원

※ 투융자심사 당초 사업비 : 12,000백만원(국비 4,000, 시비 3,000, 구비 5,000)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액		향후 소요액
		기투자	2013년	2014년 (전년도이월액+연말까지 소요액)	2015년 이후 (계획액)
계	8,803	204	344	4,125	4,130
국비	3,440	0	136	1,592	1,712
구비	1,763	204	208	933	418
특별교부세	1,000	0	0	1,000	0
특별교부금	600	0	0	600	0
지방채	2,000	0	0	0	2,000

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 공유재산관리계획 변경계획 승인 : 2012. 5월

○ 부지 매입 : 2012. 7월

○ 설계 시행 : 2013. 2월 ~ 2013. 10월

○ 공사 착공 : 2013. 12월

○ 2층 골조공사 : 2013. 7월(현재 공정률 25%)

향후계획

○ 공사 준공 : 2015. 5월

○ 도서관 개관 : 2015. 하반기

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 12,000백만원 → 변경 8,803백만원(사업규모 축소)

○ 사업규모(연면적) : 당초 3,600㎡ → 2,991.98㎡

○ 사업기간연장 : 당초 2015. 2월 준공 → 2015. 5월 준공

사업명

수성국민체육센터 건립(의뢰)

담당자

문화체육과 류병창(☎666-2182)

사업목적 및 필요성

○ 다목적 체육관을 건립하여 지역 주민들에게 쾌적한 운동환경을 제공

사업개요

○ 기    간 : 2011 ~ 2016. 6월

○ 위    치 : 범어동 산176-1번지 일원

○ 사업규모 : 부지 10,851㎡, 건축연면적 3,394㎡(지하1층, 지상2층)

○ 사업내용 : 다목적체육관, 헬스장, 체력측정실, 다목적체육강좌실, 사무실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,146백만원

※ 투융자심사 당초 사업비 : 7,400백만원(국비 3,000, 구비 4,400)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액		향후 소요액
		기투자	2013년	2014년 (전년도이월액+연말까지 소요액)	2015년 이후 (계획액)
계	11,146	0	658	3,944	6,544
국비	3,100	0	366	2,734	0
구비	5,446	0	292	1,210	3,944
지방채	2,600	0	0	0	2,600

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 기본계획 수립 : 2011. 4월

○ 생활체육시설 지원사업 공모·선정 : 2012. 1월(체육진흥기금 31억원 확보)

○ 설계시행 : 2013. 6월 ~ 2013. 11월

○ 토지 수용재결(지토위,중토위) : 2013. 11월 ~ 2014. 8월

향후계획

○ 일상감사 및 계약심사 : 2014. 8월

○ 입찰 및 업체선정 : 2014. 9월

○ 공사 착공 : 2014. 10월

○ 공사 준공 : 2016. 6월

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 7,400백만원 → 변경 11,146백만원(건축단가 등 조정)

○ 지방채 발행 : 당초 0백만원 → 변경 2,600백만원

○ 사업기간 : 당초 2014. 12월 → 2016. 12월

사업명

해피타운 프로젝트(자체)

담당자

도시디자인과 유정주(☎666-3271)

사업목적 및 필요성

○ 노후화된 저층주택지에 주차․방범․소공원 등 편의시설이 잘 갖춰진 공동주택의 장점을 접목하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

사업개요

○ 기    간 : 2012 ~ 2014. 12월

○ 위    치

- 만촌동658번지 외 260필지(70,000㎡), 만촌동935번지 외 316필지(89,740㎡)

- 범어동 399-10번지 외 185필지(50,000㎡), 상동 149-26번지 외 127필지(22,627㎡)

○ 사업내용 : CCTV 및 보안등설치, 벽화거리조성, 담장허물기, 주민역량강화사업,

도시가스 공급관 설치, 도로개․보수, 주차장조성, 녹지조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원(국비 2,000, 시비 1,000, 구비 1,000)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액		향후 소요액
		기투자	2013년	2014년 (전년도이월액+연말까지 소요액)	2015년 이후 (계획액)
계	4,000	590	1,975	1,435	0
국비	2,000	328	1,197	475	0
시비	1,000	131	389	480	0
구비	1,000	131	389	480	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 만촌1, 2동 설계 완료 : 2012. 6월

○ 만촌1, 2동 사업 시행 : 2012. 7월

○ 범어2동, 상동 설계 완료 : 2013. 8월

○ 범어2동, 상동 사업 시행 : 2013. 9월

○ 만촌1, 2동 사업 완료 : 2014. 2월

향후계획

○ 범어2동, 상동 사업 완료 : 2014. 12월

사업명

진밭골 진입도로 확장공사(의뢰)

담당자

공원녹지과 김종면(☎666-2833)

사업목적 및 필요성

○ 지역주민들의 도심휴양지로 이용이 많은 대덕지 및 진밭골 진입도로 확보

○ 차량정체 해소와 도로폭원 협소로 인한 차량의 접촉․추락사고 예방

사업개요

○ 기    간 : 2012 ~ 2015. 6월

○ 위    치 : 범물동 1193번지선(진밭1교~진밭골 취락지구)

○ 사업규모 : L(길이)=2,600m, B(폭)=3m ⇒ 8m

○ 사업내용 : 도로확장

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,500백만원

※ 투융자심사 당초 사업비 : 8,000백만원(국비 7,200, 구비 800)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액		향후 소요액
		기투자	2013년	2014년 (전년도이월액+연말까지 소요액)	2015년 이후 (계획액)
계	6,500	119	782	5,599	0
국비	3,000	119	704	2,177	0
구비	3,000	0	78	2,922	0
특별교부세	500	0	0	500	0

추진상황

○ 도시계획시설결정 및 설계용역 : 2012. 6월 ~ 2013. 4월

○ 일반교통안전진단 : 2013. 5월 ~ 2013. 6월

○ 도시계획시설사업 실시계획 인가 협의 및 고시 : 2013. 7월

○ 보상협의 : 2013. 8월

향후계획

○ 공사 착공 : 2013. 12월

○ 공사 준공 : 2015. 6월

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 8,000백만원  → 변경 6,500백만원(사업규모 축소)

○ 사업규모(도로폭) : 당초 10m → 변경 8m

사업명

지산․범물권 노인복지관 건립(자체)

담당자

복지과 최윤선(☎666-2558)

사업목적 및 필요성

○ 급속화되고 있는 고령화 사회에 복합적 노인복지서비스 수요 급증

○ 어르신들이 심리적, 육체적으로 건강하고 이상적인 여가활동 참여 기회 확대 제공

사업개요

○ 기    간 : 2011. 9월 ~ 2014. 5월

○ 위    치 : 범안로 99(범물동 1288)

○ 시 공 사 : (주)서림종합건설

○ 사업규모 : 부지 1,200.3㎡, 연면적 1,791.51㎡(지하1층, 지상3층)

○ 사업내용 : 사무실, 식당, 교육실, 건강증진실, 강당, 물리치료실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,375백만원

※ 투융자심사 당초 사업비 : 3,990백만원(특별교부세 2,000, 시비 600, 구비 1,390)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액		향후 소요액
		기투자	2013년	2014년 (전년도이월액+연말까지 소요액)	2015년 이후 (계획액)
계	4,375	74	2,223	2,078	0
시비	658	0	315	343	0
구비	1,587	74	548	965	0
특별교부세	1,700	0	1,360	340	0
특별교부금	430	0	0	430	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 완료)

○ 설계 시행 : 2012. 9월 ~ 2013. 3월

○ 공사 시행 : 2013. 5월 ~ 2014. 5월

○ 시범 운영 : 2014. 7월 ~ 8월

향후계획

○ 개관(범물실버복지센터) : 2014. 9월

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 3,990백만원 → 4,697백만원(부지매입비 및 공사비 증가)

○ 사업규모(부지면적) : 당초 1,000㎡ → 변경 1,200.3㎡(건물의 효율적 배치)

사업명

고산보건복지센터 신축(의뢰)

담당자

보건행정과 김명수(☎666-3118)

사업목적 및 필요성

○ 고산지역 주민의 보건․복지 수요충족을 위해 건강생활지원센터와 노인복지관이 함께 하는 복합건축물을 건립하고자 함

사업개요

○ 기    간 : 2013. 2월 ~ 2015. 10월

○ 위    치 : 신매동 170-2(고산1동 주민센터 동남편)

○ 사업규모 : 대지 1,000m2, 건축면적 2,081.58m2(지하1층, 지상4층)

○ 사업내용 : 건강생활지원센터(1~2층), 노인복지관(3~4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,700백만원(국비 891, 시비 732, 구비 5,077)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액		향후 소요액
		기투자	2013년	2014년 (전년도이월액+연말까지 소요액)	2015년 이후 (계획액)
계	6,700	0	1,497	2,096	3,107
국비	891	0	0	0	891
시비	732	0	0	0	732
구비	2,384	0	1,497	3	884
특별교부세	1,600	0	0	1,000	600
기금	1,093	0	0	1,093	0

추진상황

○ 고산권 보건복지센터 건립 기본계획 수립 : 2013. 2월

○ 부지 확보 : 2013. 6월

○ 설계 시행 : 2014. 1월 ~ 2014. 7월

향후계획

○ 공사 착공 : 2014. 10월

○ 공사 준공 : 2015. 10월

사업명

한방 휴 사업(의뢰)

담당자

보건행정과 김미선(☎666-3241)

사업목적 및 필요성

○ 대구광역시 수성구․달성군, 경상북도 청도군의 우수한 한방의료(Medical)-휴양(Recreation)-문화체험(Culture experience) 등을 연계한 국내․외 관광객 유치를 통해 매출증대, 일자리 창출로 지역경제 활성화

사업개요

○ 기    간 : 2013. 7월 ~ 2015. 12월

○ 위    치 : 수성구, 달성군, 청도군 일원

○ 사업내용

- 한방 휴 프로그램 개발 및 운영(한방의료관광, 문화관광 자원 등 연계)

- 한방 휴 하우징 사업(인프라 개선을 통해 휴 환경 제공)

- 한방 휴 제품화 사업(한방의료, 뷰티케어 등 체험프로그램 상품개발 및 제품화)

- 한방 휴 마케팅 사업(프로그램 및 우수 개발 제품의 판매 홍보 및 마케팅) 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,430백만원(국비 1,189, 구비 133, 민자 108)

※ 수성구, 달성군, 청도군 총사업비 : 4,147백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액		향후 소요액
		기투자	2013년	2014년 (전년도이월액+연말까지 소요액)	2015년 이후 (계획액)
계	1,430	0	78	886	466
국비	1,189	0	77	719	393
구비	133	0	1	89	43
민자	108	0	0	78	30

추진상황

○ 기본계획 수립 : 2013. 1월

○ 수성구-달성군-청도군 MOU 체결, 연계사업 신청 : 2013. 2월

○ 사업 시행 : 2013. 7월 ~

향후계획

○ 사업 완료 : 2015. 12월

11-2. 지방채 발행사업

우리 구에서 2013년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
	해		당		없		음

▸지방채 발행사업 중 2013년에 추진한 사업을 기준으로 작성하였습니다.

11-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황 : 해당없음

11-3. 민간투자사업

우리 구에서 2013년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.

(단위: 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’12년까지 부담액	’13년 부담액	’14년이후 부담예정액
BTL	해		당		없		음
BTO	해		당		없		음

11-3-1. 개별 민간투자사업 현황 : 해당없음