사업명

범어천 생태하천 복원사업(의뢰)

담당자

건설과 이철우(☎666-2926)

사업목적 및 필요성

○ 도심지의 오염된 하천을 친환경적인 생태하천으로 복원하고 치수기능 강화

○ 도심지 하천주변 주민들의 편의와 도시미관 향상을 위한 자연경관적 하천 조성

사업개요

○ 기    간 : 2009. 4월 ~ 2015. 6월

○ 위    치 : 두산오거리~어린이회관삼거리(1단계), 대구중앙고 동북편~신천합류지점(2단계)

○ 시 공 사

- 1단계 (주)인산종합건설 외 2개사

- 2단계 상서종합건설(주) 외 2개사

○ 사업규모 : 생태하천 정비 L=2.3㎞

○ 사업내용 : 생태하천 복원 L=2.3㎞, 유지용수관로 설치, 친수공간 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,700백만원

※ 투융자심사 당초 사업비 : 28,250백만원(국비 19,775, 시비 5,932, 구비 2,543)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2013년	2014년 (전년도이월액+연말까지 소요액)	2015년 이후 (계획액)
계	22,700	3,583	9,755	7,862	1,500
국비	11,350	2,983	4,100	3,517	750
시비	6,810	362	3,313	2,685	450
구비	4,540	238	2,342	1,660	300

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 범어천(1단계) 생태하천 복원사업 : 공사 준공

○ 범어천(2단계) 생태하천 복원사업 : 공정률 33%

향후계획

○ 범어천(2단계) 생태하천 복원사업 준공 : 2015. 6월

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 28,250백만원 → 변경 22,700백만원(사업내용 변경)

○ 사업기간연장 : 당초 2014. 12월 준공 → 변경 2015. 6월 준공

사업명

수성생활체육공원 조성(의뢰)

담당자

문화체육과 류병창(☎666-2182)

사업목적 및 필요성

○ 생활체육의 활성화와 공공체육시설 인프라 확충

사업개요

○ 기    간 : 2010 ~ 2013. 8월

○ 위    치 : 지산동 산136번지 일원

○ 시 공 사 : 강남조경

○ 사업규모 : 부지 17,893㎡, 시설면적 3,991㎡

○ 사업내용 : 족구장, 주차장, 다목적광장, 산책로, 야외형 헬스기구, 정자 등 설치

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,382백만원

※ 투융자심사 당초 사업비 : 6,000백만원(국비 1,200, 시비 1,400, 구비 3,400)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액		향후 소요액
		기투자	2013년	2014년 (전년도이월액+연말까지 소요액)	2015년 이후 (계획액)
계	1,382	609	773	0	0
국비	330	205	125	0	0
시비	385	0	385	0	0
구비	304	41	263	0	0
특별교부세	363	363	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 완료)

○ 토목, 조경공사 준공 : 2013. 7월

○ 전기공사 준공 : 2013. 8월

○ 산책로 주변 차폐수목 보식 : 2013. 10월 ~ 11월 경

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 6,000백만원 → 변경 1,382백만원(사업위치 변경 및 사업규모 축소)

○ 사업규모 : 당초 부지면적 38,498㎡, 시설면적 20,000㎡

→ 변경 부지면적 17,893㎡, 시설면적 3,991㎡

사업명

파동문화센터 건립(자체)

담당자

평생교육과 권순남(☎666-4232)

사업목적 및 필요성

○ 문화시설 및 도심기반시설이 취약한 파동지역에 문화기반시설 확충으로 지역주민 삶의 질 향상 및 지역 문화 향유권 확대

사업개요

○ 기    간 : 2010 ~ 2014. 8월

○ 위    치 : 파동 527-1번지 외 7필지

○ 사업규모 : 대지면적 1,476㎡, 연면적 1,314.6㎡(지하1층, 지상3층)

○ 사업내용 : 문화센터 건립

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,600백만원

※ 투융자심사 당초 사업비 : 3,800백만원(국비 1,350, 시비 2,450)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액		향후 소요액
		기투자	2013년	2014년 (전년도이월액+연말까지 소요액)	2015년 이후 (계획액)
계	4,600	490	1,909	2,201	0
국비	1,350	0	516	834	0
시비	3.250	490	1,393	1,367	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

○ 파동문화센터 조성계획 수립 : 2010. 1월

○ 설계 완료 : 2013. 7월

○ 공사 착공 : 2013. 9월

향후계획

○ 공사 준공 : 2014. 7월

○ 문화센터 개관 : 2014. 11월

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 3,800백만원 → 변경 4,600백만원(부지매입비 증가)

○ 사업규모(연면적) : 당초 1,600㎡ → 1,314.6㎡

사업명

고산권 공공도서관 건립(의뢰)

담당자

문화체육과 박정희(☎666-2162)

사업목적 및 필요성

○ 10만 이상의 주민이 거주하는 지역에 공공도서관이 없어 정보접근성 저해

○ 문화 향유권 제고와 지식정보 격차를 해소하여 주민 삶의 질 향상

사업개요

○ 기    간 : 2011 ~ 2015. 5월

○ 위    치 : 신매동 571-1

○ 사업규모 : 부지면적 2,080㎡, 연면적 2,991.98㎡(지하1층, 지상4층)

○ 사업내용 : 종합자료실, 어린이자료실, 디지털자료실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,803백만원

※ 투융자심사 당초 사업비 : 12,000백만원(국비 4,000, 시비 3,000, 구비 5,000)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액		향후 소요액
		기투자	2013년	2014년 (전년도이월액+연말까지 소요액)	2015년 이후 (계획액)
계	8,803	204	344	4,125	4,130
국비	3,440	0	136	1,592	1,712
구비	1,763	204	208	933	418
특별교부세	1,000	0	0	1,000	0
특별교부금	600	0	0	600	0
지방채	2,000	0	0	0	2,000

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 공유재산관리계획 변경계획 승인 : 2012. 5월

○ 부지 매입 : 2012. 7월

○ 설계 시행 : 2013. 2월 ~ 2013. 10월

○ 공사 착공 : 2013. 12월

○ 2층 골조공사 : 2013. 7월(현재 공정률 25%)

향후계획

○ 공사 준공 : 2015. 5월

○ 도서관 개관 : 2015. 하반기

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 12,000백만원 → 변경 8,803백만원(사업규모 축소)

○ 사업규모(연면적) : 당초 3,600㎡ → 2,991.98㎡

○ 사업기간연장 : 당초 2015. 2월 준공 → 2015. 5월 준공

사업명

수성국민체육센터 건립(의뢰)

담당자

문화체육과 류병창(☎666-2182)

사업목적 및 필요성

○ 다목적 체육관을 건립하여 지역 주민들에게 쾌적한 운동환경을 제공

사업개요

○ 기    간 : 2011 ~ 2016. 6월

○ 위    치 : 범어동 산176-1번지 일원

○ 사업규모 : 부지 10,851㎡, 건축연면적 3,394㎡(지하1층, 지상2층)

○ 사업내용 : 다목적체육관, 헬스장, 체력측정실, 다목적체육강좌실, 사무실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,146백만원

※ 투융자심사 당초 사업비 : 7,400백만원(국비 3,000, 구비 4,400)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액		향후 소요액
		기투자	2013년	2014년 (전년도이월액+연말까지 소요액)	2015년 이후 (계획액)
계	11,146	0	658	3,944	6,544
국비	3,100	0	366	2,734	0
구비	5,446	0	292	1,210	3,944
지방채	2,600	0	0	0	2,600

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 기본계획 수립 : 2011. 4월

○ 생활체육시설 지원사업 공모·선정 : 2012. 1월(체육진흥기금 31억원 확보)

○ 설계시행 : 2013. 6월 ~ 2013. 11월

○ 토지 수용재결(지토위,중토위) : 2013. 11월 ~ 2014. 8월

향후계획

○ 일상감사 및 계약심사 : 2014. 8월

○ 입찰 및 업체선정 : 2014. 9월

○ 공사 착공 : 2014. 10월

○ 공사 준공 : 2016. 6월

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 7,400백만원 → 변경 11,146백만원(건축단가 등 조정)

○ 지방채 발행 : 당초 0백만원 → 변경 2,600백만원

○ 사업기간 : 당초 2014. 12월 → 2016. 12월

사업명

해피타운 프로젝트(자체)

담당자

도시디자인과 유정주(☎666-3271)

사업목적 및 필요성

○ 노후화된 저층주택지에 주차․방범․소공원 등 편의시설이 잘 갖춰진 공동주택의 장점을 접목하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

사업개요

○ 기    간 : 2012 ~ 2014. 12월

○ 위    치

- 만촌동658번지 외 260필지(70,000㎡), 만촌동935번지 외 316필지(89,740㎡)

- 범어동 399-10번지 외 185필지(50,000㎡), 상동 149-26번지 외 127필지(22,627㎡)

○ 사업내용 : CCTV 및 보안등설치, 벽화거리조성, 담장허물기, 주민역량강화사업,

도시가스 공급관 설치, 도로개․보수, 주차장조성, 녹지조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원(국비 2,000, 시비 1,000, 구비 1,000)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액		향후 소요액
		기투자	2013년	2014년 (전년도이월액+연말까지 소요액)	2015년 이후 (계획액)
계	4,000	590	1,975	1,435	0
국비	2,000	328	1,197	475	0
시비	1,000	131	389	480	0
구비	1,000	131	389	480	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 만촌1, 2동 설계 완료 : 2012. 6월

○ 만촌1, 2동 사업 시행 : 2012. 7월

○ 범어2동, 상동 설계 완료 : 2013. 8월

○ 범어2동, 상동 사업 시행 : 2013. 9월

○ 만촌1, 2동 사업 완료 : 2014. 2월

향후계획

○ 범어2동, 상동 사업 완료 : 2014. 12월

사업명

진밭골 진입도로 확장공사(의뢰)

담당자

공원녹지과 김종면(☎666-2833)

사업목적 및 필요성

○ 지역주민들의 도심휴양지로 이용이 많은 대덕지 및 진밭골 진입도로 확보

○ 차량정체 해소와 도로폭원 협소로 인한 차량의 접촉․추락사고 예방

사업개요

○ 기    간 : 2012 ~ 2015. 6월

○ 위    치 : 범물동 1193번지선(진밭1교~진밭골 취락지구)

○ 사업규모 : L(길이)=2,600m, B(폭)=3m ⇒ 8m

○ 사업내용 : 도로확장

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,500백만원

※ 투융자심사 당초 사업비 : 8,000백만원(국비 7,200, 구비 800)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액		향후 소요액
		기투자	2013년	2014년 (전년도이월액+연말까지 소요액)	2015년 이후 (계획액)
계	6,500	119	782	5,599	0
국비	3,000	119	704	2,177	0
구비	3,000	0	78	2,922	0
특별교부세	500	0	0	500	0

추진상황

○ 도시계획시설결정 및 설계용역 : 2012. 6월 ~ 2013. 4월

○ 일반교통안전진단 : 2013. 5월 ~ 2013. 6월

○ 도시계획시설사업 실시계획 인가 협의 및 고시 : 2013. 7월

○ 보상협의 : 2013. 8월

향후계획

○ 공사 착공 : 2013. 12월

○ 공사 준공 : 2015. 6월

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 8,000백만원  → 변경 6,500백만원(사업규모 축소)

○ 사업규모(도로폭) : 당초 10m → 변경 8m

사업명

지산․범물권 노인복지관 건립(자체)

담당자

복지과 최윤선(☎666-2558)

사업목적 및 필요성

○ 급속화되고 있는 고령화 사회에 복합적 노인복지서비스 수요 급증

○ 어르신들이 심리적, 육체적으로 건강하고 이상적인 여가활동 참여 기회 확대 제공

사업개요

○ 기    간 : 2011. 9월 ~ 2014. 5월

○ 위    치 : 범안로 99(범물동 1288)

○ 시 공 사 : (주)서림종합건설

○ 사업규모 : 부지 1,200.3㎡, 연면적 1,791.51㎡(지하1층, 지상3층)

○ 사업내용 : 사무실, 식당, 교육실, 건강증진실, 강당, 물리치료실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,375백만원

※ 투융자심사 당초 사업비 : 3,990백만원(특별교부세 2,000, 시비 600, 구비 1,390)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액		향후 소요액
		기투자	2013년	2014년 (전년도이월액+연말까지 소요액)	2015년 이후 (계획액)
계	4,375	74	2,223	2,078	0
시비	658	0	315	343	0
구비	1,587	74	548	965	0
특별교부세	1,700	0	1,360	340	0
특별교부금	430	0	0	430	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 완료)

○ 설계 시행 : 2012. 9월 ~ 2013. 3월

○ 공사 시행 : 2013. 5월 ~ 2014. 5월

○ 시범 운영 : 2014. 7월 ~ 8월

향후계획

○ 개관(범물실버복지센터) : 2014. 9월

사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 3,990백만원 → 4,697백만원(부지매입비 및 공사비 증가)

○ 사업규모(부지면적) : 당초 1,000㎡ → 변경 1,200.3㎡(건물의 효율적 배치)

사업명

고산보건복지센터 신축(의뢰)

담당자

보건행정과 김명수(☎666-3118)

사업목적 및 필요성

○ 고산지역 주민의 보건․복지 수요충족을 위해 건강생활지원센터와 노인복지관이 함께 하는 복합건축물을 건립하고자 함

사업개요

○ 기    간 : 2013. 2월 ~ 2015. 10월

○ 위    치 : 신매동 170-2(고산1동 주민센터 동남편)

○ 사업규모 : 대지 1,000m2, 건축면적 2,081.58m2(지하1층, 지상4층)

○ 사업내용 : 건강생활지원센터(1~2층), 노인복지관(3~4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,700백만원(국비 891, 시비 732, 구비 5,077)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액		향후 소요액
		기투자	2013년	2014년 (전년도이월액+연말까지 소요액)	2015년 이후 (계획액)
계	6,700	0	1,497	2,096	3,107
국비	891	0	0	0	891
시비	732	0	0	0	732
구비	2,384	0	1,497	3	884
특별교부세	1,600	0	0	1,000	600
기금	1,093	0	0	1,093	0

추진상황

○ 고산권 보건복지센터 건립 기본계획 수립 : 2013. 2월

○ 부지 확보 : 2013. 6월

○ 설계 시행 : 2014. 1월 ~ 2014. 7월

향후계획

○ 공사 착공 : 2014. 10월

○ 공사 준공 : 2015. 10월

사업명

한방 휴 사업(의뢰)

담당자

보건행정과 김미선(☎666-3241)

사업목적 및 필요성

○ 대구광역시 수성구․달성군, 경상북도 청도군의 우수한 한방의료(Medical)-휴양(Recreation)-문화체험(Culture experience) 등을 연계한 국내․외 관광객 유치를 통해 매출증대, 일자리 창출로 지역경제 활성화

사업개요

○ 기    간 : 2013. 7월 ~ 2015. 12월

○ 위    치 : 수성구, 달성군, 청도군 일원

○ 사업내용

- 한방 휴 프로그램 개발 및 운영(한방의료관광, 문화관광 자원 등 연계)

- 한방 휴 하우징 사업(인프라 개선을 통해 휴 환경 제공)

- 한방 휴 제품화 사업(한방의료, 뷰티케어 등 체험프로그램 상품개발 및 제품화)

- 한방 휴 마케팅 사업(프로그램 및 우수 개발 제품의 판매 홍보 및 마케팅) 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,430백만원(국비 1,189, 구비 133, 민자 108)

※ 수성구, 달성군, 청도군 총사업비 : 4,147백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	집행액		향후 소요액
		기투자	2013년	2014년 (전년도이월액+연말까지 소요액)	2015년 이후 (계획액)
계	1,430	0	78	886	466
국비	1,189	0	77	719	393
구비	133	0	1	89	43
민자	108	0	0	78	30

추진상황

○ 기본계획 수립 : 2013. 1월

○ 수성구-달성군-청도군 MOU 체결, 연계사업 신청 : 2013. 2월

○ 사업 시행 : 2013. 7월 ~

향후계획

○ 사업 완료 : 2015. 12월